붙임 2

DDP건설공사에 대한 서울시와 시공사간의 물가변동 설계변경 현황(추가자료)

공 종	하도급사	공사기간	대상기간	설계변경일자	증가금액	비율(%)	설계변경 근거	비고
철골공사	㈜해성기공	'09.10.12~ ‘11.08.08	'09.10.12~ ‘10.05.31	‘10.10.7(1회)	111,838,738	3.52(1회)	지방계약법 제22조, 동법시행령73조
GFRC공사	㈜한국테크월	'09.09.30~ ‘11.08.08			-
컨벤션S/F공사	㈜대동엠에스	'10.07.12~ ‘11.06.20	'10.07.12~ ‘10.05.31	‘10.10.7(1회)	17,410,800	3.52(1회)
철골공사	대명건영㈜	'09.06.03~ ‘11.04.08	'09.06.03~ ‘10.05.31	‘10.10.7(1회)	1,087,965	3.52(1회)
골조공사	대웅토건㈜	'09.05.12~ ‘11.02.08	'09.05.12~ ‘10.05.31	‘10.10.7(1회)	39,687,023	3.52(1회)
AL.창호공사	㈜케이엔월덱스	'09.07.01~ ‘10.10.07			-
수장공사	㈜유창	'09.07.30~ ‘10.01.31			-
금속공사	㈜은성테크닉스	'10.11.01~ ‘13.11.30	'10.11.01~ ‘12.01.01	’11.6.27(2회) ‘12.10.25(3회)	38,574,800	3.85(2회) 3.1(3회)
AL C/W공사	㈜엘지하우시스	'11.05.04~ ‘13.11.30	'11.05.04~ ‘12.01.01	‘12.10.25(3회)	5,170,000	3.1(3회)
태양전지판넬공사	㈜쏠라이트	'11.03.14~ ‘13.11.30			-
토공사	마천건설㈜	'09.04.23~ ‘10.06.30			-
지하구조물공사	㈜중앙개발	'09.09.04~ ‘12.07.31	'09.09.04~ ‘11.01.31	‘10.10.7(1회) ’11.6.27(2회)	409,551,002	3.52(1회) 3.85(2회)
정화조공사	거보산업㈜	'09.09.11~ ‘13.11.30	'09.09.11~ ‘12.01.01	‘10.10.7(1회) ’11.6.23(2회) ‘12.10.26(3회)	4,310,900	3.52(1회) 3.85(2회) 3.1(3회)	지방계약법 제22조, 동법시행령73조
가스배관공사	다원건영㈜	'09.07.22~ ‘13.11.30	'09.07.22~ ‘12.01.01	‘10.10.7(1회) ’11.6.23(2회) ‘12.10.26(3회)	2,957,900	3.52(1회) 3.85(2회) 3.1(3회)
석공사	삼지석재공업㈜	'09.07.30~ ‘10.04.30			-
조경시설물공사	청우개발	'09.06.18~ ‘10.04.30			-
식재공사	㈜유일종합조경	'09.06.18~ ‘10.02.26			-