붙임 2

DDP건설공사에 대한 서울시와 시공사간의 물가변동 설계변경 현황

공 종	하도급사	공사기간	대상기간	설계변경일자	증가금액 (최종)	비율(%)	설계변경 근거	비고
외장판넬공사	ISS컨소시엄	'09.10.01 ~ ‘13.11.30	‘10.05.30 ~ ’13.11.30	‘10.10.7(1회) ’11.6.27(2회) ‘12.10.25(3회)	2,486,427,677	3.52(1회) 3.85(2회) 3.1(3회)	지방계약법 제22조, 동법시행령73조	정산 진행중
수장공사	㈜유창플러스	'11.03.25 ~ ‘13.11.30	‘12.01.01 ~ ’13.11.30	‘12.10.25(3회)	17,710,000	3.1		정산 진행중
인테리어공사1공구	㈜신화인테리어	'11.05.23 ~ ‘13.11.30	‘12.01.01 ~ ’13.11.30	‘12.10.25(3회)	89,317,800	3.1		정산 진행중
인테리어공사2공구	㈜국보디자인	'11.07.29 ~ ‘13.11.30	‘12.01.01 ~ ’13.11.30	‘12.10.25(3회)	120,817,400	3.1		정산 진행중
골조공사	남웅건설㈜	'09.11.04 ~ ‘13.11.30	‘10.05.30 ~ ’13.11.30	‘10.10.7(1회) ’11.6.27(2회) ‘12.10.25(3회)	71,241,652	3.52(1회) 3.85(2회) 3.1(3회)		정산 진행중
도장공사	동일산건㈜	'10.11.22 ~ ‘13.11.30	‘11.01.31 ~ ’13.11.30	‘11.6.27(2회), ‘12.10.25(3회)	28,837,600	3.85(2회) 3.1(3회)		정산 진행중
방수공사	삼일방수기업㈜	'09.06.22 ~ ‘13.11.30	‘10.05.30 ~ ’13.11.30	‘10.10.7(1회) ’11.6.27(2회) ‘12.10.25(3회)	123,434,092	3.52(1회) 3.85(2회) 3.1(3회)		정산 진행중
유리공사	에이원이엔씨㈜	'09.07.30 ~ ‘13.11.30	‘10.05.30 ~ ’13.11.30	‘10.10.7(1회) ’11.6.27(2회) ‘12.10.25(3회)	53,397,300	3.52(1회) 3.85(2회) 3.1(3회)		정산 진행중
습식공사	세우건업㈜	'09.07.30 ~ ‘13.11.30	‘10.05.30 ~ ’13.11.30	‘10.10.7(1회) ’11.6.27(2회) ‘12.10.25(3회)	128,370,321	3.52(1회) 3.85(2회) 3.1(3회)		정산 진행중
단열공사	㈜한범	'09.08-20 ~ ‘13.11.30	‘10.05.30 ~ ’13.11.30	‘10.10.7(1회) ’11.6.27(2회) ‘12.10.25(3회)	58,691,742	3.52(1회) 3.85(2회) 3.1(3회)		정산 진행중
토공구조물	마천건설㈜	'12.08.20 ~ ‘13.11.30			-			정산 진행중
일반배관소방공사	㈜우진아이엔에스	'09.09.09 ~ ‘13.11.30	‘10.05.30 ~ ’13.11.30	‘10.10.7(1회) ’11.6.27(2회) ‘12.10.25(3회)	347,066,500	3.52(1회) 3.85(2회) 3.1(3회)		정산 진행중
덕트설치공사	㈜세보엠이씨	'09.08.03 ~ ‘13.11.30	‘10.05.30 ~ ’13.11.30	‘10.10.7(1회) ’11.6.27(2회) ‘12.10.25(3회)	270,024,700	3.52(1회) 3.85(2회) 3.1(3회)		정산 진행중
자동제어공사	한경기전㈜	'09.09.11 ~ ‘13.11.30	‘10.05.30 ~ ’13.11.30	‘10.10.7(1회) ’11.6.27(2회) ‘12.10.25(3회)	71,949,900	3.52(1회) 3.85(2회) 3.1(3회)		정산 진행중
빙축열공사	㈜신성엔지니어링	'10.09.06 ~ ‘13.11.30	‘11.01.31 ~ ’13.11.30	’11.6.27(2회) ‘12.10.25(3회)	53,233,400	3.85(2회) 3.1(3회)		정산 진행중
연도설치공사	대성테크㈜	'09.10.20 ~ ‘13.11.30	‘10.05.30 ~ ’13.11.30	‘10.10.7(1회) ’11.6.27(2회) ‘12.10.25(3회)	7,101,600	3.52(1회) 3.85(2회) 3.1(3회)		정산 진행중
옥상녹화공사	㈜한국도시녹화	'11.08.05 ~ ‘13.11.30	‘12.01.01 ~ ’13.11.30	‘12.10.25(3회)	22,110,000	3.1		정산 진행중
석공사	㈜동아석재	'11.11.24 ~ ‘13.11.30	‘12.01.01 ~ ’13.11.30	‘12.10.25(3회)	13,750,000	3.1		정산 진행중
조경식재시설물공사	금강종합조경㈜	'11.12.28 ~ ‘13.11.30	‘12.01.01 ~ ’13.11.30	‘12.10.25(3회)	15,290,000	3.1		정산 진행중
철공공사외 16	해성기공 외16				5,070,394,316			정산 완료
계					9,049,166,000