49		자동차전용도로 관리업무 통합 추진계획

추진상황	정상추진	도시안전실	도로시설과	담당자	조현범	전화번호	2133-1670

		세부 개선내용
○ 자동차전용도로 관리업무의 시설공단 중심 통합 수행 및 내부적 경영 효율성 개선

□ 추진내용(계획)

○ 자동차전용도로 관리업무 시설공단으로 통합

- 공단인력 사업소 합동근무(시설물 관리노하우 전수) : ‘14. 5〜10

- 도로시설물 유지관리 업무 이관 : ‘14.11〜12

- 도로시설물 유지관리 업무 통합 : ‘15. 1. 1〜

- 수방업무 통합 : ‘15. 3 〜

- 제설업무 통합 : ‘15.11 〜

□ 연차별 추진계획

단 위 사 업	2014	2015
자동차전용도로 도로시설물 관리업무 통합	- 추진 방침 수립 - 합동근무 시행 - 시의회 동의안 통과 - 민간위탁심의 통과 - 공단 도로시설물 관리 조직 및 인력 구성 - 계약심사 및 협약서 심사 - 민간위탁 계약 체결	- 자동차전용도로 도로시설물 공단 관리 시행 (15.1.1)
자동차전용도로 수방업무 통합	- 수방업무 도로사업소와 공동 수행	- 수방업무 공단 통합 관리 시행(‘15.3월)
자동차전용도로 제설업무 통합	- 제설 노선 조정	- 제설업무 공단 통합 관리 시행(‘15.11월)

□ `14년 3분기 추진실적 : 이행률 85%(’14년도말 목표실적 대비 이행률)

○ ‘14. 1~9 : 市-공단 TF구성 및 운영

- 총 23회 회의 개최

○ ‘14. 3~4 : 관련부서 방문 협의(2회)

- 하반기 예산 운영 가능여부, 조직 및 인력 등 협의

- 예산담당관, 조직담당관, 평가담당관, 재정담당관

○ ‘14. 3.25 : 자동차전용도로 시설물 위탁 시의회(252회) 동의안 제출

- ‘14. 6.30 : 시의회 본회의 가결 통과(시의회 253회)

○ ‘14. 3~5 : 수방(침수도로) 시설 합동점검 및 모의훈련 실시

○ ‘14. 3~6 : 시설물 관리 직무분석 용역 시행(시설관리공단)

- 시행기관 : 지방공기업평가원

- 직무분석 결과

▹ 관리 적정 인력 47명(관리자 5명, 시설물 담당 38명, 서무 및 안전담당 4명)

○ ‘14. 4.17 : 자동차전용도로 통합관리 추진계획 수립(행정2부시장 방침)

○ ‘14. 5. 1~ : 도로사업소 및 공단 합동 근무 실시

- 기  간 : ‘14.5 ~ ’14.10(6개월)

- 근무방법 : 시설공단 시설물관리요원을 도로사업소로 파견하여 공동으로 시설물 유지관리업무 수행

- 공동근무 인력 : 12명(사업소별 2명)

○ ‘14. 7. 9 : 조례 개정 요청(도로시설과→도로관리과)

- 현재 조례 개정 추진중

○ ‘14. 8.18 : 민간위탁운영평가위원회 심의 통과

○ ‘14. 8. 26 : 공단 도로시설물 관리 신규 인력 채용 공고

○ ‘14. 9. 5 : 시설공단 조직 및 인력운역 계획 수립(행정2부시장 방침)

- 도로시설처 신설 :1처 4팀 47명

○ ‘14. 9. 29 : 공단 도로시설물 관리 유경험자(공무원) 채용 공고

※ 수방업무 도로사업소, 시설관리공단 공동 수행 중