재건축 지연 사업장 현황

시도명 (군.구)	재건축사업명	사업계획 승인일자	사업장위치	지연원인 및 사유	주민피해사항
서울시 (성북구)	석관1구역	2011.1.14	석관동341-16호일대	조합설립무효 행정소송이 대법원에 계류중이고, 대법원 판결시까지 집행정지 결정에 따라 조합업무 불가	특이사항 없음
“	정릉1구역	-	정릉동150-27호일대	경기침체와 사업성저하로 토지등소유자의 관망상태이고, 당초 조합 임원과 비대위의 의견 불일치	ʺ
“	정릉6구역	-	정릉동506-50호일대	조합무효 행정소송 등 주민갈등	ʺ
“	정릉7구역	2011.12.20	정릉동506-159호일대	건축계획에 포함된 대지 매입과 관련하여 이해관계자간 협의 진행 중	ʺ
“	종암2구역	-	종암동54-288호일대	경기침체와 사업성저하로 토지등소유자의 관망상태이고, 추진위원회와 비대위의 의견 불일치	ʺ
서울시 (은평구)	신사동19번지일대주택재건축사업	2006.07.11	신사동 19-190 외74필지	미이주 및 소송	사업비 증가
서울시 (마포구)	삼산(아)재건축	2008.4.21	합정동 437-18	조합설립인가무효소송 등 으로 사업지연 <소송종결로 추진 준비중>	특이사항 없음
“	망원동438재건축	2009.1.14	망원동438-46호일대	사업성 결여 및 조합장 사퇴등으로 유보 상태임.	“
서울시 (양천구	대경연립재건축	2003.06.30.	신정동 127-4외 33필지	분담금 문제 등으로 사업 지연, 시공사 부도로 인한 시공사 재선정	“
서울시(강남구)	개나리아파트4차재건축	2006. 7.11	역삼동 712-3 외 3필지	조합내부 의견 불일치 (분양계약 체결자와 분양계약을 체결하지 않은자의 의견 불일치)	사업추진 지연으로 인한 사업비 증가
서울시 (서초구)	신반포2차아파트재건축	-	잠원동 73	추진위원회 재구성중	특이사항 없음
“	신반포3차아파트재건축	-	반포동 1-1	조합설립인가 준비중 신반포3차 1개동(34동)이 조합설립인가반대에 따른 조합설립 지연 예상	ʺ
“	신반포4차아파트재건축	-	잠원동 70	추진위원회 재구성중	ʺ
“	신반포15차아파트재건축	-	반포동 12	조합설립인가 준비중	ʺ

시군구명	재건축사업명	사업계획 승인일자	사업장위치	지연원인 및 사유	주민피해사항
서울시 (서초구	신반포23차아파트재건축	-	반포동 1-19	조합설립인가 준비중	특이사항 없음
“	한신4지구아파트재건축	-	잠원동 58-22	추진위원회 재구성중	ʺ
“	반포3주구아파트재건축	-	반포동 1053	조합임원 재구성중	ʺ
“	반포경남아파트재건축	-	반포동 1-8	조합설립인가 준비중	ʺ
“	신반포7차아파트재건축	-	잠원동 65-32	조합임원 재구성중	ʺ
“	반포우성아파트재건축	2005-12-30	잠원동 74-1	관리처분인가 계획중	ʺ
“	서초신동아아파트재건축	-	서초동 1333	조합설립인가 준비중	ʺ
“	서초진흥아파트재건축	-	서초동 1315	추진위원회 재구성중	ʺ
서울시 (강북구)	미아4-1재건축	-	미아동 8-373 일대	전체 토지등소유자의 조합설립 동의율은 75%에 이르나 구역내 일부 연립주택 및 아파트 주민 동의율 미달로 사업지연	주민간 갈등상존 물리적 피해없음
“	미아9-2재건축	-	미아동137-72 일대	주택경기 후퇴로 주민들이 조합설립 및 추진위해산에 대해 적극적이지 않음	주민간 갈등상존 물리적 피해없음
“	수유1-1재건축	-	수유1동472-81 일대	최고고도지구로 인한 사업성저하	특이사항 없음
“	수유4-1재건축	-	우이동170-2 일대	최고고도지구로 인한 사업성저하	“
“	수유4-2재건축	-	우이동291-224 일대	최고고도지구로 인한 사업성저하	“
“	삼흥연립재건축	-	수유1동 486-2	최고고도지구로 인한 사업성저하	“
“	보광연립재건축	-	인수동 360-1	최고고도지구로 인한 사업성저하	“
“	해성맨션재건축	-	우이동 116-10	조합내부 분쟁	“
			이하여백

※ 재건축 지연 사업장 현황은 해당 자치구청장 판단