〈서식 2〉

2019년 안전한보행환경 조상사업 (서울시)

【보행정책과장 : 박태주, 02-2133-2410, 사업담당 : 이종석, 02-2133-2418】

□ 집행 실적

✳ 기준일 : ‘19.6월말 (단위 : 백만원, 국비 기준)
구 분	예산액	교부액(A)	집행액(B)	집행률(B/A)
계	800	800	64.8	8.1
보행환경 개선지구	400	400	0	0
보행자 우선도로	400	400	64.8	16.2

□ 추진현황

✳ 기준일 : ‘19.6월말 (단위 : 개소)
구 분	계	미추진	설계중	공사중	준공
계	5	-	3	2	-
보행환경 개선지구	2	-	1	1	-
보행자 우선도로	3	-	2	1	-

○ 보행환경 개선지구

- 보행환경개선 사업 2개소 중 1개소 착공, 1개소 설계중

○ 보행자 우선도로

- 보행자우선도로 조성 사업 3개소 중 1개소 착공, 2개소 설계중

□ 집행부진 사유 및 대책

○ 보행환경 개선지구

- 광진구 2년 연속 사업으로 ’19년 1차 공사 시행

○ 보행자 우선도로

- 계속된 자문회의 및 설계 컨설팅에 따른 설계 수정으로 인한 지연

□ 집행 전망

✳ 기준일 : ‘19.6월말 (단위 : 백만원, 국비 기준)
구분	집행 현황			향후 집행전망					집행률 (B/A)
	예산액	교부액	집행액	계	7.15.	7.30.	8월말	9월이후
계	800	800	64.8	735.2	60	0	75.2	600	100
보행환경 개선지구	400	400	0	400	60	0	60	280	100
보행자 우선도로	400	400	64.8	335.2	0	0	15.2	320	100

〈서식 3〉

2019년 안전한 보행환경 조성사업 추진현황 (마포구)

【토목과장 : 유철응, 02-3153-9751, 사업담당 : 조재근, 02-3153-9762】

□ 집행실적

✳ 기준일 : ‘19.6월말 (단위 : 백만원, 국비기준)
시·군·구	사업명	2019년
		예산	이월액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
계
마포구	상암동 DMC역 주변 보행자우선도로 조성	200	-	-	-

□ 추진현황

○ 마포구 : 실시설계 (2019. 3. 12 ~ 12. 31.)

- 2019. 3. 12 : 용역사 선정

- 2019. 4.  8 : 토목과, 상암동, 동주민자치위원장 면담 및 현장 점검

- 2019. 4. 16 : 주민자치회의 참석하여 사업 설명

- 2019. 4. 30 : 주민설명회 개최

- 2019. 5. 14 : 시, 구, 연구기관 등 합동 현장답사

□ 집행부진 사유 및 대책

○ 마포구 : 사업관련 주민설명회, 교통규제 심의 협의

(대책) → 8월 공사 계약 및 10월 공사 완료 예정

□ 집행 전망

✳ 기준일 : ‘19.7월말 (단위 : 백만원, 국비기준)
시·군·구	사업명	집행 현황		향후 집행전망					집행률 (B/A)
		이월액	집행액	계	7.15.	7.30.	8월말	9월이후
계				200				200	100
마포구	상암동 DMC역 주변 보행자우선도로 조성	-	-	200				200	100

2019년 안전한 보행환경 조성사업 추진현황 (도봉구)

【교통행정 과장 : 김종수, 02-2091-4150, 사업담당 : 장병관, 02-2091-4165】

□ 집행실적

✳ 기준일 : ‘19.6월말 (단위 : 백만원, 국비기준)
시·군·구	사업명	2019년
		예산	이월액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
계
도봉구	창림초 보행자우선도로 조성	100	-	64.8	64.8

□ 추진현황

○ 서울시 도봉구 : 실시설계 (2018. 4. 26. ~ 2019. 3. 31.)

- ‘19. 1. ~ 5. : 행안부 현장자문 및 설계자문

- ‘19. 3.  31. : 어린이보호구역 교통안전종합대책 수립 용역 준공

- ‘19. 5.  23. : 어린이보호구역 정비사업 연차별 추진계획 수립

- ‘19. 6.      : 창림초 보도 신설 및 보행자우선도로 디자인 자문요청

□ 집행부진 사유 및 대책

○ 서울시 도봉구 : (사유) 행안부 자문 결과에 따른 사업변경 필요

→ (대책) 보행자우선도로 디자인(안) 자문요청(19.6.21.) 완료

□ 집행 전망

○ 19. 7.    : 보행자우선도로 디자인 확정(행안부→도봉구)

○ 19. 8.    : 보행자우선도로 공사시행

✳ 기준일 : ‘19.7월말 (단위 : 백만원, 국비기준)
시·군·구	사업명	집행 현황		향후 집행전망					집행률 (B/A)
		이월액	집행액	계	7.15.	7.30.	8월말	9월이후
계
도봉구	창림초 보행자우선도로 조성	-	64.8	35.2	-	-	15.2	20	100

2019년 안전한 보행환경 조성사업 추진현황 (영등포구)

【교통행정과장 : 이홍재, 02-2670-4222, 사업담당 : 김대현, 02-2670-3874】

□ 집행실적

✳ 기준일 : ‘19.6월말 (단위 : 백만원, 국비기준)
시·군·구	사업명	2019년
		예산	이월액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
계
영등포구	영중로4길 보행자우선도로 사업	100	-	-	-

□ 추진현황

○ 영등포구 : 디자인 설계 (2019. 5. ~ 진행중)

- ‘19. 1월 : 자문회의(1차) 참석 및 자문의견 조치계획수립

- ‘19. 3월 : 사업 보조금 교부

- ‘19. 5월 : 사전 설계검토(1차) 조치계획수립

- ‘19. 6월 : 설계 컨설팅 참석

□ 집행부진 사유 및 대책

○ 영등포구 : 계속된 자문회의 및 설계 컨설팅에 따른 설계 수정으로 인한 시간지연

→ (대책) 설계 컨설팅 참석시 제시된 자문의견을 반영하여 재 설계 실시

□ 집행 전망

✳ 기준일 : ‘19.7월말 (단위 : 백만원, 국비기준)
시·군·구	사업명	집행 현황		향후 집행전망					집행률 (B/A)
		이월액	집행액	계	7.15.	7.30.	8월말	9월이후
계
영등포구	영중로4길 보행자우선도로 사업	-	-	-	-	-	-	100	100

2019년 안전한 보행환경 조성사업 추진현황 (관악구)

【교통행정과장 : 박환, 02-879-6850, 사업담당 : 박달식, 02-879-6861】

□ 집행실적

✳ 기준일 : ‘19.6월말 (단위 : 백만원, 국비기준)
시·군·구	사업명	2019년
		예산	이월액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
계
관악구	보행환경개선	200	-	-	-

□ 추진현황

○ 2019. 2. 20. ~ 4. 19. : 관악구 실시설계

○ 2019. 2. 22.         : 학부모·주민설명회 개최

○ 2019. 5. 17.         : 교통안전시설심의(경찰협의) 및 내용보완

○ 2019. 5. 14. ~ 5. 21. : 계약심사 (서울시)

○ 2019. 5. 28. ~ 6. 27. : 공사발주 및 업체선정

○ 2019. 6. 27. ~ 9. 28. : 착공 및 준공(예정)

□ 집행부진 사유 및 대책

○ 관악구 : (사유) 관계기관 협의 및 공사발주 등 행정절차 기간 소요

→ (대책) 민원 등 특이사항이 없어 9월말까지 준공예정임

□ 집행 전망

✳ 기준일 : ‘19.7월말 (단위 : 백만원, 국비기준)
시·군·구	사업명	집행 현황		향후 집행전망					집행률 (B/A)
		이월액	집행액	계	7.15.	7.30.	8월말	9월이후
계
관악구	보행환경개선	-	-	200	60	-	60	80	100

보행환경 개선지구 조성사업 추진현황 (광진구)

【교통행정과장 : 이경숙, 02-450-7910, 사업담당 : 정재용, 02-450-7920】

□ 집행실적

✳ 기준일 : ‘19.6월말 (단위 : 백만원, 국비기준)
시·군·구	사업명	2019년
		예산	이월액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
계
광진구	중곡동 보행환경개선	200	-	-	-

□ 추진현황

○ 광진구 : 기본 및 실시설계 (2019. 3. 21. ~ 11. 20.)

- ‘19. 1월부터 현재까지 상세하게 작성

□ 집행부진 사유 및 대책

○ 광진구 : 기본 및 실시설계 진행중

→ ‘19~’20년 2년연속 사업으로 ‘19년 1차 공사 시행, ’20년 2차 공사 시행 계획

○ ‘19년 1차 공사 시행

→ ‘19년 하반기 공사시 국비 200백만원 집행 예정

□ 집행 전망

✳ 기준일 : ‘19.7월말 (단위 : 백만원, 국비기준)
시·군·구	사업명	집행 현황		향후 집행전망					집행률 (B/A)
		이월액	집행액	계	7.15.	7.30.	8월말	9월이후
계
광진구	중곡동 보행환경개선	-	-	200				200	200