〈서식 2〉

2019년 어린이보호구역 개선사업 (서울시)

【보행정책과장 : 박태주, 02-2133-2410, 사업담당 : 유용식, 02-2133-2423】

□ 집행 실적

✳ 기준일 : ‘19.6월말 (단위 : 백만원, 국비 기준)
구 분	예산액	교부액(A)	집행액(B)	집행률(B/A)
계	2,480	2,130	0	0
어린이보호구역	2,480	2,130	0	0

□ 추진현황

✳ 기준일 : ‘19.6월말 (단위 : 개소)
구 분	계	미추진	설계중	공사중	준공
계	51	3	46	2	-
어린이보호구역	51	3	46	2	-

○ 어린이보호구역

- 경동초 유치원측 반대민원 협의추진, 영화초 학교장 협의 추진중,

창서초교는 예산(국비) 미배정으로 배정 대기중

- 2개소는 공사시행 준비중(방학기간중 시행), 46개소는 설계추진중

□ 집행부진 사유 및 대책

○ 어린이보호구역

- 창서초교 국비 미배정으로 배정 대기중, 경동초, 영화초 반대민원 등 협의기간으로 인해 설계 미추진

□ 집행 전망

✳ 기준일 : ‘19.6월말 (단위 : 백만원, 국비 기준)
구분	집행 현황			향후 집행전망					집행률 (B/A)
	예산액	교부액	집행액	계	7.15.	7.30.	8월말	9월이후
계	2,480	2,130	0	2,480	0	0	327	2,153	0
어린이보호구역	2,480	2,130	0	2,480	0	0	327	2,153	0

〈서식 2〉

2019년 교통사고 다발 초등학교 보호구역정비 (40개소)

【 서울시 보행정책과 김종민 (☏ : 02-2133-2425) 】

□ 추진 현황

✳ 기준일 : 2019. 6월 30일기준 (단위 : 백만원, 누계, 국비기준)
예산	6월 집행목표		6월 집행현황		추진현황	지연사유
	집행액	집행률	집행액	집행률
1,505

□ 추진 실적

ㅇ 6월 : 실시설계 진행중

□ 장애요인(지연사유) 및 대책

ㅇ 정상추진

□ 향후 계획

ㅇ 7월말 : 실시설계 완료

ㅇ 8월이후 : 예산배정 및 공사착공

✳ 기준일 : 2019. 6월 말 (단위 : 백만원, 누계, 국비기준)
예산	9월 집행목표		9월 집행전망		미달사유
	집행액	집행률	집행액	집행률
1,505	1,000	100%

- 집행계획 : 9월말 공사시행시 지출예정

2019년 학교부지활용 통학로확보사업 추진 (당곡초)

【 관악구 교통행정과 김봉호 (☏ : 02-879-6862) 】

□ 추진 현황

✳ 기준일 : 2019. 6월 30일기준 (단위 : 백만원, 누계, 국비기준)
예산	6월 집행목표		6월 집행현황		추진현황	지연사유
	집행액	집행률	집행액	집행률
60			0	0	설계도서 작성완료 (19. 6. 5.)

□ 추진 실적

ㅇ 2019. 6. 5. : 설계완료

□ 장애요인(지연사유) 및 대책

ㅇ 정상추진 : 학교장이 방학시기에 맞춰 공사요청

□ 향후 계획

ㅇ 7월~8월 : 공사시행

ㅇ 9월말 : 공사준공

✳ 기준일 : 2019. 6월 말 (단위 : 백만원, 누계, 국비기준)
예산	9월 집행목표		9월 집행전망		미달사유
	집행액	집행률	집행액	집행률
60	60	100	60	100

- 집행계획 : 9월말 공사 준공시 일괄 지출예정

2019년 학교부지활용 통학로확보사업 추진 (압구정초)

【 강남구 교통행정과 송원종 (☏ : 02-3423-6402) 】

□ 추진 현황

✳ 기준일 : 2019. 6월 30일기준 (단위 : 백만원, 누계, 국비기준)
예산	6월 집행목표		6월 집행현황		추진현황	지연사유
	집행액	집행률	집행액	집행률
157	0	0	0	0	지장물 협의	여름방학중(8월) 공사예정

□ 추진 실적

ㅇ 5월 : 설계완료

ㅇ 6월 : 공사발주

□ 장애요인(지연사유) 및 대책

ㅇ 정상추진 : 학교장이 여름방학기간중(7월말~8월말) 공사를 요청함

□ 향후 계획

ㅇ 7월말 : 공사시행

ㅇ 8월말 : 공사준공

✳ 기준일 : 2019. 8월 (단위 : 백만원, 누계, 국비기준)
예산	8월 집행목표		8월 집행전망		미달사유
	집행액	집행률	집행액	집행률
157	157	100	157	100

- 집행계획 : 8월말 공사 준공시 일괄 지출예정

2019년 학교부지활용 통학로확보사업 추진 (경동초)

【 성동구 교통행정과 나은욱 (☏ : 02-2286-5687) 】

□ 추진 현황

✳ 기준일 : 2019. 6월 30일기준 (단위 : 백만원, 누계, 국비기준)
예산	6월 집행목표		6월 집행현황		추진현황	지연사유
	집행액	집행률	집행액	집행률
700

□ 추진 실적

ㅇ 5월 : 교육청 및 학교측 학교부지 협의 추진

□ 장애요인(지연사유) 및 대책

ㅇ 경동유치원의 찬반의사를 반영하고자 교육지원청에서 공문시행중이며 답변에 따라 공사 추진방안 모색

□ 향후 계획

ㅇ 협의가 완료되면 7~8월 설계추진

ㅇ 9월 : 공사발주(10월이후 공사가 진행될것으로 사료됨)

✳ 기준일 : 2019. 6월 말 (단위 : 백만원, 누계, 국비기준)
예산	7월 집행목표		7월 집행전망		미달사유
	집행액	집행률	집행액	집행률
200

- 집행계획 : 10월이후 공사 시행시 지출예정

2019년 학교부지활용 통학로확보사업 추진 (영화초)

【 동작구 교통행정과 이경철 (☏ : 02-820-1570) 】

□ 추진 현황

✳ 기준일 : 2019. 6월 30일기준 (단위 : 백만원, 누계, 국비기준)
예산	6월 집행목표		6월 집행현황		추진현황	지연사유
	집행액	집행률	집행액	집행률
833	0	0%	0	0%	영등포중학교 재협의	토지매수 불가

□ 추진 실적

ㅇ 5월 : 부지매입 협의( 토지주 매도의사 없음)

□ 장애요인(지연사유) 및 대책

ㅇ 부지매입 협의를 위하여 대책회의 등에 많은 시일 소요됨

ㅇ 토지매입부분 제외하고 잔여공사부분 설계추진 진행

※ 부지매입을 통한 보도확보 불가로 영등포중학교 별도 협의 필요

□ 향후 계획

ㅇ 6월~7월 : 설계시행

ㅇ 8월 : 공사발주

ㅇ 9월이후 : 공사 착공

✳ 기준일 : 2019. 6월 말 (단위 : 백만원, 누계, 국비기준)
예산	7월 집행목표		9월 이후 집행전망		미달사유
	집행액	집행률	집행액	집행률
316.5	0	0%	316.5	0%	영등포중학교 재협의 후 실시설계 용역 추진

- 집행계획 : 9월이후 공사 시행시 선급금 지급 등 지출예정

2019년 어린이보호구역개선사업 추진현황 (거여초)

【 송파구 교통과 박보환 (☏ : 02-2147-3130) 】

□ 추진 현황

✳ 기준일 : 2019. 6월 30기준 (단위 : 백만원, 누계, 국비기준)
예산	6월 집행목표		6월 집행현황		추진현황	지연사유
	집행액	집행률	집행액	집행률
120 (국60,구60)	-	-	-	-	-	-

□ 추진 실적

ㅇ 4월~8월 : 기본 및 실시설계 진행중

ㅇ 7월 : 주민설명회 개최 예정

□ 장애요인(지연사유) 및 대책

ㅇ 정상추진

□ 향후 계획

ㅇ 9월 : 공사발주

ㅇ 10월: 공사추진

✳ 기준일 : 2019. 7월 (단위 : 백만원, 누계, 국비기준)
예산	10월 집행목표		10월 집행전망		미달사유
	집행액	집행률	집행액	집행률
60	60	100

- 집행계획 : 10월말 공사 준공시 일괄 지출예정

2019년 어린이보호구역개선사업 추진현황 (마천초)

【 송파구 교통과 박보환 (☏ : 02-2147-3130) 】

□ 추진 현황

✳ 기준일 : 2019. 6월 30기준 (단위 : 백만원, 누계, 국비기준)
예산	6월 집행목표		6월 집행현황		추진현황	지연사유
	집행액	집행률	집행액	집행률
120 (국60,구60)	-	-	-	-

□ 추진 실적

ㅇ 4월~8월 : 기본 및 실시설계 진행중

ㅇ 7월 : 주민설명회 개최 예정

□ 장애요인(지연사유) 및 대책

ㅇ 정상추진

□ 향후 계획

ㅇ 9월 : 공사발주

ㅇ 10월 공사추진

✳ 기준일 : 2019. 6월 (단위 : 백만원, 누계, 국비기준)
예산	10월 집행목표		10월 집행전망		미달사유
	집행액	집행률	집행액	집행률
60	60	100

- 집행계획 : 10월말 공사 준공시 일괄 지출예정

2019년 어린이보호구역개선사업 추진현황 (창서초)

【 서대문구 교통행정과 조영경 (☏ : 02-330-1746) 】

□ 추진 현황

✳ 기준일 : 2019. 6월 30기준 (단위 : 백만원, 누계, 국비기준)
예산	6월 집행목표		6월 집행현황		추진현황	지연사유
	집행액	집행률	집행액	집행률
120 (국비60, 구비60)

□ 추진 실적

ㅇ 5~7월 설계시행

□ 장애요인(지연사유) 및 대책

ㅇ 창서초교 주변 교통개선사업 설계용역 발주 병행 진행중

□ 향후 계획

ㅇ 7월 공사발주

ㅇ 8월~9월 공사시행

✳ 기준일 : 2019. 9월 말 (단위 : 백만원, 누계, 국비기준)
예산	9월 집행목표		9월 집행전망		미달사유
	집행액	집행률	집행액	집행률
60	60	100%

- 집행계획 : 9월말 공사 준공시 일괄 지출예정

2019년 어린이보호구역개선사업 추진현황 (여의도초)

【 영등포구 교통행정과 김대현 (☏ : 02-2670-3874) 】

□ 추진 현황

✳ 기준일 : 2019. 6월 30일 기준 (단위 : 백만원, 누계, 국비기준)
예산	6월 집행목표		6월 집행현황		추진현황	지연사유
	집행액	집행률	집행액	집행률
120 (국비60, 구비60)

□ 추진 실적

ㅇ 6월 : 설계완료

ㅇ 7월 : 공사발주

□ 장애요인(지연사유) 및 대책

ㅇ 정상추진

□ 향후 계획

ㅇ 7월 : 공사착공

ㅇ 9월 : 공사완료

✳ 기준일 : 2019. 6월 말 (단위 : 백만원, 누계, 국비기준)
예산	9월 집행목표		9월 집행전망		미달사유
	집행액	집행률	집행액	집행률
60	60	100%	60	100%

- 집행계획 : 9월말 공사 준공시 일괄 지출예정

2019년 어린이보호구역개선사업 추진(동빙고어린이집)

【 용산구 교통행정과 이지영 (☏ : 02-2199-7755) 】

□ 추진 현황

✳ 기준일 : 2019. 6월 30일 기준 (단위 : 백만원, 누계, 국비기준)
예산	6월 집행목표		6월 집행현황		추진현황	지연사유
	집행액	집행률	집행액	집행률
52 (국26,구26)

□ 추진 실적

ㅇ 5월 : 설계완료

ㅇ 6월 : 추경예산 편성(구비)

□ 장애요인(지연사유) 및 대책

ㅇ 정상추진

□ 향후 계획

ㅇ 7월 : 공사발주

ㅇ 8~10월 공사시행(10월 예산 집행)

✳ 기준일 : 2019. 6월 말 (단위 : 백만원, 누계, 국비기준)
예산	10월 집행목표		10월 집행전망		미달사유
	집행액	집행률	집행액	집행률
26	26	100%

- 집행계획 : 10월 공사 완료시점에서 일괄 지출예정

2019년 어린이보호구역개선사업 추진현황 (후암초)

【 용산구 교통행정과 이지영 (☏ : 02-2199-7755) 】

□ 추진 현황

✳ 기준일 : 2019. 6월 30일기준 (단위 : 백만원, 누계, 국비기준)
예산	6월 집행목표		6월 집행현황		추진현황	지연사유
	집행액	집행률	집행액	집행률
52 (국26,구26)

□ 추진 실적

ㅇ 5월 : 설계완료

ㅇ 6월 : 추경예산 편성(구비)

□ 장애요인(지연사유) 및 대책

ㅇ 정상추진

□ 향후 계획

ㅇ 7월 : 공사발주

ㅇ 8~10월 공사시행(10월 예산 집행)

※

✳ 기준일 : 2019. 6월 말 (단위 : 백만원, 누계, 국비기준)
예산	10월 집행목표		10월 집행전망		미달사유
	집행액	집행률	집행액	집행률
26	26	100%

- 집행계획 : 10월 공사 완료시점에서 일괄 지출예정

2019년 어린이보호구역개선사업 추진현황 (남정초)

【 용산구 교통행정과 이지영 (☏ : 02-2199-7755) 】

□ 추진 현황

✳ 기준일 : 2019. 6월 30일기준 (단위 : 백만원, 누계, 국비기준)
예산	6월 집행목표		6월 집행현황		추진현황	지연사유
	집행액	집행률	집행액	집행률
80 (국40,구40)

□ 추진 실적

ㅇ 5월 : 설계완료

ㅇ 6월 : 추경예산 편성(구비)

□ 장애요인(지연사유) 및 대책

ㅇ 정상추진

□ 향후 계획

ㅇ 7월 : 공사발주

ㅇ 8~10월 공사시행(10월 예산 집행)

※

✳ 기준일 : 2019. 6월 말 (단위 : 백만원, 누계, 국비기준)
예산	10월 집행목표		10월 집행전망		미달사유
	집행액	집행률	집행액	집행률
40	40	100%

- 집행계획 : 10월 공사 완료시점에서 일괄 지출예정

2019년 어린이보호구역개선사업 추진현황 (계성유치원)

【 용산구 교통행정과 이지영 (☏ : 02-2199-7755) 】

□ 추진 현황

✳ 기준일 : 2019. 6월 30일기준 (단위 : 백만원, 누계, 국비기준)
예산	6월 집행목표		6월 집행현황		추진현황	지연사유
	집행액	집행률	집행액	집행률
36 (국18,구18)

□ 추진 실적

ㅇ 5월 : 설계완료

ㅇ 6월 : 추경예산 편성(구비)

□ 장애요인(지연사유) 및 대책

ㅇ 정상추진

□ 향후 계획

ㅇ 7월 : 공사발주

ㅇ 8~10월 공사시행(10월 예산 집행)

※

✳ 기준일 : 2019. 6월 말 (단위 : 백만원, 누계, 국비기준)
예산	10월 집행목표		10월 집행전망		미달사유
	집행액	집행률	집행액	집행률
18	36	100%

- 집행계획 : 10월 공사 완료시점에서 일괄 지출예정