〈서식 1〉

서울시 재정집행 점검회의(2월) 결과 보고

Ⅰ		회의 개요

ㅇ 일시/장소 : ‘20. 2. 27.(목) 14:00~16:00 / 서울시 교통운영과회의실

ㅇ 참석인원 : 서울시 교통운영과장외 담당팀장 등 6여명

ㅇ 주요내용 : ‘20년 사업 및 이월사업 추진현황 및 향후 집행계획 등 논의

* 총 46개소 / ‘20년 사업 41개소, 이월사업 5개소(‘19년 5개소)

Ⅱ		회의 내용

□ 이월사업 점검

ㅇ 추진현황 및 계획(‘20. 2. 29. 기준)

- 이월사업 5개소 중 공사중 5개소

- 이월예산 615백만원(집행률 0%)

- 상반기 중 5개소 준공(100%), 615백만원 집행(100%) 예정

(단위 : 백만원)

사업량 (개소)	추진현황(‘20.29.기준)		집행전망
	집행현황		계	3월	4월	5월	6월	비고
	이월액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액
계	307	-	307	-		100	307
교통사고 잦은 곳	198	-	198			100	198
회 전 교 차 로	109	-	109				109

※ 집행전망은 누계액으로 작성, 6월말까지 100%집행으로 작성

ㅇ 중점관리 대상 : 해당사항 없음

□‘20년 사업 점검

ㅇ 추진현황 및 계획(‘20. 2. 28. 기준)

- ‘20년 사업 41개소 중 설계중 41개소

- 사업예산 7,022백만원(집행률 0%)

ㅇ 중점관리 대상 : 4개소(사고 잦은 곳 3, 회전교차로 1)

-  4개소(사고 잦은 곳 3, 회저교차로 1)는 설계 조기완료 촉구

(단위 : 백만원)

사업량 (개소)	추진현황(‘20.2.29.기준)		집행전망
	집행현황		계	3월	4월	5월	6월	비고
	예산액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액	집행액
계	3,511	-	1,413			413	1,413
교통사고 잦은 곳	3,231	-	1,300			400	1,300
회 전 교 차 로	280	-	113			13	113

※ 집행전망은 누계액으로 작성, 6월말까지 40% 이상 집행계획 작성

□ 집행률 관리대책

ㅇ 중점관리 대상사업 격주, 일반사업 매월 진행상황 확인을 통해 목표 집행액* 달성 유도

ㅇ 사업추진 부진 사업장에 대하여 전문가 자문 및 현장점검을 통해 집행률 제고방안 마련

Ⅲ		향후 계획

ㅇ ‘20.4월 : 실시설계 완료 및 예산 재배정

ㅇ ‘20.4월 ~ 12월 : 사업 시행 및 준공

〈서식 2 : 2020년 신규사업〉

2020년 지역교통안전환경개선사업 (서울시)

【교통운영과장 : 강진동, 02-2133-2450, 사업담당 : 오상준,손태빈, 02-2133-2446】

□ 집행 실적

✳ 기준일 : 2020. 2. 29. (단위 : 백만원, 국비기준)
구분	예산액	교부액(A)	집행액(B)	집행률(B/A)
계	3,511	1,811	-	-
교통사고 잦은 곳	3,231	1,671	-	-
회전교차로	280	140	-	-

□ 추진현황

✳ 기준일 : 2020. 3. 31 (단위 : 개소)
구분	계	계획 수립	실시설계			사업시행
			설계 발주	설계중	설계 완료	관계 기관 협의	행정 예고	일상 감사	계약 심사	사업 발주	공사중	준공
계	41			41
교통사고 잦은 곳	39			39
회전교차로	2			2

○ 교통사고 잦은 곳

- ‘19. 2. ~ ‘20. 3. : 실시설계 (떡전교 교차로 등 39개소)

- ‘20. 3. ~ 4. : 유관기관 협의 및 예산 재배정

- ‘20. 4. ~ 12. : 사업시행 및 준공

○ 회전교차로

- ‘20. 3. ~ 6. : 실시설계 (은평구 롯데캐슬 등 2개소)

- ‘20. 6. ~ 7. : 유관기관 협의 및 예산 재배정

- ‘20. 7. ~ 12. : 사업시행 및 준공

□ 집행 전망

✳ 기준일 : 2020. 2. 29기준 (단위 : 백만원, 국비기준)
구분	집행 현황			향후 집행전망					집행률 (B/A)
	예산액	교부액	집행액	계	3월말	4월말	5월말	6월
계	3,511	1,811		1,413			413	1,413	40.2
교통사고 잦은 곳	3,231	1,671	-	1,300			400	1,300	40.2
회전교차로	280	140	-	113			13	113	40.4

※ 집행전망은 누계액으로 작성, 6월말까지 40% 이상 집행계획 작성

〈서식 3 : 2019년 이월사업〉

2019년 지역교통안전환경개선사업 (서울시)

교통운영과장 : 강진동, 02-2133-2450, 사업담당 : 오상준,손태빈, 02-2133-2446】

□ 집행실적

✳ 기준일 : 2020. 2. 29                                                  (단위 : 백만원, 국비기준)

사 업 명	′19년				′20년
	예산	집행액	이월액	불용액	이월액(A)	집행액(B)	집행률(B/A)
교통사고 잦은곳 개선	2,967	2,179	198	590	198	-	-
회전교차로	140	31	109	-	109	-	-

□ 추진현황

○ 교통사고 잦은 곳

- ‘18. 11. ~ : 실시설계 시행(국기원교차로 등 4개소)

- ‘19. 3. : 교통안전시설물 심의 완료

- ‘19. 6. ~ : 예산 재배정 및 사업시행

○ 회전교차로

- ‘19. 2. ~ : 설계용역 계약 및 착수 (강서구 장하촌앞)

- ‘19. 2. ~ : 기본설계 및 자문(koti) 요청

- ‘19. 8. ~ 10. : 교통안전시설물 심의

- ‘19. 10. ~ : 실시설계 용역 시행

□ 집행부진 사유 및 대책

○ 교통사고 잦은 곳

- 지장물 이설 유관기관 협의 지연으로 이월

- 동절기 굴착통제 기간 이후 착공하여 ’20.6월 준공 예정

○ 회전교차로

- 2개의 교차로가 인접되어 있는 형태의 초소형 회전교차로 설치를 위한 전문가 자문(koti), 지장물 이설 유관기관 협의 지연으로 이월

- 20년 대가 반영, 보완설계를 위하여 실시설계 용역 20년 6월 완료

- 개선대상 지점은 실시설계 완료 후 집행 예정

□ 집행 전망

✳ 기준일 : 2020. 2. 29기준 (단위 : 백만원, 국비기준)
구분	집행 현황		향후 집행전망					집행률 (B/A)
	이월액	집행액	계	3월말	4월말	5월말	6월
계	307	-	307			100	307	100
교통사고 잦은 곳 개선	198	-	198			100	198	100
회전교차로	109	-	109				109	100

※ 집행전망은 누계액으로 작성, 6월말까지 100%집행으로 작성