동부수도사업소

□ 기 관 명 : 동부수도사업소

○ 점 검 자 : 행정5급 박병식외 5명

○ 점검기간 : 2017.11.21.~11.23.(3일)

- 현    황

구 분	계		공 사		용 역		물 품
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
건/천원	80	30,169,240	40	27,910,842	31	1,930,483	9	327,915

- 설계심사 이행, 제비율 검증확인 적용 현황

구 분	설계심사 이행		제비율 검증 확인(설계 변경시)		비고
	이행	미이행	실시	미실시
건수	50	-	17	-

- 점검 지적사항

구 분	계		환수 조치		정산 조치		직원 교육
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
건/천원	15	14,995	10	8,990	5	6,005	-

- 세부내용(토목)

연번	건 명	공사 금액	지적 내용	조치 계획	비고
1	2016년 행당동 외 8개동 상수도공사	548,496천원 (2016.4.29. ~ 2017.6.30.)	○ 철개고정장치 나사조임 과다정산 ▶ 주간 : 88개소, 야간 : 8개소	환수 조치 (473천원)
2	2016년 마장동외 7개동 상수도공사	518,719천원 (2016.5.3. ~ 2017.4.30.)	○ 철개고정장치 나사조임 과다정산 ▶ 주간 : 164개소, 야간 : 8개소	환수 조치 (759천원)

연번	건 명	공사 금액	지적 내용	조치 계획	비고
3	2016년 마장동외 7개동 상수도공사-2차	320,023천원 (2017.2.7. ~ 2017.6.30.)	○ 터파기(32㎥) 정산 부적정 ▶ 불용관터파기 → 인력터파기	환수 조치 (308천원)
4	2016년 중랑,동대문구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사	597,520천원 (2016.4.19. ~ 2017.4.30.)	○ 고재처리 정산 부적정(10,135㎏) ▶ 고철 → 주철	환수 조치 (1,059천원)
5	2016년 동부 관내 긴급누수복구공사	2,450,712천원 (2016.6.13. ~ 2017.6.30.)	○ 안전시설 재료비 손료(지선) ▶ 과다 정산 : 4조	환수 조치 (539천원)
6	2016년 답십리1동 외 7개동 상수도공사	613,888천원 (2016.6.1. ~ 2017.5.31.)	○ 터파기(48㎥) 정산 부적정 ▶ 불용관터파기 → 인력터파기	환수 조치 (814천원)
7	2016년 망우본동외 8개동 상수도공사	642,620천원 (2016.6.29. ~ 2017.6.30.)	○ 고압블록 포장걷기 단위착오 ▶ 4.6a → 0.046a(4.6㎡)	환수 조치 (704천원)
8	2016년 묵1동외 7개동 상수도공사	628,746천원 (2016.7.1. ~ 2017.6.30.)	○ 교통소통대책수립 정산 부적정 ▶ 제경비제외공종	환수 조치 (613천원)
9	2016년 제기동외 6개동 상수도공사	218,440천원 (2017.4.12. ~ 2017.9.18.)	○ 고재처리 정산 부적정(7,422㎏) ▶ 고철 → 주철 ○ 보조기층공 t=15㎝ 과다 정산 ▶ 6.15a → 0.59a	환수 조치 (2,331천원)
10	능동로 송배수관 정비공사	325,960천원 (2017.5.18. ~ 2017.10.16.)	○ 환토재(사급자재) 과다 정산 ▶ 65㎥	환수 조치 (1,390천원)

연번	건 명	공사 금액	지적 내용	조치 계획	비고
11	2017년 전농1동외 7개동 상수도공사	630,440천원 (2017.6.1. ~ 2018.6.30.)	○ 배관탐지공 과다 정산 ▶ 배관탐지공 40개소	추후 정산시 감액 조치 (506천원)
12	2017년 망우본동외 8개동 상수도공사	600,768천원 (2017.4.17. ~ 2018.6.30.)	○ 철거자재 운반 과다정산 ▶ 15톤 → 4.8톤	추후 정산시 감액 조치 (104천원)
13	2017년 묵1동외 7개동 상수도공사	639,609천원 (2017.4.10. ~ 2018.6.30.)	○ 가설급수장치제작비 과다 정산 ▶ 4조 → 1조	추후 정산시 감액 조치 (580천원)
14	2017년 마장동 외 7개동 상수도공사	632,714천원 (2017.6.30. ~ 2018.6.30.)	○ 배관탐지공 과다 정산 ▶ 배관탐지공 19개소	추후 정산시 감액 조치 (231천원)
15	2017년 동부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사	2,087,643천원 (2017.6.8. ~ 2018.5.31.)	○ 제경비 정산 부적정 ▶ 건설기계대여대금지급 보증수수료	추후 정산시 감액 조치 (4,584천원)