2016년 지역교통안전환경개선사업 (서울시)

【보행정책과장 : 이방일, *************, 사업담당 : 손준호, ************* / 윤종현, *************】

□ 집행실적

✳ 기준일 : 2016. 9.13 (단위 : 백만원, 국비기준)
구분	예산액	교부액(A)	집행액(B)	집행률(B/A)
계	1,475	1,475	108	7.3%
어린이보호구역개선	975	975	108	11.1%
안전한보행환경조성	500	500	0	0.0%

□ 집행 지연사유 및 대책

ㅇ 어린이 보호구역 정비사업

- 집행 지연사유

* 기본설계, 시설장 및 경찰서협의, 경찰규제, 실시설계 순으로 진행되는 사업으로 유관기관과의 협의 지연으로 서울시의 경우 현재 모두 공사중으로 집행시기 미도래로 집행율이 저조한 것임

- 집행률 제고 및 이월 최소화 대책

* 현재 모두 공사중으로 10월말까지 공사를 전부 마무리 할 계획임(공사 소요기간 1개월)

ㅇ 안전한 보행환경조성사업

- 집행 지연사유

* 사업비의 대부분은 공사비로 지출 예정이며, 주민의견 수렴, 주민설명회 개최, 경찰서 협의 및 규제심의 등 제반사항 이행 등 기본설계 확정이 지연되고 이에 따라 실시설계가 진행 중에 있음

- 집행률 제고 및 이월 최소화 대책

* 10월 말까지 실시설계 완료 및 공사 발주하여 금년 내 원인행위를 완료 사고이월 예정임

□ 집행 전망

(단위 : 백만원, 국비기준)
구분	‘16년 예산액 (A)	집행액			집행률 (B/A)
		10월까지 집행액	11월 집행전망	누계액(B)
계	1,475	975	0	975	66.1%
어린이보호구역개선	975	975	0	975	100.0%
안전한보행환경조성	500	0	0	0	0.0%

2016년 이월 예상사업 현황

【보행정책과장 : 이방일, *************, 사업담당 : 윤종현, *************】

□ 이월 예상현황

✳ 기준일 : 2016. 9.13 (단위 : 백만원, 국비기준)
사업명	예산액(A)	집행예상액(B)	집행률(A/B)	이월 예상액
계	500	0	0	500
광진구 아차산 일대 안전한보행환경조성	500	0	0	500

□ 그간 추진사항

ㅇ 2016. 3월 : 기본 및 실시설계 착수

ㅇ 2016. 5월 : 유관부서 협의 및 주민설명회 등 개최

ㅇ 2016. 7월 : 용역보고회 개최 및 기본설계 확정

ㅇ 2016. 7월 : 교통안전시설 규제심의 요청(광진경찰서)

□ 이월사유 및 대책

ㅇ 이월사유

- 주민의견 수렴, 주민설명회 개최, 경찰서 협의 및 규제심의 등 제반사항 이행 등 기본설계 확정이 지연되고 이에 따라 실시설계가 진행 중에 있음

ㅇ 이월 최소화 대책

- 동절기 공사착공 금지 등으로 사업구간 전체에 대한 연내 공사완료는 어려우며, 사업구간을 1,2차로 구분하여 2016년 하반기 1차 사업, 2017년 상반기 2차 사업 완료로 추진할 계획임