1. 사업명: G밸리(서울디지털산업단지) 활성화 추진

2. 사업개요

G밸리 갤러리 조성 사업

- 사업내용 : 지하철 역사내 유휴공간을 활용 전시·영상패널, 전시부스, 부대시설(관리시설·장비실) 등 설치

- 위  치 : 구로디지털단지역(구로구), 가산디지털단지역(금천구)

- 사업비 : 6억원

근로자 문화‧복합시설 건립

- 위    치 : 가산디지털1로 118(3단지), 1,153㎡(가산문화센터 등)

- 건립규모 : 지하3층, 지상6층 (연면적 : 6,550㎡)

- 주요 도입시설 : 문화체육시설, 근로자 복지시설, 어린이집/청소년쉼터/기숙사

- 총사업비 : 약 203억원(국비 20억원, 지방비 183억원)

3. 추진실적

- G밸리 갤러리 조성 6억원 교부(금천구 3억원, 구로구 3억원)

- 산업단지편의시설 확충사업공모에 선정되어 국비20억 배정( ’14. 12)

4. 예산집행 현황

(단위:백만원,%)
부서명	세부 사업명	통계목	예산현액	집행액	불용액	불용률	전용	이월
경제정책과 (산업거점조성반)	G밸리(서울디지털산업단지) 활성화 추진	시설비	2,600					2,600

5. 동 사업의 소요예산(예산현액)중 전용, 이월 등 발생한 경우 금액, 사유(구체적), 방침번호(일자)

○ 근로자 문화‧복합시설 건립비 20억원 명시이월

- 사    유 : 연말 교부되어 일정상 집행이 불가능하므로 타당성 조사(’15년) 이행 후 추진토록 공사비 전액 이월

○ G밸리 갤러리 조성 사업 6억원 사고이월(2월말 현재 미확정)

- 사    유 : 지하철 역사 공간 활용에 따른 도시철도공사 및 서울메트로 양 공사 협의 및 갤러리 조성 이후 관리주체,운영비용 문제에 대한 유관기관 간 이견으로 사업이 지연

6. 집행잔액(불용액 포함) 발생사유 : 해당사항 없음

1. 사업명 : 서울 과학관 건립

2. 사업개요

○ 위    치 : 서울특별시 노원구 한글비석로 168

○ 규    모 : 지하1층 / 지상3층, 연면적 12,330.81㎡

○ 기    간 : 2011. 1 ～  2016. 2(설계기간 포함)

○ 총사업비 : 47,076백만원(국비 70%, 시비 30%)

3. 추진실적

○ '13. 10. 10 : 서울과학관 건립계획 수립

○ '13. 12. 30 : 시공업체선정 및 계약(도시기반시설본부)

○ '14. 01. 13 : 건축공사 착공(도시기반시설본부)

※ '15. 2월 현재 지상1층 골조 공사중(지하1층 골조공사 완료)

4. 예산집행 현황

(단위 : 백만원,%)
부서명	세부 사업명	통계목	예산현액	집행액	불용액	불용률	전용	이월
경제정책과	서울과학관 건립	시설비	18,027	3,465	2	0.01	-	14,560

※ 이월 14,560백만원 = 명시 5,534 + 사고 9,026 (사고이월은 2월 말 현재 미확정)

5. 동 사업의 소요예산(예산현액)중 전용, 이월 등 발생한 경우 금액 및 사유

○ 이월액 발생 사유

- 당초 미래창조과학부로부터 설계도서 인수 지연에 따른 ’12년도 및 ’13년도 예산(12,493백만원) 차기 년도로 이월 불가피

- 터파기 공사 진행 중 다량의 지중 매립 폐토석 발생 및 설계도면과 현장여건 상이에 따른 기초 구조안전 검토 등에 따른 공기지연

○ 향후계획

- 잔여 공정에 대하여 휴일 및 야간작업 등을 실시 부진공정 만회

6. 집행잔액(불용액 포함) 발생사유

○ 1차 계약분에 대한 하도급 수수료 발급비 등 미 집행 잔액에 대한 준공 정산액

1. 사업명: 서울형 특화산업지구 지정·운영

2. 사업개요

- 사무관리비 ; 산업및특정개발진흥지구심의위원회 운영 등

- 자치단체경상보조금

·  종로주얼리센터 운영

·  서울형 특화산업지구 권역별 실태조사 및 활성화(중구, 성동, 중랑)

·  마포 디자인출판지원센터 운영

- 시설비

·  서울주얼리지원센터(제1관) 설계 및 공사비

·  서울주얼리지원센터(제2관) 설계 및 공사비(사고이월)

구 분	제 1 관	제 2 관
위 치	종로구 권농동 188-1	종로구 권농동 190-2
면 적(㎡)	토지 236, 연면적 338.25	토지 311, 연면적 725
층 수	지하1층 / 지상2층	지하3층 / 지상2층
용 도	사무국, 전시/상담실, 감정장비실 등	전시장 및 체험관, 공방, 수장고 등
추진방법	기존 건물 리모델링	한옥 신축 (현, 나대지)
추진기간	2013.11 ~ 2015.6	2013.12 ~ 2016.12

- 자산및물품취득비(사고이월) : 종로귀금속 앵커시설 장비도입

3. 추진실적

- 서울주얼리지원센터 건립

· 제1센터 : 설계완료(‘14.10월), 공사계약(’14.12월),  현재 공사 중

· 제2센터 : 설계공모(‘14.9월), 설계용역계약(’14.12월), 현재 설계 중

- 장비·물품구매

· 형광 X선 분석장치 등 구매, 센터 공기청정기 등 구매

4. 예산집행 현황

(단위 : 백만원, %)
부서명	세부 사업명	통계목	예산현액	집행액	불용액	불용률	전용	이월
경제정책과	서울형 특화산업지구 지정·운영	사무관리비	97	30	67	69.0	-	-
		자치단체경상보조금	685	561	124	18.1	-	-
		시설비	2,680	707	101	3.7	-	1,872
		자산 및 물품취득비	2,529	899	1,630	64.4	-	-

5. 동 사업의 소요예산(예산현액) 중 전용, 이월 등 발생한 경우 금액, 사유(구체적)

-  이월 금액 : 1,872백만원(명시 1,745백만원, 사고 127백만원(2월말 현재 미확정))

-  이월 사유

· 서울주얼리지원센터(제2관) 부지(권농동 190-2, 연면적 338㎡)가 문화재보호  구역으로 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따른 정밀시굴조사용역을 시행(‘14.3.～’14.6.)함에 따라 설계공모, 실시설계용역. 공사시행 등이 순연

·  따라서  향후 공사 준공에 필요한 예산의 효율적인 활용하여 사업을 차질 없이 시행  코자 공사비는 명시이월(1,745백만원), 설계용역비(127백만원)는 사고이월  하였음

※ 실시설계(‘14.12～’15.6월), 공사발주 및 준공(‘15.7～’16.12월)

6. 집행잔액(불용액 포함) 발생사유

- 사무관리비 : 산업·특정개발진흥지구와 관련하여 자치구 신청에 따라 개최                하는 심의위원회, 실무위원회, 자문회의 등의 건수 감소

- 자치단체경상보조금 : 주얼리센터(제1관) 미 개관에 따른 운영비 미집행

- 시설비(‘13년 사고이월예산) : 설계 및 공사 낙찰차액 등

- 자산및물품취득비(‘13년 사고이월예산) : 주얼리센터(제1관) 건립공사가 완공  되지 않아 ’15년 센터운영에 필요한 일부 장비·물품만 우선 구매

1. 사업명 : 성북 제조업 지원센터 운영(의류봉제)

2. 사업개요

○ 사업예산 : 1,200백만원(자치단체 경상보조)

○ 사업내용(성북구 추진계획)

- 성북 제조업 지원센터(의류봉제) 건립(건물 매입 및 리모델링)

· 면적 : 대지 70~100평, 건물 층당 40~60평

· 예산 : 1,100백만원

- 의류봉제업 활성화를 위한 DB구축 연구용역

· 내용 : 현장실사를 통한 조사로 DB화 및 홈페이지 제작

· 예산 : 100백만원

3. 추진실적

○ 2014. 10   성북구 관내 제조업 지원센터 임대 및 운영비 교부(６억)

○ 2014. 10   예산변경(３.５억)

- 서울형 특화산업지구 권역별 실태조사 및 활성화 사업을 위한 연구용역비

4. 예산집행 현황

(단위:백만원,%)
부서명	세부 사업명	통계목	예산현액	집행액	불용액	불용률	예산변경	이월
경제정책과	성북 제조업 지원센터 운영(의류봉제)	자치단체 경상보조금 (308-01)	850	600	250	29.4	△350	-

5. 동 사업의 소요예산(예산현액) 중 전용, 이월 등 발생한 경우 금액, 사유(구체적), 방침번호(일자)

○ 예산변경방침 : 특화산업 활성화 등 창조경제 실현을 위한 사업변경 계획[경제정책과-12284(2014.10.21.)호]

○ 변경사유

-『서울형 창조경제 모델-경제비전 2030』의 실질적 모델 구현을 위해 특화산업 집적지의 도심산업 전반에 대한 분석이 필요하고,

- 성북구청과의 협의를 통해 예산절감된 부분(매입→임대)을 효율적으로 사용하고, 특화산업전반에 대한 종합적 생태계 분석의 시급함에 따라 일부 권역에 대한 특화산업 실태조사 우선 추진

6. 집행잔액(불용액 포함) 발생사유

○ 서울시 타 패션지원센터는 모두 임대보증금으로 지원하고 있고, 사업추진의 탄력성 및 예산의 효율적 활용 등을 고려하여 건물매입(안)에서 임대방식으로 추진하는 방안으로 조정하여 사업비 총 6억원 범위 내에서 지원

1. 사업명: 서울시 중소유통물류센터 운영

2. 사업개요

○ 위 치 : 서초구 양재대로12길 36(양곡도매시장 내)

○ 센터규모 : 3,372㎡(리모델링 2,300㎡, 증축 1,072㎡)

- 피킹장 2,466㎡, 냉장·냉동창고 643㎡, 사무실 등 263㎡

○ 개장일 : 2013. 2. 7.(운영개시 : 2013. 3. 4.)

○ 운영방법 : 민간위탁(공모)   ※ 운영주체 : (사)서울지역수퍼협동조합협회

3. 추진실적

○ 물류센터 운영 개시 : 2013. 3. 4.

○ 서울소재 소매업에 종사하는 중소유통업체를 대상으로 ’14.말 현재 1,750개 점포를 회원으로 유치하여 공산품 등 약 6,000여 품목의 상품을 공급

○ 물류센터 매출실적(’13. 3월 ∼ ’14. 12월)

연 도	누적회원	연 매출 총액	월평균 매출액	월평균 이용점포	매출이익 (A)	비 용 (B)	손 익 (A-B)
2013년	1,227개	4,365	436	273개	233	917	△684
2014년	1,750개	5,594	466	341개	422	1,093	△671

4. 예산집행 현황

(단위 : 백만원,%)
부서명	세부 사업명	통계목	예산현액	집행액	불용액	불용률	전용	이월
소상공인지원과	서울시 중소유통물류센터 운영	전산개발비	180	-	180	100	-	-

5. 동 사업의 소요예산(예산현액)중 전용, 이월 등 발생한 경우 금액, 사유(구체적), 방침번호(일자) : 해당사항 없음

6. 집행잔액(불용액 포함) 발생사유

○ 물류센터 운영을 위해 자체 개발하여 운영하는 운영정보시스템의 기능 고도화 사업을 위해 반영된 예산이었으나 중소기업청(소상공인시장진흥공단)에서 전국의 중소유통물류센터를 대상으로 개발하여 보급하는 ‘통합물류정보시스템’을 도입하는 것으로 계획이 변경되어 불용액 발생

1. 사 업 명: 전통시장 다시살림 프로젝트 신시장 모델 육성

2. 사업개요

○ 근    거 : 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 제3조

○ 사업내용 : 권역별 선도시장 육성(5개)

○ 추진방법 : 사업추진 총괄 컨설팅단 및 시장별 사업단 구성‧운영

○ 추진기간 : ´14. 1. ~ ´16. 12.

3. 추진실적

○「서울형 신시장 모델」정책 방향 설정(´13.1~3월)

○ 전통시장(정릉, 영천시장 등) 현장시장실 운영 (´13.6월)

○ 권역별 선도시장 선정 및 협약서 작성(상인동의 포함)

○ 신시장 모델 선도시장 협약서 서명 및 종합계획 발표

○ 신시장 모델 선도시장 육성 컨설팅단 구성 완료(2월)

- 신시장 모델 추진 전략방향 도출

○ 신시장 모델 선도시장 대상별 사업단 모집 및 선정(4월)

○ 신시장 모델 선도시장 육성사업 세부계획 수립 및 승인(5~7월)

○ 선도시장별 사업단 구성 및 본격 사업 추진(8월~현재)

○ 광역배송센터 시범 운영(9월~현재)

○ 전통시장 신용카드 간편결제 시스템 개발 및 시연회 실시(9월~현재)

○ 시장별 민간협의체 구성 및 선도시장 활성화 의제 발굴․논의(9월~현재)

○ 사업단 평가(12월) 및 2015년도 세부계획 수립・심의 중

4. 예산집행 현황

(단위:백만원, %)
부서명	세부사업명	통계목	예산현액	집행액	불용액	불용률	전용	이월
소상공인지원과	전통시상다시살림 프로젝트 신시장 모델육성	기타보상금	110		110	100.0	-	-

5. 동 사업의 소요예산(예산현액)중 전용, 이월 등 발생한 경우 금액, 사유(구체적), 방침번호(일자) : 해당사항 없음

6. 집행잔액(불용액 포함) 발생사유

○ 대형마트나 SSM 등의 확장으로 어려움을 겪고있는 골목상권 및 전통시장 활성화를 위한 민관 공동협력사업으로 포인트(마일리지)제도의 골목상권 접목을 통한 소비자 유인 정책인 행복마일리지제 사업을 추진하던 중

○ 협력기관(코리아크레딧뷰로)의 ‘신용정보사 개인정보 유출 사고’로 사업의 정상 추진이 불확실해짐에 따라 불용액 발생

1. 사업명 : 창신동 봉제박물관 및 봉제거리 조성

2. 사업개요

- 목적 : 의류제조 밀집지역으로 기능해 온 창신동의 특성을 활용하여 봉제거리 및 봉제박물관을 조성하고 주변 역사·문화·관광자원과의 연계프로그램을 개발하여 지역의 산업 활성화 및 환경개선 도모

- 위치 : 창신동길 (동대문역 1번 출구 ~ 창신2동 주민자치센터)주변

- 규모 :  지하1층, 지상3층 내외

※ 부지매입 및 시설조성 주거재생과 협업(창신동 도시재생선도지역 사업과 연계하여 추진)

3. 추진실적

- 창신동 산업자원 관광화 연구용역 실시(‘13.8 ~ ’14.2월)

- 봉제박물관 건립 및 봉제의 거리 조성계획 수립(‘14.12월)

4. 예산집행 현황

(단위 : 백만원, %)
부서명	세부사업명	통계목	예산현액	집행액	불용액	불용률	전용	이월
문화융합경제과	창신동 봉제박물관 및 봉제거리 조성	시설비	100	-	100	100.0	-	-

5. 동 사업의 소요예산(예산현액)중 전용, 이월 등 발생한 경우 금액, 사유(구체적), 방침번호(일자) : 해당사항 없음

6. 집행잔액(불용액 포함) 발생사유 : 사업계획 변경에 의한 미집행

- 봉제박물관 및 봉제의거리 조성을 위한 기본계획 수립 학술용역(창신동 산업자원 관광화 연구용역, 서울대학교 산학협력단 수행)결과에 따라 ’14년 중 계획 수립 및 봉제박물관 대상지 확보 후 설계를 추진하기로 하였으나,

- 대상지역인 창신동이 국토교통부 도시재생선도사업에 선정(‘14.5.7)되고 서울시 도시계획위원회 심의(’14.10월)를 거쳐 도시재생본부 주관으로  사업을 추진하게 됨.

- 이에 따라 사업연계를 위해 도시재생사업의 봉제앵커시설과 봉제박물관을 통합하여 조성하는 것으로 계획이 변경됨

※ 봉제박물관 건립 및 봉제의 거리 조성계획(문화산업과-11217, 2014.12.23.)

- 변경계획에 따라 ’15년 상반기 중 도시재생사업을 통한 부지매입이 완료되면 하반기에 설계 및 시공을 하고, 운영계획을 수립하여 ’16년 중 개관해 운영할 예정임

1. 사업명: 외국인 투자유치 인센티브 제공

2. 사업개요

○ 고용(교육훈련)보조금

- 지급대상 : 신규 고용을 창출한 서울시 신성장동력산업의 외국인투자 기업으로 외국인투자비율이 30% 이상 갖춘 기업

- 지급금액 : 1인당 100만원 이하 × 최대 6개월(전년도 상시고용인원 증가분 중 10인 초과인원)

○ 현금지원

- 지원요건 : 고도기술수반, 고용창출, 적정입지 등을 갖춘 외국인 투자기업으로 외국인투자비율이 30% 이상인 기업

- 지원금액 : 산업통상자원부의 외국인투자위원회 의결을 거쳐 지원 여부 결정 후, 실제 지원금액은 최종 협상을 통해 결정(협상주체 : 산업통상자원부-지방자치단체-해당 투자자)

3. 추진실적

○ 고용(교육훈련)보조금 : 악사손해보험(주)외 2개사(311명), 290백만원

○ 글로벌기업지역본부 유치 지원금 : 지멘스사, 1,924백만원

4. 예산집행 현황

(단위:백만원,%)
부서명	세부 사업명	통계목	예산현액	집행액	불용액	불용률	전용	이월
투자유치과	외국인 투자유치 인센티브 제공	민간경상보조금	3,732	2,214	1,518	40.7	-	-

5. 동 사업의 소요예산(예산현액)중 전용, 이월 등 발생한 경우 금액,

사유(구체적), 방침번호(일자) : 해당사항 없음

6. 집행잔액(불용액 포함) 발생사유

- 집행잔액 대부분은 현금지원에서 발생하였음

- 당초 169명(전체 524명의 32%) 고용을 예상하여 고용비율에 해당하는 3,360백만원(전체지원액 10,400백만원의 32%)를 예산 편성하였으나, 실제 고용인원이 119명에 불과하여 고용인원 비율보다 낮은 금액 1,924백만원을 지급하여 1,436백만원 집행잔액 발생

1. 사업명: 대부업관리감독강화

2. 사업개요

-  대부업 현장지도․점검 및 불법행위에 대한 관리․감독 강화

- 불법사금융 피해예방을 위한 교육 및 홍보 실시

- 대부업무 관련 자치구 위임에 따라 인건비 지원

3. 추진실적

- 대부업「특별사법경찰관법」개정안 미통과로 특정업무경비 미집행

4. 예산집행 현황

(단위:백만원,%)
부서명	세부사업명	통계목	예산현액	집행액	불용액	불용률	전용	이월
민생경제과	대부업관리감독강화	특정업무경비	9.6	-	9.6	100.0	-	-

5. 동 사업의 소요예산(예산현액)중 전용, 이월 등 발생한 경우 금액, 사유(구체적), 방침번호(일자) : 해당사항 없음

6. 집행잔액(불용액 포함) 발생사유

- 대부업「특별사법경찰관법」개정이 예상됨에 따라 특정업무경비를 반영하였으나, 개정안 미통과로 예산 전액 미집행

※ 대부업․다단계 등 분야 경찰수사권한을 지자체 행정공무원에게 부여하는 것을 골자로 하는「사법경찰관리의 직무를 수행

1. 사업명 : 불법공산품 단속 강화

2. 사업개요 : 특별사법경찰 수사활동에 따른 국내여비

3. 추진실적

- 대부업 특사경 및 불법공산품 특사경의 단속활동에 대한 여비를 공동으로 예산반영 하였으나 대부업 「특별사법경찰관법」미통과로

4. 예산집행 현황

(단위:백만원,%)
부서명	세부 사업명	통계목	예산현액	집행액	불용액	불용률	전용	이월
민생경제과	불법공산품 단속 강화	국내여비	20	-	20	100.0	-	-

5. 집행잔액(불용액 포함) 발생사유

- 대부업「특별사법경찰관법」개정 예상되어 수사활동 국내여비를 일괄(대부업, 공산품) 반영하였으나, 개정안 미통과로 예산 전액 미집행

※ 대부업․다단계 등 분야 경찰수사권한을 지자체 행정공무원에게 부여하는 것을 골자로 하는「사법경찰관리의 직무를 수행할 자와 그 직무범위에 관한 법률」(이하 ‘특사경법’) 개정 추진 중

1. 사업명: 서울형 뉴딜일자리

2. 사업개요

- 내용

· 지원대상 : 만18세 이상의 실업자 또는 정기소득이 없는 일용근로자인 서울시민

· 규    모 : 선발인원 2,000여명

· 사업기간 : 2013년 ~ 계속

· 예    산 : 19,995백만원

3. 추진실적

- 총 27개 사업, 2,123개 일자리 제공(목표대비 104%)

- 참여자 직업전환을 위한 직무·전문교육 실시 : 사업별 평균 98시간

4. 예산집행 현황

(단위 : 백만원,%)
부서명	세부 사업명	통계목	예산현액	집행액	불용액	불용률	전용	이월
일자리정책과	서울형 뉴딜일자리	사무관리비	1,820	1.184	546	31.5	△90

5. 동 사업의 소요예산(예산현액)중 전용, 이월 등 발생한 경우 금액, 사유(구체적), 방침번호(일자)

- 예산 전용 사유 : 미래서울 혁신형 사회서비스 산업 인력양성 사업(교육프로그램)은 당초 서울형 뉴딜일자리 사업의 일환인 청년혁신 일자리사업으로 운영될 예정이었으나, 국고보조금 사업으로 선정되어 서울지방고용노동청-서울시-청년일자리허브 간 약정체결(2014.3.6.)하여 청년일자리허브에서 수행하키로 사업계획을 변경하고, 뉴딜일자리사업의 사무관리비(90,000천원)를 지역맞춤형 일자리 창출사업 민간경상보조금으로 전용

- 예산 전용 방침 : 일자리정책과-2336호(2014.4.23.)

6. 집행잔액(불용액 포함) 발생사유

- 취약계층을 우대하기 위한 엄격한 사업 참여 배제 조건(재산가액 313백만원 이하 등)으로 인해 참여자가 당초 계획인원 미달과 중도탈락자 발생으로 인해 참여자 교육비 및 워크숍 비용 집행잔액 발생

▸ 자격미달로 인해 계획인원에 미달된 사업(총 27개 사업 중 6개 사업, 22.2%)

▸ 중도탈락자(2123명 중 442명, 20.8%)

※ ’15년 뉴딜 일자리 사무관리비는 ’14년 대비 17.6% 축소 편성

1. 사업명 : 마을기업 육성 사업

2. 사업개요

- 지역 기반의 공동체 관계망을 통한 마을기업을 발굴 육성하여 지역경제 활성화와 공동체 회복에 기여하고자 함

3. 추진실적

- 사업비 : 1차년도 16개 및 2차년도 10개 선정․지원

- 공간임대보증금 : 12개 선정 지원

4. 예산집행 현황

(단위:백만원,%)
부서명	세부 사업명	통계목	예산현액	집행액	불용액	불용률	전용	이월
사회적경제과	마을기업 육성사업	자치단체 경상보조금	3,073	1,567	1,505	49.0

5. 전용, 이월 : 해당사항 없음

6. 집행잔액(불용액 포함) 발생사유

- 서울시(1차) 및 안행부(2차)의 심사기준 강화로 당초 목표보다 기업이 적게 선정됨

1. 사업명 : 청년창업 1000 프로젝트(시설비)

2. 사업개요

- 소재지 : 마포구 백범로 31길 21(공덕동), (구)한국산업인력공단 부지내

- 규  모 : 본관동 17,753㎡(지하1/지상10), 서울지부 5,906㎡(지상4)

- 사업기간 : ’15. 1월 ~ ’16. 9월

- 사업추진 : 도시기반시설본부(건축부) 의뢰(공사, 감독 등)

- 소요예산 : 총 26,660백만원(’14년 147 / ’15년 13,796 / ’16년 12,717)

3. 추진실적

- 서울창업허브 기능·공간 조성용역 추진계획 수립            : ’14. 4.29

- 서울창업허브 기능·공간 조성용역 시행                     : ’14. 5∼11월

- 서울창업허브 조성계획 수립                               : ’14. 7월

- 재정 투융자 심사 완료                                    : ’14. 8월

- 마스터플랜 공모                                          : ’15.1~3월

- 별관동(서울지부) 정밀안전진단 추진                       : ’15.2~3월

4. 예산집행 현황

(단위:백만원,%)
부서명	세부 사업명	통계목	예산현액	집행액	불용액	불용률	전용	이월
창업취업 지원과	청년창업 1000 프로젝트	시설비	147	24	124	84.4	147

5. 동 사업의 소요예산(예산현액)중 전용, 이월 등 발생한 경우 금액, 사유(구체적), 방침번호(일자)

- 조속한 서울창업허브 조성을 위하여 ’14년 챌린지1000프로젝트 예산(민간위탁금) 중 147백만원을 전용(시설비)했으나 강․남북으로 분산 운영 중인 청·장년창업센터의 통합 이전을 위하여 ’14년 내 설계공모(120,000천원)추진하였으며, 본관동 정밀점검 결과(C등급)로 인하여 보수보강공사(27,225천원) 시행(’14.10.13 예산전용계획)

6. 집행잔액(불용액 포함) 발생사유

- 회의(건축정책위원회(’14.9.2, ’14.11.21), 총괄건축가 주관 회의(‘14.11.13))결과 ‘도시기반본부 총괄, 공단 전체 부지 활용계획(마스터플랜) 수립’ 등의 의견을 반영함에 따라 설계공모 등 절차 지연으로 불용액(설계공모 보상금) 발생