[별지 5] 성능개선 사업 착수계획서

성능개선 사업 착수계획서

접수번호

접수일자

제출

기관

기관명

서울특별시

대표자

서울특별시장

소재지

(도로명주소)

서울특별시 중구 세종대로 110

담당자

성명

정한수

부서/직위

청소년정책과/주무관

연락처

(사무실)02-2133-4123

E-mail

architect8389@seoul.go.kr

대상

건축물

건축물명

서울시립은평청소년수련관

성능개선

대상지정일

2017년   4월   4일

소유자

서울특별시

사용자

사회복지법인엔젤스헤이븐(은평청소년수련관)

사용승인일

2003년   11월    3일

주용도

교육연구 및 복지시설

연면적/

냉난방면적

4,963.16㎡

4,963.16㎡

규모

(지상)     3층 (지하)    1층

소재지

(도로명주소)

서울시 은평구 백련산로 4길 16

에너지 소비량 코드번호

1051-0012

성능개선 대상 지정시 연간 단위면적당 1차 에너지 소비량 3개년 평균

794

kWh/㎡․년

주요

추진

계획

사업계획서 제출기한 신청일

~  20   년   월    일 까지

사업계획

주요내용

연간 단위면적당 1차 에너지소요량 절감 목표

20

% 절감

냉난방부하 절감 목표

% 절감

기존 건축물의 상태 평가

[ V ] 포함

[  ] 불포함

기존 건축물의 에너지 시뮬레이션*

[ V ] 포함

[  ] 불포함

개선 후 건축물의 에너지 시뮬레이션*

[ V ] 포함

[  ] 불포함

개선 후 건축물 에너지소비량 절감을 위한 설계 및 유지관리 계획*

[  ] 포함

[ V ] 불포함

(기타)

(* 해당 항목이 사업계획 주요내용의 해당하는지 여부에 따라 포함 또는 불포함에 √ 표기)

「녹색건축물 조성 지원법」제13조의2에 따라 은평청소년수련관 건축물의 성능개선 사업 착수계획서를 제출합니다.

2017 년         9월         27일

서울특별시장

국토교통부장관 귀하

첨부

서류

1. 사업 추진계획(일정계획 포함)

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

첨부1.

공공건축물 성능개선 사업추진계획

□ 사업개요

○ 추진근거 : 기존건축물의 에너지 성능 개선기준 제6조2항

기존건축물의 에너지 성능 개선기준 제6조7항

○ 사업대상 : 시립은평청소년수련관

○ 주요내용

- [녹색건축물 조성 지원법] 제13조 제2항에 따라 성능개선 의무대상 시설로 선정

- 서울시 청소년수련관 기능보강 사업의 일환으로 판단되어 19년 기능보강 예산

집행계획 수립 시 본 사업을 반영하고자 함

□ 사업추진일정

○ 은평청소년수련관 수영장 폐열 회수기 설치 : 17.10~12

○ 청소년수련시설 내진성능평가 용역 시행 : 17.10.10 ~ 18.02.28

- 내진성능평가 시행 결과에 따라 [공공건축물 성능개선 사업] 착수 계획 수립

○ 청소년수련시설 내진 보강 계획 수립 : 18.3

○ 청소년수련시설 기능보강 예산신청 : 18.4

○ 은평수련관 에너지 성능 개선 집행계획 수립: 19.2

○ 성능개선 기본 및 실시 설계용역 :19.4

○ 성능개선 공사 수립 : 19.7 ~ 21.7