붙임-1		(기존 일정표) S-PLEXCENTER 입주기관별 사전공사 및 입주시기

(2015.12.11. 현재)

구 분			2015	2016
기관명	시설명	시기	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
					준공				개관
정보기획관	서울IT 통합개발센터	사전공사			《2월	3월》
		입주					《4월》
	통합보안 관제센터	사전공사	《12월			3월》
		입주					《4월	5월》
	클라우드 센터	사전공사					《4월					9월》
		입주										《9월》
경제진흥 본부	e스포츠 경기장	사전공사		《1월		3월》
		입주				《3월》
	기술지원 센터	사전공사					《4월			7월》
		입주								《7월》
	서울앱 비즈니스센터	사전공사		《1월	2월》
		입주				《3월》
	서울디지털 재단	사전공사				《3월》
		입주					《4월》
교통방송	교통방송 청사	사전공사				《1월			6월》
		입주						《5월	6월》