문서번호	문화체육과-3532
결재일자	2018.2.6.
공개여부	비공개(5)

주무관	성북동역사문화담당	문화체육과장	복지문화국장
협 조

-윤중식 기념미술관 조성을 위한-

기본계획 및 타당성조사 용역 시행 계획

2018.  2.

복지문화국

문화체육과

- 윤중식 기념미술관 조성을 위한 -

기본계획 및 타당성조사 용역 시행 계획

한국 근현대 미술을 대표하는 화가 윤중식을 재조명하며, 근현대 미술사 연구의 공간으로 활용될 윤중식 기념미술관 조성을 위한 타당성조사 용역을 시행하고자 함

Ⅰ		추진 근거

문화예술진흥법 제5조(문화예술공간의 설치 권장)

Ⅱ		추진 경과

2017.7. : 윤중식 기념미술관 건립 지원 시비요청(서울시 박물관과)

2017.12: 기본계획 및 타당성 조사 용역비 지원 확정

※ 총사업비 3,900백만원 ( 타당성 용역비 100백만원 )

Ⅲ		추진 개요

건립개요

□ 위   치 : 성북동 145-23~24 (2필지)

□ 규   모 : 토지 512㎡(155평), 건물 연면적  299㎡ (90.6평)

·  건물 2개동 (지상1층 / 지하1, 지상1·2층 )

□ 사업내용

- 서울시 미래유산인(2013년 지정) 가옥 매입‧보전, 기념미술관으로 활용

□ 총사업비 : 4,000백만원

- 기본계획 및 타당성 조사용역 : 100백만원

- 토지매입 : 3,461백만원(2,704천원/㎡[개별공시지가] *512㎡* 2.5배)

- 리모델링 :   439백만원
1,101천원/㎡(리모델링비) * 299㎡ + 109,801천원(설계비 등)

※ 최근 조성된 손기정 기념관 리모델링 비용 적용 (서울중구)

용역개요

□ 용 역 명 : 윤중식 기념미술관 조성을 위한 기본계획 및 타당성조사 용역

□ 용역기간 : 착수일로부터 5개월

□ 소요예산 : 100,000천원내 (부가가치세 포함)

□ 계약방법 : 협상에 의한 계약

Ⅳ		세부 추진 계획

과업목적

□ 윤중식 기념 미술관 조성의 타당성과 사업의 적정성을 검토하고 미술관 건립 및 운영에 필요한  기본 계획(안) 마련

과업범위

□ 공간적 범위 : 성북동 145-23~24 (2필지)

□ 시간적 범위 : 2018 ~ 2020년(개관)

□ 내용적 범위

- 윤중식 기념미술관 건립을 위한 여건조사

- 윤중식 기념미술관의 건립 필요성 검토

- 윤중식 기념미술관의 기본구상 및 리모델링 기본계획

- 윤중식 기념미술관 건립의 타당성 검토

- 윤중식 기념미술관의 전시․운영기본구상(안)

- 건립 사전 절차 이행 자료 작성

(공립미술관 사전평가 자료작성, 리모데링을 위한 설계 지침 등 )

주요과업 내용

□ 윤중식 기념 미술관 건립 타당성 조사

- 현황 조사 분석

- 개발환경 및 여건조사 분석

- 윤중식 기념미술관 건립의 필요성 검토

- 지역주민 설문조사 및 관계자 의견수렵

- 윤중식 기념 미술관 건립 경제성 분석

(수익 및 편익추정 : CVM방식을 통한 지불의사함수 추정)

- 윤중식기념미술관 건립을 위한 재원조달 방안

□ 윤중식 기념 미술관 건립 기본구상(안) 제시

- 윤중식 기념미술관 건립 및 기본구상 제시

- 설계용역 과업내용서 제시 등

□ 윤중식 기념미술관 건립을 위한 제언

□ 건립사전 절차 이행자료 작성

- 공립미술관 건립 사전 타당성 평가자료

- 투자심사 대비 자료 및 대응전략 마련

- 설계용역을 위한 가이드라인 제시

Ⅴ		소요 예산

소요 예산 : 100,000천원 (부가가치세 포함)

Ⅵ		향후 일정

2018. 2월 중        : 기술용역 타당성 심사의뢰 (서울시 기술심사담당관)                                 및 시비교부요청

2018. 3월 중          : 타당성 용역 계약의뢰

2018. 3월~ 7월       : 타당성조사 용역 시행