(서식 2)

국고 보조사업 수행상황보고서

(2019년 4월)

1. 사업 개요

○ 사 업 명 : 강동구 자원순환센터 건립사업

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2023년

○ 위    치 : 서울특별시 강동구 아리수로 87길 272

○ 사업규모 : 270톤/일 (음폐수 바이오가스화)

○ 총사업비 : 40,500백만원 (국고 : 7,007백만원, 지방비 : 16,350백만원)

○ 연차별 투자내역

(단위 : 백만원)

구 분		총 사업비	기 투자실적 (연도별)		향후 투자계획(연도별)
			계	2018	계	2019	2020	2021	2022	2023
계		40,500	747	747	39,753	696	7,152	12,350	12,350	7,205
국 고		7,007	148	148	6,859	209	1,204	2,079	2,078	1,289
지방비	소계	16,350	599	599	15,751	487	2,809	4,850	4,851	2,754
	시․도비	11,679	247	247	11,432	348	2,006	3,465	3,465	2,148
	시․군비	4,671	352	352	4,319	139	803	1,385	1,386	606
원인자부담금		17,143	-	-	17,143	-	3,139	5,421	5,421	3,162
민간자본		-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타		-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 사업추진현황

○ 전체 사업진도 및 실적

(단위 : 백만원, %)

총 공 정		총 투자비		착공(예정)일	준공(예정)일
계 획	실 적	계 획	실 적
100	-	40,500	747	2020.7.	2023.7.

○ 예산집행상황

(단위 : 백만원)

구분	2019년 (4)월까지 집행현황
	'19예산 (A)	전년도 이월액(B)	예산현액 (C=A+B)	지출원인 행 위 액	지출액 (D)	잔액 (C-D)	% (D/C)
계	696	747	1,443	-	-	1,443	-
ㅇ국고	209	148	357	-	-	357	-
ㅇ지방비	487	599	1,086	-	-	1,086	-
- 시·도비	348	247	595	-	-	595	-
- 시·군비	139	352	491	-	-	491	-
ㅇ원인자부담금	-	-	-	-	-	-	-
ㅇ민간자본	-	-	-	-	-	-	-
ㅇ기타	-	-	-	-	-	-	-

3. 추진경과 및 향후일정

○ 추진경과

- ’12. 12. : 『고덕·강일 보금자리주택 지구계획』승인 고시

- ’16. 2. ~ ’17. 3. : 기본계획용역 완료/한국지방행정연구원 타당성조사 완료

- ’17. 3. ~ 8. : 서울시 및 중앙 투자심사 완료

- ’18. 2. 1. : 대형공사 입찰방법 결정(턴키, 설계적합최저가)

- ’18. 5. 30. : 입찰안내서 작성용역 착수

- ’18. 11. : 사업 발주 의뢰(강동구 → 서울시 도시기반시설본부)

- ’18. 12. 14. : 입찰안내서 작성용역 준공

- ’19. 3. : 입찰공고

○ 향후 추진일정

- ’19. 10. : 실시설계 적격자 선정 및 우선시공분 착공

- ’19. 11. : 실시설계 착수

- ’20. 7. : 본 공사 착공

- ’23. 7. : 공사 준공 (공사기간 45개월, 시운전 포함)

- ’23. 7. : 시설운영 개시