붙 임 1.		설계VE 업무처리 절차도

신청 단계	1.	설계VE신청					발주부서 ⇒ 기술심사담당관		∘ D-14일
				설계VE팀 운영협의회 검토대상 여부 판단, 회신(기술심사담당관⇒발주부서)
				용역 진행율 확인(보고서,도면,내역서 등), 설계도서 배부시기 확인
준비 단계	2.	VE팀 구성 및 VE실행계획 수립					기술심사담당관(내부결재)		∘ D-7일
				도서 배부날짜를 확정하여 검토회의 일정 및 회의실 확정
				VE 리더 및 위원 선정 등 VE팀 구성
	3.	도서배부					발주부서 ⇒ VE팀
				설계도서(안), 보고서, 공사비 산출내역서 등 사전 검토
	4.	1일차 회의개최							∘ D-day
				VE팀 인사, 사업설명, 질의응답, 설계서 검토
				현장설명 및 답사
분석 단계	5.	2일차 회의개최							∘ D+3일
				VE 검토대상 선정, 설계안 검토 및 기능분석, 아이디어 제시, 아이디어의 평가, 대안의 구체화, 제안서 작성 및 발표
	6.	3일차 회의개최							∘ D+13일
				회의 후 제안서[채택․미채택․설계보완] 제출(VE리더 ⇒ 기술심사담당관)
실행 단계	7.	VE제안서 통보 및 수당지급 요청					기술심사담당관 ⇒ 발주부서		∘ D+14일
	8.	VE제안 채택여부 결과 회신					발주부서 ⇒ 기술심사담당관		∘ D+21일
	9.	VE제안 최종보고서 제출					VE 리더 ⇒ 기술심사담당관		∘ D+28일
	10.	VE심사결과보고					기술심사담당관(내부결재)		∘ D+29일
	12.	VE심사 최종보고서 작성 및 통보					기술심사담당관 ⇒ 발주부서		∘ D+30일
	13.	발주부서 후속조치
					VE 심사반영 결과 제출(설계자→발주부서), 건설사업정보시스템 등재(발주부서), 심사실시결과 제출(발주부서→기술심사담당관)