계약금액조정 검토결과서

건 명	2023년 광진구관내 상수도공사(장기계속단가계약)					요청기관(부서)		동부수도사업소 (급수운영과)
접수일자	2024.2.20.			공사개요	상수도관부설 D=13~400㎜, L=1,981m 원형밸브실 설치공 50개소 중형밸브실 설치공 5개소
공사기간	2023.6.12. ~ 2024.6.30.				도 급 자			㈜태상산업개발 대표 김옥선
심사요청(원)					심사결과(원)
당 초	변 경	증 감			심사대상		검 토		증 감
824,934,700	901,785,000	증)76,850,300			증)76,850,300		증)70,885,300		감)5,965,000
구 분	내 용		검 토 결 과							비 고
변경사유	○ 2023년 광진구관내 상수도공사 계약금액 조정 검토보고 (급수운영과-3383, 2024.2.20.) - 시공물량 증·감 및 신규공정,신규자재 발생에 따른 계약물량 조정
검토내용	○ 사회보험료(건강,노인장기,연금보험) 사업주 부담금만 적용 ○ 보조기층공(지세) t=15㎝ 물량 누락분 추가 - con 인력비빔타설(t=15㎝) 물량과 일치(0.25a → 0.31a)
기타사항	○ 조정금액에 따른 제비율검증 이행 및 실정산이 필요한 항목은 자료를 제출받아 관련 규정에 맞게 처리하기 바랍니다.
검토의견	○ 상기 검토결과를 반영하여 계약변경 시행하기 바람.