문서번호	시설관리과-28332
결재일자	2022. 12. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장	시설부장		상수도사업본부부본부장
				12/28
협 조

2023년 노후밸브 정비 추진계획

2022.  12.

상수도사업본부

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

2023년 노후밸브 정비 추진계획

시설부장 : 강호광☎3146-1501 시설관리과장 : 신근호☎1530 담당 : 최경서☎1532

녹 발생 등으로 수질사고 우려가 높은 노후 밸브를 내식성 재질의 밸브로 교체하여 내구성 향상 및 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급하기 위한 노후밸브 정비 추진계획을 보고드림.

Ⅰ		추진 배경

□ 추진 근거

ㅇ「수도법」제2조(책무)

④ 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며, 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.

ㅇ「지방공기업법」시행규칙 제19조(감가상각의 방법) 제1항 제1호

- 건축물 등의 내용연수표(수도관 부속설비 20~30년) 【별표2】

ㅇ 상수도 밸브 종합관리계획 (본부장 방침 제117호, ’07. 7.3)

ㅇ 노후밸브 정비 중장기 추진계획 변경 (본부장 방침 ’16.10.10)

□ ’22년 행정 사무감사 시정 요구사항

ㅇ 노후밸브 정비와 관련하여 400㎜ 이상 대형관 밸브는 문제시 대형 사고가 발생할 수 있으나, 정비 우선 1순위는 고장 및 누수 밸브이고 400㎜ 이상 노후밸브는 5순위로 후 순위이며, 정비실적도 저조하므로 노후밸브 정비 우선순위에 대해 재검토할 것

ㅇ 녹이 슨 밸브 등으로 인해 대형 사고 발생 가능성이 있으므로 녹이 슬지 않는 재질의 밸브로 교체하는 것을 검토할 것

※ 노후밸브 정비 사업은 비내식성 회주철 밸브를 내식성 재질(덕타일주철, 스테인레스 등)의 밸브로 교체하고 있는 사업임

Ⅱ		사업 개요

□ 사업 개요

ㅇ 사업대상 : 76,766개소 (비내식성 회주철 밸브, ’08년 기준)

ㅇ 사 업 비 : 504,030백만원 (사업기간 ’08. ~ ’27년)

ㅇ 내    용 : 녹물 발생 우려가 있는 ’95년 이전 회주철 밸브 정비

ㅇ 연차별 계획

(단위: 개소, 백만원)

구 분	총계	기투자(～’22)			추진 계획
		소계	∼’21	’22	소 계	’23	’24~
정비수량	76,766	60,984	58,039	2,945	15,782	2,950	12,832
사 업 비	504,030	288,110	262,207	25,903	215,920	28,550	187,370

ㅇ 사업방법 : 수도사업소 시행

- 시설물 유지보수 연가단가 공사 및 건설사업관리(감리) 용역 시행

□ 2022년 추진실적

(단위: 개소)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
목 표		2,945	575	262	486	156	403	396	430	237
실적	노후밸브 교체	2,665	450	267	413	159	345	396	431	204
	정비율(%)	90.5	78.3	101.9	85.0	101.9	85.6	100.0	100.2	86.1

Ⅲ		2023년 추진계획

□ 추진 목표

ㅇ 목표물량 : 2,950개소

ㅇ 사업기간 : 2023. 1. 1.~12.31.

ㅇ 사 업 비 : 28,550백만원

ㅇ 사업소별 정비물량

(단위: 개소, 백만원)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	본부
물량	계	2,950	593	252	495	140	408	400	435	227
	350㎜이하	2,920	587	249	490	139	404	396	430	225
	400㎜이상	30	6	3	5	1	4	4	5	2
사 업 비		28,550	5,528	2,349	4,614	1,305	3,803	3,729	4,055	2,116	1,051

※ 회주철 밸브 잔량 비율로 배분

□ 추진 방향

ㅇ 연차별 정비계획 물량의 조기 정비추진을 위한 우선순위 조정

- 노후 잔여 물량 비율이 많은 350㎜ 이하 밸브를 집중 정비

ㅇ 400㎜ 이상 대형밸브 정비는 대부분 광범위한 단수 지역을 수반함에 따라 정비 시 단수 민원 및 혼탁수 발생 우려 상존

- 노후 상수도관 정비공사 등과 연계하여 정비

- 수계 전환이 곤란한 대규모 단수 예상 지역은 부단수 차단공법 활용

⇒ 단가계약 사업 발주 시 부단수 공종 반영(필요시 단위사업 발주)

ㅇ 소·중블록 단위의 노후밸브 정비추진

- 재개발·재건축 대상지 제외

- 노후 상수도관(송배수관, 배급수관) 정비대상 구간은 해당 사업으로 정비

ㅇ 성과관리 및 경영실적평가 대상 사업으로서 사업소별 목표관리 시행        - 사업소 경영실적 평가에 반영, 성과관리(BSC)에 따른 분기별 목표관리

ㅇ 소방재난본부 관리대상 소화전용 노후밸브 정비

(단위: 개소, 백만원)

사업소		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
대 상		1,468	286	159	203	119	154	200	208	139
예산	계	2,936	372	318	606	238	308	400	416	278
	사업소	1,762	143	191	443	143	185	240	250	167
	자재센터	1,174	229	127	163	95	123	160	166	111

※ ‘소화전 설치·보수’사업의 예산과 구분되므로 분리 집행

□ 추진 일정

ㅇ ’22.12.26.~ 12.30. : 대상 물량 선정 및 정비 계획수립

ㅇ ’23. 1. 1.~  2.28. : 현장 조사 및 도로 굴착 협의

ㅇ ’23. 3. 1.~ 11.30. : 노후밸브 교체

ㅇ ’23.12. 1.~ 12.31. : 상수도 GIS 입력 등

Ⅳ		행정 사항

ㅇ 사업소 자체 정비계획 수립 후 시설관리과 수합 보고 (’23.1.20.까지)

ㅇ ’22년 노후밸브 정비 추진실적(최종) 시설관리과 수합 보고

- 노후밸브 및 소화전용 노후밸브 정비실적(최종) 제출 (’23.1.13.까지)

ㅇ ‘노후밸브 정비’ 실적 제출 : 사업소 시설관리과 (익월 10일까지)

- 사업소별 분기 목표 수량 고려하여 정비

ㅇ ‘소화전용 노후밸브’ 정비 실적 제출 : 사업소 시설관리과(분기별)

- 전분기 실적을 다음 분기 시작 월 10일까지 제출

붙임 : 1. 노후밸브 분기별 정비목표 현황 1부.

2. 노후밸브 정비 실적 제출(양식) 1부.

3. 소화전용 노후밸브 정비 실적 제출(양식) 1부. 끝.