여의도샛강 합류부 생태거점 조성사업 추진계획

생태적 가치가 높은 한강 여의도샛강 합류부(상류) 구간에 생태계 회복  및 생물서식처 복원 등 한강의 자연성 회복사업을 추진하여 생태거점 으로 조성하고자 함.

관련근거

○  2030  한강 자연성 회복 기본계획 (시장방침 제93호, 2014. 4. 2)

○  한강 자연성 회복 및 관광자원화 종합추진계획 (행정2부시장방침 제366호, 2015. 10. 29)

추진방향

○  이용객 증가로 인해 교란된 여의도샛강 합류부 생태계를 회복하고 생물서식처로서의 기능강화

○  비오톱 및 야생동물 출현지역 등 생태적 잠재력이 큰 지역을 대상으로 생태거점 조성

○  외래식생 관리 등 하천식생 정비와 다양한 물새류의 서식기능 보존

사업개요

○  위    치 : 여의도샛강 상류 합류부 주변

○  규    모 : 약 190,000㎡

○  사업내용 : 하안구조 개선, 수변식생 개선 및 수림대 조성, 야생조류관찰대 설치, 이용편의시설 개선 등

○  사업기간 : 2016. 1 ~ 2018. 12

○  총사업비 : 6,000백만원 (‘16년:400, ‘17년:2,800, ‘18년:2,800)

소요예산

○ 소요예산 : 총6,000백만원 (시비)

(단위 : 백만원)

구 분	계	2016년	2017년	2018년	비고
합 계	6,000	400	2,800	2,800
용역비 (설계용역, 환경영향평가용역)	400	400	-	-
공사비	5,600	-	2,800	2,800

○ 예산과목 : 한강공원 이용 및 생태환경개선, 한강자연성 회복, 한강 자연성 회복사업, 시설비 (100-401-01)

추진일정

○ 2016. 01. 28    : 사업계획 수립

○ 2016. 02. 03    : 기술용역타당성 심의

○ 2016. 03. 16    : 실시설계용역 발주

○ 2016. 04. 12    : 설계용역 사업수행능력평가(PQ)

○ 2016. 05. 17    : 설계용역 착수

○ 2016. 07. 19    : 소규모 환경영향평가용역 착수

○ 2016. 09. 28    : 제17회 한강시민위원회 본회의 자문

향후계획

○ 2016. 5 ~ 12월 : 설계용역 시행

○ 2016. 7 ~ 11월 : 소규모 환경영향평가용역 시행

○ 2016. 12월      : 하천점용허가 신청 및 협의

○ 2017 ~ 2018년 : 공사시행

붙임 : 위치도 1부.

위  치  도

□ 여의도샛강 합류부 생태거점 조성

사업대상지

한강철교

원효대교