이동형 문화편의시설(무빙스토어)

문화·예술적 체험요소를 강화한 시민소통 공간 및 청년창업 지원을 위한 이동형 문화편의시설(무빙스토어)을 조성하여 관광자원화 기반 구축

□ 사업개요

○ 위    치 : 여의도 한강공원

○ 사업기간 : 2016년 ~ 2017년

○ 총사업비 : 23억 (국비 8억, 시비 9억, 민자 6억)

- `16년 예산 : 13억 (국비 6억, 시비 7억)

○ 시설개요(안)

- 이동형 컨테이너 24개 (평균 36㎡), 이동형 부스 40개 (평균 20㎡)

○ 공간구성(안)

- 창업지원 : 청년, 신진디자이너 지원, 예술공방 등

- 체험전시 : 사회적 기업 제품 홍보, 체험 및 판매 등

- 문화교류 : 열린 마켓 등 시민들의 자발적 참여 공간

□ 추진방안

○ 한강 실정에 맞는 시설계획 및 관리운영 방안 확정하여 사업추진

- 선행사례(플랫폼 창동61, 언더스탠드 에비뉴) 조사 완료

○ 구체적인 실행 방안 및 전문성 강화를 위한 자문단 구성·운영

○ 창의적인 시설계획, 공간구성을 위한 설계공모 시행

○ 공공 또는 민간위탁 등 운영방법 별도 계획 수립

○ 추진절차

자문단 구성운영		설계공모		실시설계		공사시행		운영
다양한 분야의 전문가 구성	➪	지명초청 약식공모 시행	➪	공모 당선작과 수의계약	➪	시설설치	➪	별도 운영계획 수립

□ 향후일정

○ ‘16. 6. ~          : 자문단 구성·운영

○ ‘16. 6. ~  7.      : 설계공모 시행

○ ‘16. 7. ~ 10.     : 기본 및 실시설계

○ ‘16.10. ~ ’17. 6. : 공사 시행

○ ‘17. 6. ~          : 운영자 공모 및 운영개시