1

내부순환로 교면포장 개량공사

(도시안전위원회, 소관부서 : 도로시설과)

준공 후 15년이상 경과된 내부순환로 노후된 포장에 대해 연차별 개량을 실시하여 쾌적하고 안전한 도로환경 제공 및 시설물 내구성 향상을 도모하고자 함.

Ⅰ		사업개요

추진개요

❍ 위치 : 내부순환로 전구간(L=22km) 성산대교 북단 ~성동구 성수동 동부간선로

❍ 규모 : 교면포장개량 총 5,482a (전면 3,231a, 부분 2,251a)

❍ 사업기간 : 2011.01. ~ 2017. 12.

❍ 사업내용 : 내부순환로 교면포장 개량 (교면방수, 아스콘 포장, 차선도색 등)

❍ ‘15년도 사업예산                                             (단위 : 백만원)

예산과목		2015예산	2014예산	증감	산출내역
계		9,000	3,000	6,000
	민간대행 사 업 비	9,000	3,000	6,000	북부고가교 - 전면개량 377a✕11.2=4,200 정릉천고가교 - 전면개량 425a✕11.2=4,800

※ 총사업비 :  35,680백만원

- ’13년이전 : 13,680백만원 ,  ’14년 :  3,000백만원 ,  ’15년 이후 :  19,000백만원

❍ 추진방식 : 민간위탁

2015년 추진실적

❍ 세부추진실적

- ’10.12.28 : 기본 및 실시설계 용역 준공

- ’11.06~.14.02 : 내부순환로 교면포장 개량공사 1~3차년도 시행완료

- ’14.09~’16.12 : 내부순환로 교면포장 개량공사(장기계속공사)

- ’15. 2. 13 : 자동차전용도로 교면포장 공법 및 자재 선정위원회 개최

- ’15. 3. 25 : 내부순환로 교면포장 개량공사 구간 검토 완료

- ’15. 4. 10 : 민간대행사업비 배정 계좌 개설

- ’15. 5. 11 : 내부순환로 교면포장 개량공사 공사계약체결

- ’15. 6.~ : 정릉천고가교 교면정비공사 시행 중

❍ 예산집행현황

- ‘15년도                                                    (단위:백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용․ 변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	지출액 (E)	차년이월 (F)	집행잔액 (D-E-F)	집행률 (E/D)×100
2015	9,000	-	-	9,000	350		8,650	3.9%

- 최근 3년간 예산집행실적                                    (단위 : 백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이‧전용‧변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	지출액 (E)	차년이월 (F)	집행잔액 (D-E-F)	집행률 (E/D)×100
2012	4,200	-	-	4,200	4,181		19	99%
2013	3,000	-	-	3,000	2,680	-	320	89%
2014	3,000	-	-	3,000	3,000	-	-	100%

향후 추진일정(향후계획)

❍ ‘15년 발주공사 조기준공

❍ ‘16년 이후 연차별 개량대상 구간 공사추진

Ⅱ		성과분석

잘된 점

❍ 포장 노후화로 포트홀이 빈번하게 발생되었으나 개량공사 시행으로 대폭 감소

❍ 포장 노후로 인한 교량 구조물 열화진행을 억제

❍ 포장개량으로 도로주행의 안전성 및 쾌적성 제고

보완할 점

❍ LCC 도입으로 개량공사 후 노후화진행에 대한 모니터링으로 보수시기 결정

참고자료

위치도