2014년 예산 집행계획서

1. 공사개요

1) 공 사 명 : 서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업

2) 공사기간 :  2012.11.15. ～ 2015.02.02.

3) 시공회사 : 대림산업(주)외 2개사

4) 감리회사 : (주)도화엔지니어링외 1개사

5) 공 사 비 :  63,470백만원

2. 2014년도 예산 집행계획(안)

공 종		세부공종	사용계획	집행시기	비고
시설비	도급공사	토목공사	7,752백만원	2014년8월～2015년2월
		전기공사	508백만원	2014년8월～2015년2월
		기계공사	5,522백만원	2014년8월～2015년2월
		소 계	13,782백만원	2014년8월～2015년2월
	폐기물처리비		21백만원	2014년3월～2015년2월
	직접구매자재비	토목(레미콘)	1,284백만원	2014년6월～2015년2월
		전기(수배전반 외)	2,190백만원	2014년6월～2015년2월
		플랜트(농축기 외)	3,953백만원	2014년3월～2015년2월
		소 계	7,427백만원	2014년3월～2015년2월
	계		21,230백만원	2014년3월～2015년2월
감 리 비			700백만원	2014년3월～2015년2월
합 계			21,930백만원	2014년3월～2014년6월

※상기 계획은 2차공사 실지준공일에 따라 일부 변동이 예상됨.