계약금액조정 검토결과서

건 명	2021년 동작, 영등포구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사 (장기계속 단가계약)			요청기관(부서)		동부수도사업소 (시설관리과)
접수일자	2021. 12. 14.		공사개요	- 제수변 정비 : 176개소 변실 정비 : 80개소
공사기간	2021. 5. 20. ~ 2022. 4. 30.			도 급 자		케이월드종합건설㈜ 대표 서동필
심사요청(천원)				심사결과(천원)
당 초	변 경	증 감		심사대상	검 토		증 감
868,245	1,116,335	증)248,089		증)248,089	증)246,692		감 1,397
구 분	내 용	검 토 결 과						비 고
변경사유	○ 설계변경 검토보고(시설관리과 - 24195, 2021.12.14.) - 현장여건 변화에 따른 물량변경 및 신규공종 반영 - 제경비 등 실제 정산에 의한 변경
검토내용	○ 수량 조정 - 토공(환토소운반), 사급자재(환토재 시내도착도) 수량 조정 ○ 부대공(거름망보수 등) 제경비 제외 공정 추가							조 정 내역서 참 조
기타사항	○ 산업안전보건관리비 등 정산이 필요한 항목은 자료를 제출받아 정산처리하기 바람
검토의견	○ 상기 검토결과를 반영하여 계약변경 시행하기 바람