문서번호	도로관리과-7420
결재일자	2018.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	도로관리팀장	도로관리과장	안전총괄관		안전총괄본부장
협 조

「도로관리 빅데이터시스템 구축(1단계) 용역」

준공기한 연기 검토보고

2018. 5.

안전총괄본부

(도로관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「도로관리 빅데이터시스템 구축(1단계) 용역」

준공기한 연기 검토보고

「도로관리 빅데이터시스템 구축(1단계) 용역」사업에 ‘18.4월 확정 시행된 도로관리 유지관리 기본계획 및 업무지침의 최종 내용을 반영하고자 준공기한 연기를 검토하여 보고드림

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 도로관리 빅데이터시스템 구축(1단계) 용역

○ 용 역 비 : 1,350,240천원

○ 용역기간 : 2017.5.22. ~ 2018.5.16

○ 용역업체 : ㈜삼현피에프 외 2개사

○ 용역내용

- 포장정비지수 개발(관리지수 개발, 전체도로 PMS 고도화)

- 포장정비기법 전산화(예산집행 최적화기법 개발, 서울형포장설계법 전산화)

- 품질관리체계 전산화(PQMS 개발, 포장공사 단계별 품질기준/확인절차 개발)

- 도로함몰 관리시스템 고도화(시스템 고도화, 예측모델 개발)

- 도로기반정보 연계·통합(개별시스템 연계·통합, 단계별 구축전략 수립)

□ 추진경위

○ ‘17. 5.22 : 용역 계약 및 착수

○ ‘17. 7.19 : 용역 세부 추진계획 보고

○ ‘17.11.13 : 용역 중간보고(1차)

○ ‘18. 2.26 : 용역 중간보고(2차)

○ ‘18. 5.10 : 용역 추진보고(시스템 시연)

※ ‘18. 4. 4 : 「도로포장 유지관리 기본계획」 수립

□ 검토내용

○ 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경	비 고
용역기간	‘17.5.22 ~ ‘18.5.16	‘17.5.22 ~ ‘18.8.14	90일 연장 계약금액 변동없음

○ 연기사유

본 용역은 "서울시 도로포장 유지관리 기본계획"의 내용을 반영하여 추진하도록 계획되었으나, 기본계획 수립이 연장되어 2018년 4월에 최종 확정됨에 따라, 기본계획 관련 내용을 반영하기 위한 추가 기간이 소요되어 준공기한 연기가 필요함

○ 귀책사유 및 지체상금 부과여부

- 귀책사유 : 서울특별시

- 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 처리의견

○ 「도로관리 빅데이터시스템 구축(1단계) 용역」 준공기한을 연기하여 “서울시 도로포장 유지관리 기본계획”의 최종 내용이 성과품에 충실히 반영될 수 있도록 용역시행에 만전을 기하고자 함

붙 임 : 관련공문 1부.  끝.