서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 -교 통 안 전 시 설 심 의-

2021. 10

	서 울 특 별 시

서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 실시설계

Ⅰ. 사업의 개요

• 서부간선도로 지하도로 건설과 연계하여 기존 서부간선도로 차로폭 축소 후 녹지, 보도 및 자전거도로, 커뮤니티 시설 등 친환경공간으로 조성

구 분	내 용
과 업 명	•서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 실시설계 용역
위 치	•서울시 영등포구 양평동(목동교) ~ 금천구 독산동(금천교 이전)
과 업 내 용	•일반도로 전환 및 평면교차로 설치 - 입체교차로 → 평면교차로 설치(오목교, 오금교, 고척교, 광명교 - 4개소) - 평면교차로 신설(구일초교앞 - 1개소) - 간이입체 + 하부평면교차로 설치(철산교 - 1개소) - 이면도로 교차로(12개소), 진출입로(25개소) 설치 •보행육교 철거 - 철거 2개소, 철거후 신설 1개소, 존치 3개소 •보도 및 자전거도로 신설(주거지 편측) - 보도 2.5m, 자전거전용도로 3.25m - 신정교 북측구간 자전거도로 미설치(구청 협의) - 안양천 제방측 점검로(1.5m) 설치 •운영속도 변경 - 지하도로 개통 전 80km/h, 지하도로 개통 후 60km/h - 본 사업완료 후 50km/h

위치도

Ⅱ. 공사 개요

1. 단계별 시공 개념도

구분	교통처리 패턴도	시 공	교통처리
1~2 단계		- 1단계 - • 차선조정 - 중분대 철거 위한 공간 확보 및 본선 2차로 차선조정	- 1단계 - <일직JCT방면/성산대교방면> - 현황 차로수 유지 - 본선 2차로통행 - 연결로 현황 유지
		- 2단계 - • 중분대 철거 - 중분대 철거 및 포장 - 교통처리용 가시설 설치 - 오목,오금,광명 지하차도 구간 성토 (오목:반폭, 오금,광명:전체)	- 2단계 - <일직JCT방면> - 오목,오금,광명 상부통행 - 신정,고척 본선2차로통행 (연결로 현황유지) <성산대교 방면> - 오금,광명 상부통행 - 오목,신정,고척 본선2차로 통행 (연결로 현황유지)
3 단계		• 일직JCT방면 계획구간 시공 - 일직JCT방면 본선시공 - 오목,고척 지하차도 구간 성토(반폭) - 기존 옹벽 철거를 위한 가시설 설치 - 육교 철거(이씨의 다리)	<일직JCT방면> - 오목,오금,광명 상부통행 - 신정 본선2차로 통행 <성산대교 방면> - 오목,오금,광명 상부통행 - 신정 본선2차로 통행
4 단계		• 성산대교방면 계획구간 시공 - 성산대교방면 본선시공 - 고척 지하차도구간 성토 (반폭) - 직벽형 옹벽 설치	<일직JCT방면> - 오목,오금,고척,광명 상부통행 - 신정 본선2차로 통행 <성산대교 방면> - 오목,오금,광명 상부통행 - 고척 상부1, 본선1 통행 - 신정 본선2차로 통행
5 단계		• 친환경공간 및 보도시공 - 친환경공간 시공 - 보도 및 자전거도로 시공 - 육교 철거 후 재설치 (구일역앞) - 육교 철거(유수지앞 육교) - 이면도로 진출입구 반폭시공	<일직JCT방면> - 완료구간 2차로 통행 <성산대교방면> - 완료구간 2차로 통행

2. 단계별 세부 공정표단계별 시공 개념도

구 분	공 사 내 용	점 용 구 간	단계별 공사기간 (1,047일)	공 사 시 간
1단계	ㆍ차선 조정 - 중분대 철거 위한 공간확보 및 본선 차로조정	․ 차로 위치조정 후 점용 없음	2022. 03. 01 ~ 2022. 04. 30 (61일)	․ 전일공사
2단계	․ 중앙분리대 철거 - 중앙분리대 철거 및 포장 - 오목교, 오금교, 광명교 지하차도 성토	․ 중분대 측 가로구간 ․ 지하차도 성토부	2022. 05. 01 ~ 2022. 12. 31 (245일)	․ 전일공사
3단계	․ 일직JCT 방면 본선시공 - 오목교, 고척교 지하차도 성토	․ 지하차도 성토부 ․ 가로구간 본선 시공부	2023. 01. 01 ~ 2023. 10. 15 (288일)	․ 전일공사
4단계	․ 성산대교 방면 본선시공 - 고척교 지하차도 성토	․ 지하차도 성토부 ․ 가로구간 본선 시공부	2023. 10. 16 ~ 2024. 06. 15 (244일)	․ 전일공사
5단계	․ 친환경공간 및 보도 시공 - 육교 철거 후 재시공(구일역앞)	․ 친환경공간 및 보도측	2024. 06. 16 ~ 2024. 12. 31 (199일)	․ 전일공사
6단계	․ 공사완료 및 준공	-	-	-

구 분	공사 기간	2022년																				2023년																								2024년
		3월		4월		5월		6월		7월		8월		9월		10월		11월		12월		1월		2월		3월		4월		5월		6월		7월		8월		9월		10월		11월		12월		1월		2월		3월		4월		5월		6월		7월		8월		9월		10월		11월		12월
1 단계	61일
2 단계	245일
3 단계	288일
4 단계	244일
5 단계	199일

Ⅲ. 주변 교차로 소통현황(현재, 오전첨두시)

Ⅳ. 장래 교통량 및 교통분석

Ⅴ. 개 선 방 안

1. 주요 교차로 평면교차 전환

• 과업구간 내 교차로 계획 - 8개소(입체교차로)

• 평면교차로 전환 4개소(오목, 오금, 고척, 광명 및 신설 1개소(구일초교앞)

교차로명	현황	계획
오목교교차로	지하차도	평면교차로
신정교교차로	지하차도	지하차도 (변동없음)
오금교교차로	지하차도	평면교차로
고척교교차로	지하차도	평면교차로
구일초교교차로	진출램프	평면교차로
안양교교차로	고가차도	고가차도 (변동없음)
광명대교교차로	지하차도	평면교차로
철산교교차로	간이입체	간이입체 + 하부평면

2. 보도 및 자전거도로 설치

• 보도 2.5m, 자전거전용도로 3.25m 설치

• 친환경공간 설치(주거지측)

현 황
계 획

3. 보도육교 삭제

• 보도 2.5m, 자전거전용도로 3.25m 설치

• 친환경공간 설치(주거지측)

구 분	위 치	육교 계획
보도육교1 (양평12육교)	영등포구 양평동	존 치
보도육교2 (문래육교)	영등포구 문래동	존 치
보도육교3 (이씨의다리)	구로구 신도림동	철 거
보도육교4 (구일역앞)	구로구 구로동	철거 후 신설
보도육교5 (신구로유수지)	구로구 구로동	철 거
보도육교6 (가산한내)	금천구 가산동	존 치