【서식 1】

사 고 이 월 요 구 서(구비)

(단위 : 원)

구분 조직	예산과목					예산액	지 출 원 인 행위액	지출액	집행 잔액	다음연도이월액			이월 사유	완 공 예 정 연월일
	정책	단위	세부	편성목	통계목					계	국비 시비	구비 (원인행위미필액)
공원 녹지과	도시 개발	공원조성 및 정비	돌산근린공원 보상 및 조성	시설비 및 부대비	시설비	4,245,071,000	258,688,300	258,688,300	3,986,382,700	68,143,000 (3,986,382,700)		68,143,000 (3,986,382,700)	법적 사전 절차 이행	2021. 12.17.

【서식 2】

2019 회계연도 사고이월 명세표

사 업 주 관 부 서 장	:	김 현 경	□
작 성 자	:	이 덕 신	□

□ 부서명

(단위 : 원)

세부사업명	2019 회계연도 예산				지출원인행위 (2019.12.23기준)		지 출 액 (2019.12.23기준)		2019 회계연도 이월예산		집행 잔액	이월 사유	예산 구분 (본․ 추경․ 간주)	비고
	통계목	예산 현액	배정액	배정 월일	월일	금액	월일	금액	이월액 (원인행위미필액)	준공예정 년월일
	(과목코드)
총 계		2,862,539,000	2,862,539,000			2,697,470,940		1,941,273,960	708,925,340 (0)	2020.5.30	165,068,060
하천 내 경관개선 및 위험수목 정비	시설비	2,532,539,000	2,532,539,000			2,372,517,440		1,683,989,460	641,256,340 (0)	2020.5.30	160,021,560	준공기간 미도래	본예산
	401-01
숨은 땅 찾아 나무심기 추진	시설비	330,000,000	330,000,000			324,953,500		257,284,500	67,669,000	2020.5.30	5,046,500	준공기간 미도래	간주
	401-01

※ 작성요령

1. 사업명은 세부사업별로 구분하여 작성하고, 이월액은 총 사고이월 금액을 기재하되, 지출원인행위 미필이월액은        이월액란에 (  )로 별도 명기할 것

2. 지출원인행위와 지출액이 수회에 걸쳐 이루어진 경우 최초～최종월일 기재하고, 지출금액은 총금액으로 기재

3. 이월 사유란에는 구체적인 이월사유와 함께 지출원인행위 미필이월 요지를 함께 명시할 것

4. 예산 구분란은 본예산, 추경예산, 간주처리 구분하여 기재하고, 비고란에는 일반회계, 특별회계 구분 작성

5. 과목코드는 『편성목-통계목』을 명기(ex. 401-01)

【서식 3】

사고이월 사업별 명세서

□ 사 업 명 : 더 좋은 세곡천 만들기(1차)사업

□ 사업개요

◦ 공 사 명 : 더 좋은 세곡천 만들기(1차)사업

◦ 위    치 : 세곡천 (은곡교~세곡3교)

◦ 공사개요 : 하천녹지복원 및 시설물 설치 등

◦ 공사기간 : 2019. 11. 20. ~ 2020. 05. 30.

◦ 총공사비: 금941,256,340(구비)

- 시설공사 : 도급비 816,525,700원, 관급자재비 91,722,670원

- 폐기물처리 : 33,007,970원

◦ 도 급 자

- 시설공사 : 지승종합건설 대표 김란희

- 폐기물처리 : 엘에스에너지 대표 이기성

□ 이월요구 세부내역

◦이월사유

- 2019. 11. 20. 공사착공 후 사업 추진 중으로 수목제거, 사면정비 등 사업여건 상 부득이 연내지출이 불가하여 2020.5.30.까지 공사완료 하고자 당초 발주하였음

- 동절기 시설물 및 수목 식재 시 하자발생 등 공사품질 저하가 우려되므로, 사업 완성도 제고를 위해 사고이월 필요

◦이월내역

- 공원녹지과, 도시개발, 생태공원 조성 및 유지관리, 하천 내 경관개선 및 위험수목 관리, 시설비 및 부대비, 시설비

- 공원녹지과, 도시개발, 녹지조성 및 정비, 숨은 땅 찾아 나무심기 추진, 시설비 및 부대비, 시설비

- 예산내역

(단위 : 원)

사업명	구분	예산현액 (A)	배정액 (B)	지출원인 행위액(C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 A-(D+E)
계		2,862,539,000	2,862,539,000	2,697,470,940	1,941,273,960	708,925,340 (0)	165,068,060
하천 내 경관개선 및 위험수목 정비	시설비	2,532,539,000	2,532,539,000	2,372,517,440	1,683,989,460	641,256,340 (0)	160,021,560
숨은 땅 찾아 나무심기 추진	시설비	330,000,000	330,000,000	324,953,500	257,284,500	67,669,000 (0)	5,046,500