(재)서울문화재단 2015도시게릴라프로젝트

광복70주년 서울시 청사 모뉴먼트(monument) 추진계획(안)

(재)서울문화재단은 재미있어 죽겠는 도시 서울을 만들기 위한 ‘서울을 즐기는 뻔(Fun)한 방법’ <도시 게릴라 프로젝트>의 일환으로 서울시 청사 시설물(서울도서관)을 활용하여 서울시민이 광복 70주년을 기념하고, 동시대 광복의 의미를 재발견 할 수 있도록 공공미술 모뉴먼트 프로젝트를 추진하고자 합니다.

※시장님 요청사항 <2014.11.03재요청/재분류 <재미있어 죽겠는 도시 서울> 추진>

<시민행복디자인>, <즐거워 죽겠는 도시 서울> 추진 (11.3 요청사항)

- 서울이 한눈에 바뀌었다고 할 정도로 뭔가 재미나고 신기한 도시로 만들어달라는 것이지요. 전에 문화재단에 내가 몇 차례 요청했던 “신기하고 재미난 서울”, “재미나 죽겠는 서울”, “재미나서 졸도해서 병원에 실려 가는 서울”을 좀 더 집중적으로 구현해 주세요. 내 PINTEREST를 보시면 그런 것이 많이 수집되어 있습니다. 사실 이런 일은 돈도 많이 안 들어가고 시민들을 즐겁게 하는 것이지요. 폭스바겐.닷컴 도 그런 것 아니던가요?(문화정책과-문화재단)

▢ 개요

○ 사 업 명 : 2015 도시게릴라프로젝트 <광복70주년 서울시청사 모뉴먼트>

○ 사업기간 : 2015.04.~09월.

○ 추진장소 : 서울시 청사 일대(서울도서관 외벽 / 서울광장)

○ 사업예산 : 10,000만원((재)서울문화재단 자체예산)

○ 추진내용 : 광복70주년을 기념하여 서울시 청사 「서울도서관」 외벽을

활용한 공공미술 모뉴먼트 프로젝트 추진

※ 설치작품은 작가․작품 공모 후, 선정결과에 따라 가변적

▢ 세부추진계획(안)

○ 공공미술 모뉴먼트 프로젝트

- 공공미술 작품 설치

•작품(안) : 현 시대가 의미하는 광복과 광복의 의미를 되새기는 컨셉의 설치미술

※미디어파사드, 입체조형물 설치, 페인팅 등 공모심사결과에 따른 작품설치 방안 모색

•설치장소 : 서울도서관 전면 외벽

▶

•전시일정 : 2015.07.15.(수)~9.02.(수)까지 –50일간-

※설치기간:2015.07.09.(목)~07.14.(화) -6일간-

※해체기간:2015.09.03.(목)~09.06.(일) -4일간-

- 추진체계

• 프로젝트공모(작가․작품/추천위원회) ⇒ 프로젝트선정(심의위원회) ⇒ 프로젝트 기획안 실행방안 협의 ⇒ 설치구조물 안전성 검토 ⇒ 최종안 선정 ⇒ 설치구조물 심의(서울시) ⇒ 작품설치 ⇒ 프로젝트 진행 ⇒ 결과보고

• 자문위원회 구성 및 회의 개최 : 2015.05.07.(목) 예정

○ 부대 프로그램

- 런칭행사

•행사명 : 도시게릴라프로젝트 <모뉴먼트 @서울> 개막행사

•일정 : 2015.08.05.(수) 예정

•대상 : 일반시민

•장소 : 서울광장 일대

•내용 : 공공미술 모뉴먼트 프로젝트 개막식

- 시민참여

•내용 : 설치물 해체 후 소재를 재활용하여 시민에게 기념품 제공

○ 결과보고

- 프로젝트 기록영상 1식 제작

- 결과집(도록) 1식 제작

▢ 협력사항(서울시)

○ 문화정책과 : 공공미술프로젝트 추진관련 서울시 주무부서

- 서울시청사 모뉴먼트 프로젝트 추진 및 시설 사용의 건 협조 요청

○ 총무과 : 시청사 시설이용 허락 및 이용관련 제반사항 협력

- 서울도서관 외벽사용기간 : 2015.07.09.(목) ~ 09.06.(일) -60일간-

※설치를 위한 옥상사용허가/ 크레인사용허가/ 설치작업 등 협조 요청.

(* 작품 공모 후, 상세 설치방안과 관련하여 재 협조 의뢰 예정)

- 서울광장 사용(기념행사) : 2015.08.05.(수) -1일-

•외벽전시일정 : 2015.07.15.(수)~9.02.(수)까지 –50일간-

※설치기간:2015.07.09.(목)~07.14.(화) -6일간-

※해체기간:2015.09.03.(목)~09.06.(일) -4일간-

○ 복지정책과 : 광복70주년 관련 사업 추진 협조

○ 서울도서관 : 프로젝트 추진 시, 시설물 이용 및 진행 협조

▢ 추진일정

○ 서울시 청사 활용관련 협의 : 2015.04.

○ 공공미술프로젝트 자문위원회의 추진 : 2015.05.07

○ 모뉴먼트 프로젝트 참여 작가선정 공모 진행 : 2015.05.둘째주

○ 작품 기획 및 세부 사항 추진 : 2015.05.~07.

○ 공공미술 작품 설치․운영․해체 : 2015.07월 말 ~ 9월 초.

○ 영상제작 및 도록 발간 : 2015.09.

※참조 1. 모뉴먼트 프로젝트(2005~2010) 1부. 끝.

[참조 : 서울시청사 모뉴먼트 프로젝트(2005~2010)]

서울시 청사 모뉴먼트(monument) 2005~2010

▢ 사업개요

○ 사업명 : 서울시청사 모뉴먼트 프로젝트

○ 주요내용 : 서울시청사를 행정의 중심지에서 문화예술의 중심지로 광복을 기념하는 공공미술 모뉴먼트 프로젝트 추진

○ 연혁

- 2005년 : <태극기 휘날리며> 태극기 3,600개 설치

- 2006년 : <청사초롱> 청사초롱 13,000개를 설치하여 태극기 형상화

- 2007년 : <무궁화 꽃이 피었습니다> 무궁화조형물 30,000개 설치

- 2008년 : <내 마음의 태극기 담아> 태극기형상 조형물 설치

- 2009년 : 서울시청사 공사현장 가림막 3회 변경 설치

<대한민국을 사랑합니다>, <서울사랑>, <희망서울2010>

- 2010년 : 시청사공공미술 프로젝트 <손에 손 잡은 서울의 소통2010>

▢ 추진내용

○ 행정의 중심지에서 문화예술의 중심지로 - 광복절마다 옷을 갈아입는 ‘서울시청사’

2005년 서울은 ‘광복 60주년’이라는 역사적인 시기를 맞고 있었다. 이에 재단은 ‘서울시청사’라는 또 하나의 공공 공간을 주목하며 <근대건축물 활용 모뉴먼트 프로젝트>를 시작했다. 서울시청사 본관을 3천 6백 장의 소형 태극기와 1장의 대형 태극기로 감싸며 도심 속 미술관을 만든 것이다. 2005년 광복절을 앞두고 진행된 이 프로젝트는 가림막을 사용해 전시물 설치를 시민들이 알아차릴 수 없도록 비밀리에 진행되었다. 이에 출근길에 무심코 전시물을 발견한 시민들은 경탄을 금치 못했고, 매스컴의 폭발적인 관심을 얻으면서 이 프로젝트는 화려한 서막을 열었다.

그리고 이듬해 <근대건축물 활용 모뉴먼트 프로젝트>는 <광복절 모뉴먼트 프로젝트>로 이름을 바꾸고, 1만 3천 개의 청사초롱이 모여 하나의 거대한 태극기를 연출하는 작품으로 진화하며 서울 시민들에게 광복절을 함께 즐기고 축하하는 장을 제공하였다. 또한 2007년에는 ‘무궁화 꽃이 피었습니다’라는 제목으로 25cm 지름의 페트 소재 3만 4천여 송이의 무궁화로 대형 무궁화를 형상화했고, 2008년에는 ‘내 마음의 태극기 담아’를 제목으로 투명 페트 소재 2만 7천여 개의 반원구에 태극기 9천개를 삽입하여 4색으로 구성된 개체를 만들고 이를 조합하여 대형 태극기를 형상화하였다. 이때 네덜란드 헤이그에 있는 이준열사기념관에서는 일련번호 1번에서 6번까지의 작품을 보내오기도 했다.

2009년에는 <시청사 모뉴먼트 프로젝트>로 다시 한 번 개명하며 3차에 걸쳐 남극이야기, 서울이야기 등 서울광장 유관 기관 행사들과 연계하여 추진했으며, 특히 3차의 경우 2009 서울빛축제와 연계하여 LED영상을 전시하였다. 또 2010년에는 사업명을 <시청사 공공미술 프로젝트>로 변경하고, 공모당선작 ‘손에 손 잡은 서울의 소통 2010’을 통해 1천여 명의 시민 사진보드로 손에 손을 잡은 형상을 표현하는 설치 전시를 시도하였다.

2005년 광복절을 전후로 열흘간 진행되었던 전시는 매해 시민들의 요청에 의해 전시 기간을 연장하였고, 주요 매체에 100여 회 이상 기사화되며 숱한 화제를 낳았다. 그뿐만 아니라 전시 종료 후 설치작품으로 활용되었던 태극기와 청사초롱, 무궁화 등의 일부가 시민들에게 기념품으로 돌아갔으며, 공익모금사업을 위해 재활용되거나 천안 소년 교도소, 성동구 노인복지관, 무궁나라 등에서 재 설치되기도 했다.

▢ 관련사진

끝.