퇴계로(2단계) 보행친화공간 재편사업

설계경제성(VE) 검토

- VE이행회의 -

2019. 04. 03

서울특별시 / 도시교통실 보행정책과

■ 설계VE 제안 및 채택결과

○ 사업명 : 퇴계로(2단계) 보행친화공간 재편사업

	아이디어 발상 및 평가 분석

구 분	개략평가			아이디어 발상	상세평가
	대안 개발	설계보완 시공제안	기각		반 영		미반영	합계
					대안	보완
토목시공	6	8	0	14	6	8	0	14
조 경	6	13	0	19	6	13	0	19
전 기	1	7	1	9	1	7	1	9
통 신	0	7	1	8	0	7	1	8
합 계	13	35	2	50	13	35	2	50

1. 이행결과 – 대안개발 아이디어 (13건)

구분	대상시설	대안 내용	공사비 분석(백만원)					채택 여부
			원안		대안		증감액
토목시공-01	소음,진동 (깨기,절단)	깨기, 아스팔트절단, 보도블럭절단 등 소음/진동을 줄이는 공법을 적용하자	139.4		140.2		0.9	채택
토목시공-02	배수시설 빗물받이	빗물받이 내부 턱을 없애자(H=150mm)	-		1.0		1.0	채택
토목시공-03	가로수 보호대	가로수 보호대 기초공을 설치하자	190.5		204.2		13.7	채택
토목시공-04	배수시설	PE 이중벽관 접합 소켓을 원통형으로 변경하자	-		0.6		0.6	채택
토목시공-05	연속배수시설	연속배수시설을 변경하자	64.8		16.0		-48.8	채택
토목시공-06	금속재배수로	금속재배수로 설치를 축소하자	214.5		156.3		-58.2	채택
조경-01	자원재활용	기존 녹지대 관목 폐기 물량 중 활용성 판단하여 설계에 반영하자 (회양목 30% 재사용)	8.8		8.6		-0.3	채택
조경-03	뜨락 벤치A, 잡철물	유지관리 측면 고려하여 아연도 각관, 잡철물을 STS 재질로 변경 하자	37.7		41.4		3.7	채택
조경-04	지주목 보강	녹지공간의 협소화 및 태풍대비 하여 띠 녹지 부분은 가급적 와이어 당김줄로 변경하자	2.7		6.7		4.0	채택
조경-05	복합비료	복합비료를 토양 산성화를 예방하기 위한 차원에서 유기질 비료로 변경하자	12.3		4.3		-8.0	채택
조경-06	안전시설물	자전거이용자의 안전성 확보를 위하여 차도 경계부 안전시설을 도입하자	-		127.3		127.3	채택
조경-07	안내시스템	보도에 거리표시 시설물(바닥 설치)을 도입하자	-		3.9		3.9	채택
전기-01	가로등	가로등의 허용 전압강하 인입 및 간선을 조정하여 케이블 사이즈를 변경하자	49.5		26.2		-23.3	채택
대안개발 종합 결과							16.4	(증)

구분	대상시설	아이디어 내용	채택여부
토목시공-07	내역서	토목 조경 전기 등 전체 수량, 단가를 통일하자	채택
토목시공-08	포장중기 운반	포장중기 운반비(횟수)를 현실에 맞게 조정 하자	채택
토목시공-09	토 공	세륜시설 사용시간을 제외하자	채택
토목시공-10	공통	야간작업 할증을 변경 하자 (22시~06시 품의 할증 25%, 야간노임할증 50%)	채택
토목시공-11	토 목	시방서를 보완하자 - PVC이중벽관, 노면표시, 자전거 도로, 각종 자재(인조화강석, 화강석판 등), 디자인맨홀, 스틸그레이팅, 금속용 탐지 테이프 등 추가 - 시방서에서 현장 관련 사항만 정리하자 (산마루측구 등 제외)	채택
토목시공-12	배수시설	PE 이중벽관으로 도면을 수정하자	채택
토목시공-13	자전거도로	자전거 평탄성을 규정하자 (자전거 이용 활성화에 관한법률, 자전거이용 시설의 구조·시설 기준에 관한규칙)	채택
토목시공-14	토목	교통통제원, 안전도우미를 현실에 맞게 추가조정하자	채택
조경-02	지피 규격 조정	맥문동 규격을 7~10분얼에서 3~5분얼로 변경하자	채택
조경-08	수종변경	생태건강을 고려하여 삼색조팝을 일부 다른 수종으로 변경하자	채택
조경-09	수목규격조정	조팝나무 규격을 삼색조팝 규격으로 변경하자	채택
조경-10	지주목 상세도불일치	지주목규격 원주직재(말구 0.06x1.8) 인출선은 2.7미터로 상이함 (2.7로 조정)	채택
조경-11	설계서	잡철물 제작설치 철공 수량 재검토 (노무비 철공 과다) 서울형 품셈 적용	채택
조경-12	공사시방서 보완	조경 식재 공사 수종별 시방서 보강 및 시설물공사 공종별 시방기준 작성 누락됨	채택
조경-13	장비규격 조정	토목공사의 터파기 장비규격을 0.4㎥을 변경하자 (0.4㎥규격은 일본에서 가동)	채택
조경-14	안내시설물	광희동사거리 녹지대에 중앙아시아거리와 연계된 상징조형물을 검토하자	채택
조경-15	안내시설물	퇴계로의 지명에 부합되는 스토리텔링을 부여하자 (안내판, 공간안내판, 조형물)	채택
조경-16	안내시설물	보도에 스마트폰을 활용하여(앱설치) 주변환경에 대한 정보를 제공하자	채택
조경-17	녹지대 선형	광희동 사거리 녹지대 안전 및 유지관리 효율성을 위하여 가각부 처리는 곡선으로 변경하자	채택
조경-18	가로수보호판	수목의 생장을 위해서 가로수보호판을 서울시 디자인 모델 중에서 내경이 변화되는 형태로 변경하자	채택
조경-19	수종변경	광희동사거리 소나무 하부식재를 관목에서 지피 초화로 변경하자	채택
전기-02	가로등주	가로등주의 분체도장을 제외하자 (KCS 31 70 40:2016)은 용융아연도금만 요구하고 있음	채택
전기-03	분전반	E-013 분전반 Main CB 차단 용량 및 MC1A~MC3B를 적정용량으로 하자	채택
전기-05	가로등	가로등 설치 위치를 조정하자	채택
전기-06	전기 시방서	시방서의 관계법규 제 규정에 국가표준시방서(KCS) 및 서울시 전문시방서 (SMCS)를 추가 하자	채택
전기-07	등기구 시방서	등기구 시방서내용에 LED 기술 사항을 추가 하자	채택
전기-08	가로등 분전반	E-014 가로등 분전반을 서울시 표준 분전반으로 적용하자	채택
전기-09	분전반	분전반 한전 인입점에서 분전반까지 거리가 전체 100m로 되어 있음. 정확하게 표기하자	채택
통신-02	통신 시설물	통신 시설물을 보도 확장 방향으로 이전하자 - 대한극장 앞 서울시 공용 Wi-Fi - 대한극장 앞 서울시 따릉이 무선안테나	채택
통신-03	광통신 지중화공사	전선관 매입 심도(Cm)를 표기하자	채택
통신-04	광통신 지중화공사	경고테이프 설치방법을 표기하자	채택
통신-05	광통신 지중화공사	맨홀시공 상세도를 작성하자	채택
통신-06	루프공사	도면에 루프공사 시공방법을 표기하자 [설계예산서 일위대가 246호]	채택
통신-07	주정차설비	주정차설비를 도면에 반영하자 (일위대가표에는 반영되어있으나 도면에 미반영)	채택
통신-08	통신공사	CCTV UTP케이블의 규격을 표시하자(UTP, 4Pr ?)	채택

2. 이행결과 – 설계보완 아이디어 (35건)

3. 이행결과 – 미반영 아이디어 (2건)

구분	대상시설	아이디어 내용	채택여부
전기-04	가로등	기존 가로등 지주(STS)를 재활용하자	미반영
통신-01	띠녹지 설치	동대문 운동장~제일병원 구간 북측 오토바이 상점으로 부터 보행공간 확보를 위해 보도 중간에 띠녹지를 추가하자 (회양목 재활용)	미반영