계약금액조정 검토결과서

건 명	2020년 수유1동외 8개동 상수도공사			요청기관(부서)		북부수도사업소 (시설관리과)
접수일자	2021. 6. 7.		공사개요	- D=15~300㎜ L=910m
공사기간	2020. 5. 20. ~ 2021. 6. 30.			도 급 자		유등건설(주) 대표 이혜경
심사요청(천원)				심사결과(천원)
당 초	변 경	증 감		심사대상	검 토		증 감
599,794	638,000	증)38,206		증)38,206	증)38,074		감)132
구 분	내 용	검 토 결 과						비 고
변경사유	○ 설계변경 및 계약금액 조정시행(시설관리과-9823, 2021.6.4.) - 최근 3년 평균물량으로 설계되어 시공 중 물량 증감 사항 발생 - 보험료, 퇴직공제부금비 등 실비 정산
검토내용	○ 수량조정 - 파쇄물기계상차(집하장) : 166㎥ → 206㎥ - 잔토상차(집하장) : 709㎥ → 830㎥ - 주철(이형관)부설공 100㎜(인력) : 25m→15m - 주철(이형관)부설공 100㎜(기계) : 11m→21m - 교통정리원 야간 : 12인 → 11인							조 정 내역서 참 조
기타사항	○ 보험료, 퇴직공제부금비 등 정산이 필요한 항목은 자료를 제출받아 정산처리 하기 바람
검토의견	○ 상기 검토결과를 반영하여 계약변경 시행하기 바람