계약금액조정 검토결과서

건 명	2020년 성동구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사 (장기계속단가계약)			요청기관(부서)		동부수도사업소 (급수운영과)
접수일자	2021. 6. 15.		공사개요	- 밸브교체 및 신설 : 291개소 - 소화전보수 : 102개소 - 배수지 미세거름망 설치 : 14개소
공사기간	2020. 6. 3. ~ 2021. 6. 30.			도 급 자		구보공영㈜ 대표 유대동
심사요청(천원)				심사결과(천원)
당 초	변 경	증 감		심사대상	검 토		증 감
907,604	1,044,610	증)137,005		증)137,005	증)135,624		감 1,381
구 분	내 용	검 토 결 과						비 고
변경사유	○ 계약 금액 조정 검토 보고(급수운영과 - 12482, 2021.6.15.) - 현장여건 변화에 따른 물량변경 및 신규공종 반영 - 제경비 등 실제 정산에 의한 변경
검토내용	○ 수량조정 - 토공(파쇄물, 잔토 등) 실 수량 확인 및 조정 - 부대공(철거자재운반, 경광등 설치 및 철거, 조명시설 설치 및 철거 등) 실 수량 확인 및 조정 - 부대공(사인보드카) 공종 수정 : 사인보드카 이동시, 단위 hr →사인보드카 정차시, 단위 일							조 정 내역서 참 조
기타사항	○ 보험료, 퇴직공제부금비, 부지임대료 등 정산이 필요한 항목은 자료를 제출받아 정산처리 하기 바람
검토의견	○ 상기 검토결과를 반영하여 계약변경 시행하기 바람