계약금액조정 검토결과서

건 명	2020년 영등포구 관내 상수도공사 (장기계속단가계약)			요청기관(부서)		남부수도사업소 (시설관리과)
접수일자	2021. 6. 23.		공사개요	- 관 부설(D=15~300㎜) : 1,618m
공사기간	2020. 6. 15. ~ 2021. 6. 30.			도 급 자		세정건설 대표 최광호
심사요청(천원)				심사결과(천원)
당 초	변 경	증 감		심사대상	검 토		증 감
842,419	922,146	증)79,727		증)79,727	증)77,115		감 2,612
구 분	내 용	검 토 결 과						비 고
변경사유	○ 계약 금액 조정 검토 보고(급수운영과 - 11733, 2021.6.24.) - 현장여건 변화에 따른 물량변경 및 신규공종 반영 - 제경비 등 실제 정산에 의한 변경
검토내용	○ 수량조정 - 토공(파쇄물, 잔토, 환토 등) 실 수량 확인 및 조정 - 포장공(보조기층공, 인력비빔타설 등) 실 수량 확인 및 조정 - 부대공(철거자재운반, 작업차량비 등) 실 수량 확인 및 조정 - 사급자재(환토재 등) 실 수량 확인 및 조정							조 정 내역서 참 조
기타사항	○ 보험료, 퇴직공제부금비, 부지임대료 등 정산이 필요한 항목은 자료를 제출받아 정산처리 하기 바람
검토의견	○ 상기 검토결과를 반영하여 계약변경 시행하기 바람