계약금액조정 검토결과서

건 명	2021년 광진구 관내 상수도공사			요청기관(부서)		동부수도사업소 (급수운영과)
접수일자	2022. 5. 25.		공사개요	- 광진구 관내 상수도관 부설
공사기간	2021. 4. 13. ~ 2022. 6. 3.			도 급 자		㈜이안건설 대표 조종래
심사요청(천원)				심사결과(천원)
당 초	변 경	증 감		심사대상	검 토		증 감
925,879	1,255,752	증)329,872		증)329,872	증)318,920		감 10,952
구 분	내 용	검 토 결 과						비 고
변경사유	○ 계약 금액 조정 검토 보고(급수운영과-24534, 2022.5.23.) - 낙찰자 선정 지연에 따른 공사기간 - 현장여건 변동에 따른 물량변경 및 신규공종 반영
검토내용	○ 단가조정 - 신규 자재 단가‘상수도 품셈단가’ 적용 -‘보험료(건강·연금·노인장기요양)’실정산 금액 적용 -‘사급자재’합계 함수오류 수정 ○ 수량조정 - 토사(환토) 관련 공종 간 수량 확인 및 조정 - 파쇄물(아스팔트) 관련 공종 간 수량 확인 및 조정 - 일부 부설공, 구조물공 공종 사용자재 간 수량 확인 및 조정							조 정 내역서 참 조
기타사항	○ 향후 토사 및 폐기물 처리, 보험료, 퇴직공제부금비, 부지임대료, 고용개선지원비 등 정산이 필요한 항목은 자료를 제출받아 관련 규정에 맞게 처리 하기 바람
검토의견	○ 상기 검토결과를 반영하여 계약변경 시행하기 바람