『3·4·5·7호선 제작구매 신조전동차』

차상신호장치(ATC) 기능개선 방안 요약보고

〔2021.1.27.(수) 차량품질관리센터〕

□ 목  적

열차 운행 중 지상신호 무코드 시 열차 속도제한, 관제알림, 정보저장, 알람기능 등에 대한 차상신호장치(ATC)의 기능을 개선하여 전동차 안전운행을 확보하고자 함.

【관련근거: 상계역 추돌사고 관련 신호장치 개량 사장 구두지시(’20.6월) 및 안전조사처 대책 통보】

□ 차상신호장치 개선내용 (정지후진행 모드)

연번	개선내용		기 존	변 경	비 고
1	PCB 개선		∘아날로그 회로	∘디지털 회로	자동설정 예방
2	속도하향	제한속도	∘15㎞/h	∘10㎞/h	안전운행 향상
		정지속도	∘5㎞/h	∘3㎞/h, 1㎞/h
3	관제알림		∘없음	∘관제 전송	LTE-R 구축 시
4	경보기능 강화		∘ADU 비프음	∘방송장치 경보(추가)	방송장치 기능추가
5	정보저장		∘S＆P 모드	∘10㎞/h 스위치 신호 추가	동작상태 저장
6	조작신호		∘ADU 모드 터치	∘10㎞/h 스위치 누름유지	누름유지 운행

□ 개선시기 및 소요예산 --- 3호선 150칸 및 5‧7호선 336칸 (4호선 210칸 설계반영)

구 분	차량제작 시 반영 후 납품	납품완료 후 개조승인(’22년)
개선 내용	∘열차종합제어장치 기능 개선 ∘열차무선장치 기능 개선 ∘방송장치 기능 개선 ∘10km/h 스위치 설치	∘신호장치 소프트웨어 수정 (속도하향, 10㎞/h 스위치 기능구현)
소요예산	∘비 예산 (제작사 무상 지원 협의 완료)	∘ 약 1억원 (196칸, 336칸 각 0.5억원)

※ 개조승인 비용은 차량 제작비용과 별도로 ’22년도 예산반영 추진

□ 신호장치 개조승인 (현재 시점 형식변경 시 약 1년 소요, 신조전동차 납품지연)

○ 추진시기: 전동차 납품완료 후 차량제작사, 공사 합동 개조승인 추진

○ 대상차량: 3호선 150칸(15개 편성), 5․7호선 336칸(42개 편성)

작 성 자	차량품질관리센터장 : 정명묵 ☎ 6311-9617	P/L : 박달서 ☎ 9622	담당 : 윤병희 ☎ 9619