사고이월 자체심사 결과

(서울역사박물관)

□ 사고이월 요구

(단위 : 백만원)

구 분		최종예산	지출원인 행 위 액	지출액	사고이월액			집행율
					계	원인행위 필	미필
'16 이월액		138	138	13	125	125		10%
'17 이월	요 구	256	256	10	246	246		4%
	승인안
'16대비 증감		118	118	-3	121	121		△6%

□ 주요사업별 사고이월 내역	5건  246백만원

(2016년 1건  125백만원)

◦「박물관 유지․운영」의 ‘서울역사박물관 장애인용 승강기 설치’ 관련 공사 5건

- ‘서울역사박물관 장애인용 승강기 증축공사’ 182백만원

- ‘서울역사박물관 장애인용 승강기 증축 전기공사’ 6백만원

- ‘서울역사박물관 장애인용 승강기 증축 소방공사’ 3백만원

- ‘서울역사박물관 장애인용 승강기 구매 설치’ 50백만원

- ‘서울역사박물관 장애인용 승강기 통신공사’ 5백만원

□ '16년 대비 증․감사유

◦ '16 년에는 야쥬개홀(강당) 공사의 일부인 무대장치 구매 설치사업의 구매물품이
수입품으로 수송, 통관에 기간이 소요되어 사고이월

◦ ‘17년의 경우 ‘장애인용 승강기 설치’ 관련 증축 단계에서 발생한 추가시공으로
공사가 지연되어 증축공사 및 후속공사 모두 사고이월

- 증축 공사중 지반의 상태가 설계당시 예상한 것과 달리 지내력(지반의 힘)이
부족하여, 안정성 확보를 위해 지반 보강 공사 추가 시행

□ 심사결과 주요 조정내역

(단위 : 백만원)

사 업 명	요 구 액	조정사유
서울역사박물관 장애인용 승강기 설치	246	o 승강기는 작은 결함이 큰 사고로 이어질 수 있어 철저한 안전성 확보가 증요 o 관람객의 안전을 위한 불가피한 사고이월이므로 조정 없음

□ 사고이월 감소를 위한 개선대책

◦ 사업계획 수립단계부터 충분한 검토를 통해 사업추진의 사전절차 및
문제점 등을 사전에 면밀히 파악하여 사고이월을 미연에 방지

붙 임   1. 사고이월 요구서(엑셀서식) 1 부

2. 사고이월 사업별 명세서    1 부.  끝.