신조전동차 제작공정 확인 점검 계획(안)

신조전동차 제작 현황 및 품질관리 상태 확인‧점검을 위해 제작사(다원시스 김천‧정읍공장, 우진산전 증평공장) 방문, 국내출장 계획을 보고함.

[관련근거] 차량품질관리센터-1743(본부장-153/2020.11.23.)『신조전동차 제작공정 확인 점검 계획(안)』

▢ 출장개요

○ 목  적

- 신조전동차 제작현황, 품질관리 상태(부적합 사항 등) 확인 및 점검

- 차량제작사, 공사 공정관리자 직원 근무‧생활환경 확인 및 격려

○ 기  간: 2021. 12. 6. ~ 12. 15. (기간 중 5일)

○ 출장자 및 일정

연번	성명	직 위 (직급)	출 장 지	출 장 일	비 고
1	정명묵	센터장 (2급)	다원시스 김천공장	’21.12.07. ~ 12.08.	1박2일
			우진산전 증평공장	’21.12.14. ~ 12.15.	1박2일
2	박달서	팀장 (2급)	우진산전 증평공장	’20.12.14. ~ 12.15.	1박2일
3	최병훈	팀장 (3급)	다원시스 김천‧정읍공장	’20.12.06. ~ 12.08.	2박3일

▢ 공정 진행현황

구 분	계획	실적	차이	비고
4호선 210칸	17.54	14.86	2.68	’21.11.29 기준
5‧7호선 336칸	83.90	74.85	9.05	’21.11.24 기준

▢ 출장내용

○ 제작지연, 주요부품 반입‧관리현황 및 공정만회대책 점검(개선점 도출)

○ 제작감독 부적합사항 도출현황 및 이행실태(대책 등 협의) 점검

○ 부품공급사 관리현황 확인(용접사 등 자격 및 경력 관리 현황)

○ 공사 공정관리자 및 제작사 청렴이행 실태 점검 및 간담회 시행

○ 공사 공정관리자 근무 및 생활환경 확인‧점검 및 고충취합

○ 5,7호선 336칸 대비 철도공사 490칸 제작공정 분배상태 점검

○ 4호선 210칸 정하중차량 시험입회 및 품질상태 점검

▢ 소요비용

○ 합    계: 금829,300원(금팔십이만구천삼백원)

구분	합계	일비	식비	숙박비	교통비	비고
합계	829,300	180,000	180,000	250,000	219,300	-
정명묵	167,000	40,000	40,000	50,000	70,200	210칸
	200,200	40,000	40,000	50,000	37,000	336칸
박달서	130,000	40,000	40,000	50,000	-	336칸
최병훈	332,100	60,000	60,000	100,000	112,100	210칸

※ 상세내역: 붙임 ‘출장여비 산출내역 및 지급결의서’ 참조

○ 예산과목

- 자본적 지출, 유형자산(전동차량), 자산취득비등(210칸)/차량계획처

- 자본적 지출, 유형자산(전동차량), 자산취득비등(336칸)/차량계획처

▢ 기타사항

○ 근태처리: 국내출장

○ 코로나19 예방을 위한 방역지침 준수 철저(업무 복귀전 선별검사 시행)

○ 행정처리(출장 결과보고): 공정관리자 출장결과 보고 시 통합 보고

붙임  출장여비 산출내역 및 지급결의서 1부.  끝.