2018년도 「지역영상미디어센터」 건립계획(안)

2017. 4.

서울특별시

서울시네마테크 영상미디어센터 건립계획(안)

1. 추진배경

□ 필요성

ㅇ 대기업의 스크린 독점(서울 96%)으로 비상업적 영화의 상영공간이 부족, 고전·독립·예술 영화 등 다양성 영화에 대한 안정적 상영 공간 필요

ㅇ 영화는 시민 삶의 질 향상에 크게 기여하는 문화적 공공재로서, 시민의 안정적인 영상문화 향유를 위해 공공영역의 지원 필요

□ 기대효과

ㅇ 고전·독립·예술 영화 등 다양성 영화의 보존·발굴·상영 등을 체계적으로 지원함으로써 영상산업의 지속적 발전에 기여

ㅇ 다양성 영화의 관람기회 제공 및 영화·영상 관련 기법, 역사, 문화에 대한 교육등을 통해 지역민의 문화 향유권 제공 및 교육기회 확대

2. 사업개요

□ 건립개요

ㅇ 명칭 : 서울시네마테크 영상미디어센터

ㅇ 위치 : 서울시 중구 초동 64-11(초동 공영주차장)

ㅇ 규모 : 420㎡(약127평)

※ 지하 3층, 지상 10층 연면적 5,460㎡의 시네마테크 내 1개 층

ㅇ 기간 : 2017.5 ~ 2019.12

ㅇ 건립방식 : 신규건립

ㅇ 운영기관 : 민간위탁 추진(예정)

ㅇ 소요예산 : 지특 1,080백만원

(단위 : 백만원)

회계	총사업비	국 비	지방비
			도 비	시 비
지역발전특별회계 (생활기반계정-지방문화산업기반 조성)	2,160	1,080	1,080

	<서울 시네마테크 건립>
￭ 사업규모 : 토지 804.1㎡, 지하3층 지상 10층 연면적 5,460㎡ 규모 ￭ 총사업비 : 22,464백만원 ※ 토지 : 중구 무상 제공 ￭ 추진경과 - ‘15. 3월 : 시네마테크 건립 부지 및 건립안 발표 - ‘15.11월 : 서울시 투자심사 통과 - ‘16.11월 : 행자부 중앙투자심사 조건부 적정 □조건 : ①시네마테크 영상미디어센터는 국비지원을 받아 사업 추진 ②구체적인 동시설 활성화 방안 마련 - ‘16. 4월 : 부지 권리관계 설정을 위한 중구 협약 체결 ￭ 주요기능 : 상영관(3개), 영상교육 강좌 운영 및 장비 대여를 하는 영상미디어 센터, 영상자료 보관실, 전시실 등

3. 주요시설 및 기능

□ 건립위치

ㅇ 서울시 중구 초동 64-11

<위치도>

<현황사진>

□ 주요기능

주요시설	면적	기능 및 용도	비고
소계	5,460㎡
아카이브	420㎡	자료 보관 및 열람
영상미디어센터	420㎡	편집실, 녹음실, 기자재실
교육장	420㎡	강의실, 세미나실
상영관 Ⅲ	840㎡	상영관 50석, 전시실
상영관 Ⅱ	840㎡	상영관 200석, 휴게공간
상영관 Ⅰ	840㎡	상영관 250석, 매표소
임대공간	840㎡	카페, 기념품숍, 식당가 등
사무실	420㎡	운영 사무실, 회의실
주차장	420㎡	주차장 및 기계·전시실

ㅇ 주요시설 및 사용용도

4. 추진일정

일 정	추 진 내 용	비 고
‘17.5월~7월	기본 및 실시설계 공모
‘17.7월~‘18.3월	기본 및 실시설계
‘18.3월~‘19.12월	공사 발주 및 공사

5. 예산계획

(단위 ; 천원)

항 목	소 요 내 역	금 액	비 고
공사비	2,755천원/㎡×420㎡(‘15년 문예회관 단가)	1,160,000	‘18년
시설부대비	장비구입비 1식	1,000,000	‘19년
합 계		2,160,000