□ 채택 제안 목록 : 40건

(단위 : 백만원)

공종	제안번호	제 안 명	공사비 절감액
토목	1	(공통)복공설치구간이 관로전체구간(원형관, PC BOX, RC BOX)에 적용되어 있는데, 교통영향을 고려하여 적절한 복공판 설치로 변경하자	3,845.92
	2	(유역분리터널)복공설치구간에 대하여 수량산출서에서 Side Pile 상부여유고 0.5m 산정을 삭제하자	38.23
	3	(유역분리터널)전구간 비배수를 산악지는 배수로 변경하자	319.17
	4	(유역분리터널)유입부 BOX 부설시 지하수 침투를 차단하기위해 가시설 폭 전체에 버림CON'C 타설을 반영하자	-0.34
	5	(유역분리터널)Fore Poling 규격을 변경하자(L=3.0m, 매막장 설치(1m마다) → L=4.0m, 두막장 설치)	35.38
	6	(유역분리터널)개착가시설 Side Pile, Wale 연암구간 버팀보 Strut를 록볼트로 변경하자	7.22
	7	(유역분리터널)기존 지장물(하수관)에 Support를 설치하여 누수를 방지하자	-
	8	(유역경계조정)역지변(배수능력 검토 후) 개소수를 축소하자	10.38
	9	(유역경계조정)가시설 적용구간 중 Open Cut 적용이 가능한 구간을 확인하여 반영하자	6.80
	10	(공통)관매달기 및 지장물 보호공 도면을 보완하고 현장여건에 맞게 지장물 보호공을 수정하거나 버팀대 활용 가능시 활용하여 지장물 보호공 수량을 절감하자	-
	11	(유역분리터널)개착가시설 Side Pile, Wale 허용응력이 과다하므로 강재규격을 최적화하자	101.79
	12	(유역분리터널)종점부 수직구 가시설 형식을 변경하자(CIP 적용 → H-Pile+토류판)	71.25
	13	(유역분리터널)종점부 개착 가시설 연암부 E/Anchor 자유장 길이를 최적화하자	0.94
	14	(유역분리터널)개착관로 가시설 Strut Jack를 삭제하자	22.29
	15	(유역경계조정)흙막이 가시설 설치구간(H=4.0m 이상, H-pile + 토류판) 중 지장물 영향이 없는 구간은 조절식 간이 흙막이를 적용하자	729.67

(단위 : 백만원)

공종	제안번호	제 안 명	공사비 절감액
토목	16	(유역분리터널)유역분리터널 종점부 개착BOX 가시설과 비개착 추진공법 가시설이 중복되어 있으므로 보완하자	40.62
	17	(유역분리터널)유출부 개착 BOX 중 가시설 배치(전개도)(B1-015~016)에서 띠장 및 스트러트가 원지반 상부로 돌출되어 배치된 구간이 있으므로 원지반 내부로 재배치하자	-
	18	(유역분리터널)EXP.Joint 부분은 기둥 2개를 설치하자	1.90
	19	(유역분리터널)시, 종점부 TBM 장비 반출 크레인 200T을 50T로 변경하자	54.07
	20	(공통)현재 표준품셈에 의거 산출된 공종별 단가를 표준시장단가로 재산출하자	925.22
	21	(유역분리터널)단가 산출시 적용된 야간할증을 공종별로 재검토하여 주간에 작업 가능한 공종은 재산출하자	426.35
	22	(유역경계조정)조립식 PC BOX(1.0X1.0, L=338m) 관급자재 적용단가를 조달단가로 변경하자 (665,000원/m → 382,500원/m)	95.84
	23	(유역분리터널)시, 종점부 수직구+Pilot T/N 공기 7.7개월을 5개월로 변경하자	-
	24	(유역분리터널)그라우팅 시공후 터파기를 실시하므로 터파기 용수를 터파기 육상으로 변경하자	16.13
	25	(유역분리터널)철근가공 계획을 변경하자 (현장가공 → 공장가공)	370.48
	26	(유역분리터널)TBM 및 NATM 터널 라이닝의 주철근 및 배력철근량을 최적화하자	81.30
	27	(유역분리터널)유입/유출부 BOX와 터널 연결부분 연결상세에 필요한 일반도, 배근도를 보완하자	해당없음
	28	(유역분리터널)가시설 수량산출 H-PILE의 support와 띠장 규격을 300*300으로 통일시키자	해당없음
	29	(유역분리터널)PC-BOX 부설, 현장타설(BOX), 가시설, 그라우팅 공정의 시방서를 추가하자	해당없음
	30	(유역분리터널)신설 BOX 유입부와 기존 BOX 연결부분 바닥슬래브 경사로를 반영하자(침전물 방지)	해당없음

(단위 : 백만원)

공종	제안번호	제 안 명	공사비 절감액
토목	31	(유역분리터널)상부, 벽체 바닥슬래브 신, 구 CON'C 연결 철근 상세도를 추가하자(겹이음 길이 확보를 위한 구 CON'C 치핑 필요)	해당없음
	32	(유역경계조정)신설BOX와 구 CON'C 연결 상세도면을 추가하자(바닥, 벽체, 상부 슬래브, 구CON'C 철근 노출하여 겹이음 길이 확보 및 보강근 계획 수립)	해당없음
	33	(유역경계조정)PC BOX 설치구간 가시설도를 보완하자(평면도, 종단면도, 구간별 단면도)	해당없음
	34	(유역분리터널)최종 굴착면이하에 적용된 차수그라우팅은 보일링 검토 후 적용범위를 결정하자	해당없음
	35	(유역경계조정)PC BOX 설치구간에 대한 구조물 및 가시설에 대한 구조계산서를 추가하자	해당없음
	36	(유역분리터널)현장타설 콘크리트 암거에 대한 암거 표준도를 추가하자	해당없음
	37	(유역분리터널)유출부 개착 BOX 중 흙막이 계획평면도(B1-013)의 Side Pile의 평면배치와 구조계산서의 해석결과를 통일시키자	해당없음
	38	(유역분리터널)NATM 라이닝 아치부 배력철근 사용철근량(12.67cm2/m)이 소요철근량(15.0cm2/m) 보다 부족하므로 보완하자	해당없음
	39	(유역분리터널)TBM 작업부 P1~3 작업원을 10명에서 8명으로 변경하자	해당없음
	40	(유역분리터널)유입BOX 가시설도면의 Side Pile의 제원이 H-300X200(평면도, C-029 ~C-032), H-300x300(단면도, C-035)로 혼용되어 있으므로 통일하여 적용하자	해당없음

□ 미채택 제안 목록 : 3건

공종	제안번호	제 안 명	미채택 사유
토목	1	(유역경계조정)관주변 모래기초를 양질토사로 변경하자	모래기초가 관보호에 적정한 것으로 발주처 시공기준에 포함
	2	(유역분리터널)TBM 작업부 P4~5 특별인부 2명을 1명으로 변경하자	특별인부 2인은 표준품셈 “터널 전단면 뚫기”의 인력편성편을 적용한 것으로 2인이 최소 필요으로 판단되어 원안 적용
	3	(유역분리터널)시점부 NATM 42m를 최소화하자	TBM 최초굴진시 필요한 장비길이는 70m이며, 수직구(L=30m) 및 NATM(L=42m) 길이는 72m로 장비길이와 여유폭을 고려하여 원안(NATM L=42m)을 적용함