[붙임1]

『2,3호선 신조전동차 196칸 구매관련』

2호선 T1 개조 22칸 제작 진행사항 등 점검계획(안)

2호선 T1 개조 22칸 초도편성 완성차 상태 및 제작 진행사항 확인을 위한 제작사 방문계획을 보고드림.

※ 조달청 계약번호 제00183146100(’18.10.23.) “전동차 2, 3호선(196량) 구매”

Ⅰ		현 황

□ 2호선 T1 개조차량 제작 초도편성 개조 진행 현황

상태점검

∘ 일    시: 2021.4.21.(수) ~ 22.(목)

∘ 목    적: 2호선 22칸 이설품(48종) 상태점검

차량반출

∘ 일    시: 2021.5.3.(월) 영업종료 후

∘ 반출경로: 신정기지 ⇨ 군자기지 ⇨ 지하 서울역 ⇨ 노령역 ⇨ 정읍공장

세부공정 및 소요시간

∘ 차체검사: 구체반입 지연 및 교정작업으로 인한 공정 지연

(6/18 ~ 7/22, 34일 소요)

∘ 도장, 선행, 의장, 최종검사 총 46일 소요(7/22 ~ 9/9)

∘ 차량편성: 9/10 김천공장 출고, 9/11 정읍공장 도착 후 완성차 조성

개조형식승인

진행 현황

구분	개조적합성	개조합치성	부품 형식시험	구성품 형식시험	완성차시험	본선시운전
합계	차량한계 등 70항목	현가장치 등 19항목	내장판 화재시험 등 7항목	구조체 하중시험 등 5항목	내전압 시험 등 12항목	역행시험 등 7항목
완료	41	13	4	2	-	-
진행	29	6	3	3	12	7

※ 완성차시험 착수 예정일: ’21.10.1.(금)

향후 계획

∘ 예비주행: ’21.10.12. ~ 10.14. (1,000km)

∘ 출고검사: ’21.10.15.(금)

∘ 차량출고: ’21.10.18.(월), 정읍공장 ⇨ 신정차량기지

Ⅱ		출장개요

□ 출 장 지: ㈜다원시스 정읍공장(전북 정읍시 소재), HJT(경북 영천시 소재)

□ 출장직원 및 기간

연번	소 속	직급	직위	사 번	성 명	기 간	비 고
1	차량품질관리센터	2급	센터장	21703103	정명묵	’21.9.28. ~ 9.29.	1박 2일
2		3급	팀 장	21704949	최병훈
3		7급	주 임	21800799	황준식

□ 소요비용: 금639,900원(금육십삼만구천구백원)

※ 세부내역 붙임 ’출장여비 산출내역 및 지급결의서‘ 참조

□ 예산과목: 자본적지출, 유형자산(전동차량), 자산취득비등(196칸)/차량계획처

□ 점검내용

○ 2호선 T1 22칸 대표편성(230) 완성차 시험 입회 및 상태점검

- 이설장치(냉방기, 출입문 등) 기능 및 동작상태 확인

- 문제점 및 조치내역 총 8건(도아레일 탭시트 누락 등) 확인(List 별첨)

- 개조 형식시험 및 공정 진행사항 확인

- 개조차량 외관상태 기존 8량과 비교 및 검토

- 초도편성 출고검사 및 반입 준비상태 확인

※ 대차프레임 부품공급자(HJT) 보완조치사항 점검

- 대차 제작공장 확장 및 작업장 환경개선 진행사항 확인

- 대차 Sub 취부 지그의 상/하 방향 고정을 위한 조치사항 확인

- 대차 Bogie Frame 용접포지셔너 재설계 및 보강사항 확인

- 용접 품질 확보를 위한 검사자 채용 추진 확인(2명 충원)

- 용접 가스 및 분진 배출을 위한 동력 환풍기 공사 현황 확인

Ⅲ		세부일정

날 짜	시 간	장소 및 내용	비 고
9/28 (화)	08:00 ~ 10:00	○ 용산역 ⇨ 정읍역 이동	KTX
	10:00 ~ 11:00	○ 정읍역 ⇨ 정읍공장 이동	업무용 차량
	11:00 ~ 18:00	○ 초도편성 상태 및 공정 진행사항 점검
	18:00 ~	○ 정읍공장 ⇨ 숙소 이동	업무용 차량
9/29 (수)	08:00 ~ 09:00	○ 숙소 ⇨ 정읍공장 이동	업무용 차량
	09:00 ~ 11:00	○ 완성차시험, 반입 등 향후 일정 확인
	11:00 ~ 14:00	○ 정읍공장 ⇨ 영천공장 이동 및 중식	업무용 차량
	14:00 ~ 15:00	○ 영천공장 보완조치사항 점검
	15:00 ~ 16:00	○ 영천공장 ⇨ 동대구역 이동	업무용 차량
	16:00 ~ 18:00	○ 동대구역 ⇨ 서울역 이동	KTX

붙임  1. 출장여비 산출내역 및 지급결의서 1부.

2. 2호선 T1 22칸 대표편성(230) 문제점 및 조치내역 1부.  끝.