2019년 주요 업무계획

2019. 1.

서울특별시

강서수도사업소

목    차

Ⅰ.	일 반 현 황	/ 1
Ⅱ.	정 책 방 향	/ 2
Ⅲ.	2019 성과목표	/ 3
Ⅳ.	2019 주요사업	/ 4
Ⅴ.	현 안 업 무	/21

Ⅰ. 일 반 현 황

	지 역 특 성
◈ 목동 ․ 등촌 ․ 가양 APT 지역 급수 안정 지역 ◈ 발산 ․ 마곡 ․ 공항 ․ 방화 지역 급수수요 증가 ◈ 화곡 ․ 고척 ․ 오류 주택 지역 가압 급수지역

□ 조직 및 인력

○ 조 직 : 5과 8팀

○ 인 력 : 정원 143(현원 131)

구 분	계	일반직	관리운영직	연구직	전문경력관	임기제
정 원	143	109	33	-	-	1
현 원	131	100	20	-	-	11
과부족	△12	△9	△13	-	-	10

□ 급수 현황

○ 관할구역 : 3개구 53개동(양천구 18, 강서구 20, 구로구 15)

○ 급수인구 : 593천세대 / 1,493천명

○ 공 급 량 : 일평균 414천㎥ (영등포 350, 암사 64)

□ 급수 시설

배관연장(㎞)	배수지	가압장	증압장	밸브	급수전
1,541	8	5	9	32,248	332,794

□ 예산 현황                                 (단위 : 백만원)

세 입			세 출
계	사용료 수익	급수공사수익 등	계	투자사업비	경상사업비	행정운영비
90,839	75,568	15,271	7,518	413	6,131	974

Ⅱ. 정 책 방 향

시민이 즐겨 마시는 건강하고
맛있는 물, 세계 속의 아리수

안심하고 마실 수 있 는 공급환경 조성		시민공감 형성을 통 한 아리수 신뢰향상		경영 효율화를 통 한 경쟁력 강화
◈ 상수도 노후관 정비 ◈ 상수도 시설물 유지관리 ◈ 주택내 노후급수관 지원 ◈ 고층아파트 직결급수 추진 ◈ 배수관 소블록 물세척 추진 ◈ 마곡구역 상수도 급수 추진 ◈ 공급계통 수질관리 철저		◈ 아리수 품질확인제 추진 ◈ 아리수 토탈서비스 추진 ◈ 음용율 향상 홍보 추진 ◈ 학교 음용환경 개선		◈ 유수율 향상 추진 ◈ 세입징수율 향상 추진

Ⅲ. 성 과 목 표

분야	지 표 명	단위	2018년		2019년
			목표	실적	목표	실적
공급 환경 조성	상수도 노후관 정비	㎞	11.4	11.5	7.1
	불용관 정비	건	269	390	217
	기존관 철거	㎞	4.3	4.3	4.9
	고장 및 노후밸브 정비	건
	기전설비 유지관리	대
	배수관 소블록 물세척 추진	개소	60	60	66
	옥내 노후 급수관 교체 추진	가구
	고층아파트 직결급수 추진	단지	23	27	23
아리수 신뢰 향상	아리수 품질확인제 추진	가구
	아리수 토탈서비스 만족도	%
	학교 음용환경 개선	개소
	만기 수도계량기 교체	건
경영 합리화	유수율 향상 추진 (‘17.10월)	%
	수도요금 징수율 향상(‘17.10월)	%

Ⅳ. 2019년 주요사업

1	안심하고 마실 수 있는 공급환경 조성		/ 5
	1-1.	상수도 노후관 정비	/ 6
	1-2.	상수도 시설물 유지관리	/ 7
	1-3.	주택내 노후급수관 지원	/ 8
	1-4.	고층아파트 직결급수 추진	/ 9
	1-5.	배수관 소블록 물세척 추진	/10
	1-6.	마곡구역 도시개발사업 상수도 급수 추진	/11
	1-7.	공급계통 수질관리 철저	/12
2	시민공감 형성을 통한 아리수 신뢰 향상		/13
	2-1.	아리수 품질확인제 추진	14
	2-2.	시민불편 선제적 대응 “아리수토탈 서비스”	15
	2-3.	음용률 향상을 위한 다양한 홍보 추진	16
	2-4.	학교 음용환경 개선	17
3	경영 효율화를 통한 경쟁력 강화		/18
	3-1.	유수율 향상 추진	19
	3-2.	세입징수율 향상 추진	20

1. 안심하고 마실 수

있는

공급환경 조성

1-1.	상수도 노후관 정비		/ 6
1-2.	상수도 시설물 유지관리		/ 7
1-3.	주택내 노후급수관 지원		/ 8
1-4.	고층아파트 직결급수 추진		/ 9
1-5.	배수관 소블록 물세척 추진	/10
1-6.	마곡구역 도시개발사업 상수도 급수 추진	/11
1-7.	공급계통 수질관리 철저	/12

1-1		상수도 노후관 정비

수돗물 공급과정에서 누수 및 적수 발생이 예상되는 노후관의 철저한 관리와 체계적인 정비로 시민고객에게 안전하고 깨끗한 아리수 공급

□ 사업개요

○ 기    간 : ’84년 ~ ’19년 (총사업비 5,203억원)

○ 대    상 : 1,541㎞(재개발․재건축 7㎞ 포함)

- 정비실적(1984~’18년) : 2,108㎞ / 4,477억원

○ 연차별 정비 계획 (59.49㎞/ 903억원)               (단위 : ㎞)

구 분	정비대상	교체실적 (’18이전)	정비계획			비고
			소계	’19	’20~
계	334.70	307.63	12.8	7.1	5.7
송배수관 정비	268.00	249.83	1.9	0.4	1.5
배급수관 정비	66.70	57.8	10.7	6.7	4.2

‣ ‘18년 추진실적 : 8건(달성율 100%)/ 11.43㎞/ 8,565백만원

□ 2019년 추진계획

○ 정비목표 : 5건(연간단가 1) / 7.05㎞ / 6,800백만원

구 분	공사명	구경(㎜)	연장(㎞)	사업비(백만원)	사업기간
송 배수관	가리봉동121~127번지간 송배수관정비공사	500	0.35	600	’19.3~11
배 급수관	신월6동 558번지외 7개소 배급수관 정비공사	150~300	1.5	1,400	’19.3~11
	고척1동 51번지외 7개소배급수관 정비공사	100~300	1.6	1,400	’19.3~11
	개봉1동 323번지외 7개소배급수관 정비공사	100~300	1.7	1,600	’19.3~11
	오류1동 35번지외 6개소배급수관 정비공사	150~300	1.5	1.400	’19.3~11
	2019년 상수도공사(년간단가)	100~300	0.4	400	’19.3~12

○ 추진사업 일정

조사․설계	⇒	설계심사	⇒	계약심사	⇒	공사발주	⇒	계약및착공	⇒	준 공
(’19.01)		(’19.01)		(’19.03)		(’19.03)		(’19.03)		(’19.11)

작 성 자	급수운영과장:김정수☎3146-3940 급수설비팀장:김남구☎3146-3941 담당:최선보☎3146-3943

1-4		고층아파트 직결급수 추진

저층 아파트 또는 단독주택 위주로 추진해온 직결급수 추진 사업을

고층 아파트로 확대 시행하여 깨끗한 아리수를 수도꼭지 까지 공급

□ 사업개요

○ 추진 목표 : 23개 단지 (비예산사업)

○ 직결급수 대상 고층아파트 : 284단지

구 분	계	양천구	구로구	강서구
단지수	284	115	50	119

‣ ’18년 추진실적 : 27개  단지(117%, 조건부여 9개 포함) : 양천3, 구로9, 강서15

□ 추진방향

○ 저수조 급식방식에서 가압직결급수 방식으로 개선

□ 2019년 추진계획

○ 대상아파트에 대하여 직결급수 홍보문 발송 및 안내

- 홍보문 배포(우편발송) 후 지역담당자별로 안내 및 이해 설득

○ 옥내급수관 교체 완료 및 예정 아파트를 대상으로 우선 실시

- 완료아파트는 지역담당자별로 직접 방문 홍보 및 독려

- 예정아파트는 공사비 지원 승인통보 시 직결급수 조건 부여

○ 신축아파트는 건축협의 시 직결급수 조건을 부여

□ 기대효과

○ 물탱크 관리소홀로 발생될 수 있는 수질오염 원인 제거

○ 고도정수 처리된 깨끗한 아리수의 직접 공급으로 음용률 향상

자	급수운영과장 :김정수 ☎3146-3940, 담당 : 이용호 ☎3146-3949

1-5		배수관 소블록 물세척 추진

수돗물 공급과정에서 자연 발생되는 수도관 내부 슬라임(slime)을 블록단위 퇴수시설을 이용한 물세척(flushing) 시행으로 수질개선

※ 슬라임(slime) : 수돗물에 함유되어 있는 각종 점액상 물질

□ 사업개요

○ 대   상 : 배수관 D=80~350㎜, 277개 전체 소블록

- 2015년부터 5년주기 세척 시행

○ 기   간 : '12년부터 기간제 채용하여 시행

구 분	계	기투자(’12~’18)	2019	비고
소블록(개)	277	211	66
소요예산(백만원)	796	616	180

‣ ‘18년 추진실적 : 60개소 (달성율 100%)

□ 2019년 추진계획

○ 목 표 : 66개 소블록(사업비 180백만원)

- 소블록 물세척 : 33개 소블록

- 공기주입 관세척 : 10개 소블록

- 관로 미부설로 제외 : 23개 소블록

○ 대 상 : ’95년도 이전 부설한 관로가 많은 소블록

○ 배수관 소블럭 물세척 전담팀 구성 운영

- 구성인원 : 5명(기간제 근로자 5명 채용)

○ 공사 전․후 조치사항

- 사전 현황조사 후 물세척에 따른 단수 홍보 및 수요가 계량기 분리

- 밸브조절하여 물세척 시행 및 수질검사 실시 후 통수

작 성 자	급수운영과장:김정수☎3146-3940 급수설비팀장:김남구☎3146-3941 담당:이 슬 ☎3146-3943