2021년 다목적체육센터 건립 지원 계획

자치구 다목적체육센터 투자수요에 따라 2021년도 다목적체육센터 건립 지원계획을 수립하여 생활체육시설 확충사업에 만전을 기하고자 함.

1		추진근거 및 경과

□ 추진근거

○「체육시설 설치‧이용에 관한 법률」 제6조(생활체육시설)

○「서울특별시 지방보조금 관리 조례 시행규칙」제2조 별표 1(70호)

○ 2023 생활체육시설 확충계획(행정1부시장 방침 제167호, 2019. 6. 25.)

□ 추진경과

○ 2023 생활체육시설 확충계획 수립	: ’19. 6. 25.
○ 자치구 시비지원기준 개선계획 수립	: ’19. 9. 2.
○ 자치구 다목적체육센터 투자수요 조사	: ’19. 10. ~ 11.
○ 자치구 다목적체육센터 투자계획(2020~2023) 수립	: ’20. 1. 2.
○ 2020년 다목적체육센터 건립 지원 － 4개 자치구, 4개 센터(도봉, 서대문, 강북, 금천)	: ’20. 5. 7.

※ 자치구 다목적체육센터 건립지원 추진 절차

해당 자치구 예산교부 신청	□	사업계획서 검토 및 예산 교부	□	차년도 지원사업 예산 등 의견수렴	□		차년도 지원사업 예산 협의	□		차년도 지원사업 계획 수립
( 구 → 시 )		( 시 → 구 )		( 시 ↔ 구 )		(체육진흥과, 예산담당관)				( 체육진흥과 )

2		지원계획

□ 지원대상 : 8개 자치구 9개 시설(계속 2, 신규 7)

(단위 : 백만원)
연번	구분	자치구	사업명	사업기간	총사업비	비고
1	2체육센터	도봉구	도봉동 다목적체육센터	2016. 9. ~ 2021. 7.	23,649	계속 (균특)
2	3체육센터	강북구	구립 종합체육센터	2019. 7. ~ 2022. 9.	23,800	계속 (균특)
3		성동구	뚝섬유수지 복합문화체육센터	2019. 1. ~ 2022. 2.	29,700	신규 (기금)
4		도봉구	쌍문동 구민체육센터	2018. 9. ~ 2022. 11.	21,780	신규 (기금)
5		노원구	공릉동 구민체육센터	2019. 9. ~ 2022. 11.	9,601	신규 (기금)
6		영등포구	대림3유수지체육시설	2019. 9. ~ 2024. 8.	22,958	신규 (기금)
7		서초구	반포종합운동장 종합체육시설	2020. 4. ~ 2022. 12.	23,412	신규 (기금)
8	4체육센터	성북구	월곡복합문화체육시설	2018. 3. ~ 2023. 10.	43,383	신규 (균특)
9		구로구	신도림차고지 이전부지 체육시설	2019. 9. ~ 2022. 12.	12,210	신규 (기금)

□ 지원예산 : 17,519백만원(국비 4,647, 시비 12,872)

(단위 : 백만원)
구분	계	계속사업		신규사업
		도봉 (2센터)	강북 (3센터)	성동 (3센터)	도봉 (3센터)	노원 (3센터)	영등포 (3센터)	서초 (3센터)	성북 (4센터)	구로 (4센터)
계	17,519	1,089	3,294	3,100	2,387	1,798	1,117	819	1,878	2,037
국비	4,647	1,089	1,984	-	-	-	-	-	1,574	-
시비	12,872	-	1,310	3,100	2,387	1,798	1,117	819	304	2,037

○ 예산과목 : 시민생활체육 진흥, 생활체육 활성화, 지역격차 해소를 위한 균형발전 추진, 자치단체자본보조

3		행정사항 및 향후 계획

□ 행정사항

○ 서울특별시(체육진흥과)

－ 자치구 다목적체육센터 지원사업 예산 교부 안내 및 추진현황 점검

○ 해당 자치구

－ 사업계획서 작성 및 시비 교부신청

－ 보조금 지원조건 준수 및 사업이행 철저

	보조금 지원조건
① 집행과정상 지방재정법, 보조금 관리조례 등 관계법령 준수 ○「지방보조금 관리조례」에 따라 사업계획 외 다른 용도로 사용할 수 없으며, 목적 외 사용은 환수조치 - 거짓 신청 및 부정한 방법, 공익에 반하는 경우, 임의적 사업 중지 등 ○「보조금 지원 표지판 설치에 관한 조례」에 따라 지원표지판 설치 - 해당 사업 : 공사 및 조성된 시설물 및 시설 운영 - 표지판 내용 : 지원기관 및 주요사업내용 ○ 사고이월시 사전승인 등 회계연도 변경시 업무 협의 - 공사 지연 등의 사유로 회계연도를 달리할 경우 사전 협의 필요 ② 준공시 정산, 잔액반납 등 사후관리 철저 ○ 특별한 사유가 없는 한 준공회계연도 내에 완료 ✓ 기타 사항은 행자부 ‘지방보조금 관리매뉴얼’ 지침 준수

□ 향후 계획

○ 자치구 ’22년 지원사업 수요조사 등 의견수렴(해당 자치구)	: ’21. 5.

○ 자치구 ’22년 지원사업 예산협의(예산담당관)	: ’21. 6.

○ 다목적체육센터 지원사업 추진현황 점검	: ’21. 연중

○ ’22년 자치구 다목적 지원계획 수립	: ’21. 11.

붙임 1. 자치구 다목적체육센터 건립 현황 1부.

2. 2021년도 자치구 다목적체육센터 지원사업 추진현황 1부.  끝.

붙임1		자치구 다목적체육센터 건립(추진) 현황

○ 총 59개 시설(완료 47, 건립 중 3, 사전절차 9개)

(2021. 2월 현재)

자치구

개소수

1체육센터

2체육센터

3체육센터

4체육센터

총 계

59

25 자치구

(완료 24, 사전 1)

22 자치구

(완료 20, 건립중 1, 사전절차1)

10 자치구

(완료 3, 건립중 2, 사전절차 5)

2 자치구

(사전절차 2)

종로구

2

올림픽기념국민생활관(’92)

종로문화체육센터(’07)

중구

2

충무스포츠센터(’05)

훈련원종합체육관(’14)

용산구

1

용산문화체육센터(’05)

성동구

3

구민종합체육센터(’95)

금호근린공원체육관(’10)

건립중

’20.12월 착공 / ’21 시비

(성동구뚝섬유수지 복합문화체육센터, 국민(’19))

광진구

3

광진문화체육센터(’06)

중곡문화체육센터(’08)

자양유수지체육관(’19.10.)

동대문구

2

구민체육센터(’92)

동대문구체육관(’04)

중랑구

2

구민체육센터(’99)

중랑문화체육관(’06)

성북구

4

구민체육관(’93)

성북종합레포츠타운(’01)

사전절차

(성북문화체육센터)

사전절차

’21. 7월 기본설계 용역

(월곡복합문화체육시설(’21국고))

강북구

3

강북문화예술회관(’01)

강북웰빙스포츠센터(’05)

건립중

’19. 9월 착공

(강북구립 종합체육센터(’21국고))

도봉구

3

창동문화체육센터(’05)

건립중

’21.5월 준공 (’20. 2월 착공)

(도봉 다목적체육센터(’21국고))

사전절차

’21. 5월 착공 / ’21 시비

(쌍문동 구민체육센터, 국민(’18))

노원구

3

구민체육센터(’98)

월계문화체육센터(’17)

사전절차

’21. 7월 착공 / ’21 시비

(공릉동 구민체육센터, 국민(’19))

은평구

2

구민체육센터(’03)

은평다목적체육관(’14)

서대문구

3

서대문문화체육회관(’93)

서대문다목적체육관(’17)

북아현종합체육센터(’20.12.)

마포구

2

염리생활체육관(’11)

구민체육센터(’15)

양천구

2

구민체육센터(’95)

신월문화체육센터(’00)

강서구

2

구민올림픽체육센터(’00)

가양레포츠센터(’15)

구로구

4

구민체육센터(’93)

신도림생활체육관(’14)

항동생활체육관(’20.4.)

사전절차

’21. 9월 착공 / ’21 시비

(신도림차고지체육시설조성, 국민(’18))

금천구

2

구민문화체육센터(’01)

금나래문화체육센터(’20.3.)

영등포구

3

영등포제1스포츠센터(’04)

영등포제2스포츠센터(’14)

사전절차

’21. 6월 착공 / ’21 시비

(대림3유수지 체육시설, 국민(’20))

동작구

2

흑석체육센터(’98)

구민체육센터(’02)

관악구

2

구민종합체육센터(’01)

신림체육센터(’06)

서초구

3

구민체육센터(’94)

방배열린문화센터(’13)

사전절차

’21. 12월 착공 / ’21 시비

(반포종합운동장 복합체육시설, 국민(’19))

강남구

1

사전절차

(개포1단지 체육시설, 국민(’19))

송파구

1

송파체육문화회관(’04)

강동구

2

온조대왕문화체육관(’04)

사전절차

(제2구민체육관, 국민(’18))

붙임2		2021년도 자치구 다목적체육센터 지원사업 추진현황

➊	도봉동 다목적체육센터(2센터)

○ 사업개요

- 위    치 : 도봉구 도봉동 180길 84(舊 도봉실내배드민턴장, 구유지)

- 사업기간 : 2016. 9. ~ 2021. 7.

- 사업규모 : 연면적 5,724㎡(지상3, 지하2), 부지면적 3,494.2㎡

- 시설내용 : 다목적체육관, 헬스장, 유아체육관, 수영장 등

- 총사업비 : 20,829백만원(국 2,724 / 시 6,356 / 구 13,159)

- 추진일정

‣ ʼ16. 9.	: 건립계획 수립

‣ ʼ17. 7.	: 서울시 투자심사

‣ ʼ18. 3.	: 중앙 투자심사

‣ ʼ18. 9. ~ ʼ19. 6.	: 기본 및 실시설계

‣ ʼ20. 2.	: 공사 착공

‣ ʼ21. 5.	: 공사 준공

○ 지원금액 : 1,089백만원(전액 국비)

○ 연차별 추진계획

(단위 : 백만원)
구분	소 계	’17년	’18년	’19년	’20년	’21년	’22년 이후
합계	23,649	4,011	6,308	1,835	8,996	2,499	0
국비	2,724	-	-	-	1,635	1,089
시비	6,356	-	3,900	-	2,456	-
구비	14,569	4,011	2,408	1,835	4,905	1,410

❷	강북 구립 종합체육센터(3센터)

○ 사업개요

- 위    치 : 강북구 미아동 811-2(미아뉴타운 8구역내)

- 사업기간 : 2019. 7. ~ 2022. 9.

- 사업규모 : 연면적 2,645.89㎡(지상2, 지하2), 부지면적 1,704㎡

- 시설내용 : 수영장, 헬스장, 순환운동실 등

- 총사업비 : 23,800백만원(국 1,984 / 시 3,240 / 구 18,576)

- 추진일정

‣ ʼ14. 11.	: 타당성 조사

‣ ʼ16. 10.	: 건립계획 수립

‣ ʼ17.  3.	: 서울시 투자심사

‣ ʼ18. 5.	: 기본실시설계 착수

‣ ʼ19. 7.	: 기본실시설계	준공

‣ ʼ19. 7.	: 중앙 투자심사

‣ ʼ19. 9.	: 공사 착공

‣ ʼ22. 9.	: 공사 준공

○ 지원금액 : 3,294백만원(국비 1,984, 시비 1,310)

○ 연차별 추진계획

(단위 : 백만원)
구분	소 계	기투자	’19년	’20년	’21년	’22년
합계	23,800	7,600	1,500	4,430	6,710	3,560
국비	1,984	-	-	-	1,984	-
시비	4,000	500	-	1,430	1,310	760
구비	17,816	7,100	1,500	3,000	3,416	2,800

※ ’17년 서울시 투자심사 시 16,703백만원(국1,863, 시3,043, 구 11,798) 이었으나, ’19년 7월 중앙투자심사 총 23,800백만원으로 통과

❸	성동 뚝섬유수지 복합문화체육센터(3센터)

※ 명칭 변경: (現)서울숲 복합문화체육센터(2021. 2.)

○ 사업개요

- 위    치 : 성동구 성수동 1가 685-63 등 3필지

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2022. 2.

- 사업규모 : 연면적 5,589.92㎡(지상4)

- 시설내용 : 수영장, 볼링장, 다목적체육관, 헬스장, 어린이집, 초등돌봄센터, 생활문화센터 등

- 총사업비 : 29,700백만원(국 4,066/ 시 5,571 / 특교 4,600/ 구 15,463)

- 추진일정

‣ ’19. 3.	:「2019년 생활체육시설 확충 지원사업 공모」선정

‣ ’19. 3. ~ 10.	: 기본계획 수립 및 타당성 용역, 중앙투자심사

‣ ’20. 5. ~ 11.	: 기본 및 실시설계

‣ ’20. 7. ~ 10.	: 공유재산심의회 및 공유재산관리계획

‣ ’20. 10.	: 도시계획시설 결정(변경) 및 지형도면 고시

‣ ’20. 11.	: 도시계획시설(체육시설)사업 실시계획인가 고시

‣ ’20. 11. ~ 12.	: 공사 발주 및 계약, 착공

‣ ’20. 12. ~ ’22. 2.	: 공사 착공 및 준공

○ 지원금액 : 3,100백만원(전액 시비)

○ 연차별 추진계획

(단위 : 백만원)
구분	소 계	’17년	’18년	’19년	’20년	’21년	’22년 이후
합계	29,700	0	0	5,472	6,252	11,960	6,016
국비	4,066	-	-	1,500	700	1,866	-
시비	5,571	-	-	-	952	3,290	1,329
구비	20,063	-	-	3,972	4,600	6,804	4,687

❹	도봉 쌍문동 구민체육센터(3센터)

○ 사업개요

- 위    치 : 도봉구 쌍문동 265, 265-1, 산79-4

- 사업기간 : 2018. 9. ~ 2022. 11.

- 사업규모 : 연면적 4,569㎡(지상3, 지하1), 부지면적 3,748㎡

- 시설내용 : 다목적체육관, 헬스장, 수영장, 다목적실, 돌봄센터 등

- 총사업비 : 21,780천원(국 3,000 / 시 5,451 / 구비 13,329)

- 추진일정

‣ ʼ18. 9.	: 건립계획 수립

‣ ʼ19. 10.	: 중앙투자심사

‣ ʼ20. 3. ~ 12.	: 설계용역

‣ ʼ20. 7. ~ ʼ21. 4.	: 사유지 보상 진행 중

‣ ʼ21. 5.	: 공사 착공

‣ ʼ22. 11.	: 준공

○ 지원금액 : 2,387백만원(전액 시비)

○ 연차별 추진계획

(단위 : 백만원)
구분	소 계	’17년	’18년	’19년	’20년	’21년	’22년 이후
합계	21,780	0	2,719	1,660	2,921	8,843	5,637
국비	3,000	-	200	1,600	1,200	-	-
시비	5,451	-	-	-	-	3,410	2,041
구비	13,329	-	2,519	60	1,721	5,433	3,596

❺	노원 공릉동 구민체육센터(3센터)

○ 사업개요

- 위    치 : 노원구 공릉동 228번지 외 9필지

- 사업기간 : 2019. 9. ~ 2022. 11.

- 사업규모 : 연면적 2,098.26㎡(지상3, 지하1), 부지면적 1,304.3㎡

- 시설내용 : 다목적체육관, 수영장 등

- 총사업비 : 9,601천원(국 3,000 / 시 2,569 / 구 4,032)

- 추진일정

‣ ʼ19. 2.	: 건립계획 수립

‣ ʼ19. 9.	: 서울시 투자심사

‣ ʼ20. 9. ~ ʼ21. 6.	: 기본 및 실시설계

‣ ʼ21. 7.	: 공사착공

‣ ʼ22. 11.	: 공사준공

○ 지원금액 : 1,798백만원(전액 시비)

○ 연차별 추진계획

(단위 : 백만원)
구분	소 계	’17년	’18년	’19년	’20년	’21년	’22년 이후
합계	9,601	0	0	1,879	700	3,128	3,894
국비	3,000	-	-	1,000	700	1,300	-
시비	2,569	-	-	-	-	1,798	771
구비	4,032	-	-	879	-	30	3,123

❻	영등포 대림3유수지체육시설(3센터)

○ 사업개요

- 위    치 : 영등포구 대림동 611

- 사업기간 : 2019. 9. ~ 2024. 8.

- 사업규모 : 연면적 4,318㎡(지상3)

- 시설내용 : 헬스장, 수영장, 다목적체육실 등

- 총사업비 : 22,958천원(국 4,500 / 시 3,710 / 구 14,748)

- 추진일정

‣ ʼ21. 3.	: 市도시계획심의(유수지 복개, 건축) 및 區도시계획심의(중복결정)

‣ ʼ24. 4.	: 도시계획시설 결정 및 지형도면 고시

‣ ʼ21. 4.	: 체육관 건립 기본 및 실시설계, 용역 의뢰(건축과

‣ ʼ21. 6. ~ ʼ21. 12.	: 유수지 복개공사 착공 및 준공

‣ ʼ21. 12. ~ ʼ23. 6.	: 건축공사 착공 및 준공

○ 지원금액 : 1,117백만원(전액 시비)

○ 연차별 추진계획

(단위 : 백만원)
구분	소 계	기투자	’20년	’21년	’22년	’23년
합계	22,958	2,693	3,925	4,379	8,508	3,453
국비	4,500	-	2,000	1,500	1,000	-
시비	3,710	85	1,000	1,117	1,508	-
구비	14,748	2,608	925	1,762	6,000	3,453

❼	반포종합운동장 종합체육시설(3센터)

○ 사업개요

- 위    치 : 서초구 반포동 15-2

- 사업기간 : 2020. 4. ~ 2022. 12.

- 사업규모 : 연면적 5,918㎡(지상4), 부지면적 2,984㎡

- 시설내용 : 수영장, 헬스장, 다목적체육관 등

- 총사업비 : 18,700천원(국비 3,000 / 시 2,400 / 구 18,012)

- 추진일정

‣ ʼ20. 4. 2.	: 중앙투자심사 완료(조건부 추진)

‣ ʼ19. 3. ~ 12.	: 타당성조사 및 기본계획 수립

‣ ʼ20. 7. ~ ʼ21. 5	: 기본 및 실시설계 용역

‣ ʼ21. 1. ~ ʼ21. 4.	: 도시계획시설 중복결정(유수지, 체육시설)

‣ ʼ21. 6. ~ ʼ22. 12.	: 공사시행 및 준공

○ 지원금액 : 819백만원(전액 시비)

○ 연차별 추진계획

(단위 : 백만원)
구분	소 계	’17년	’18년	’19년	’20년	’21년	’22년 이후
합계	23,412	0	0	1,000	0	8,975	13,437
국비	3,000	-	-	1,000	-	2,000	-
시비	2,400	-	-	-	-	1,200	1,200
구비	18,012	-	-	-	-	5,775	12,237

❽	성북 월곡복합문화체육시설(4센터)

○ 사업개요

- 위    치 : 성북구 하월곡동 67-39 외 7필지

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 2023. 10.

- 사업규모 : 연면적 7,102㎡(지상4, 지하2), 부지면적 2,190㎡

- 시설내용 : 수영장, 다목적체육관, 헬스장 등

- 총사업비 : 43,383천원(국 2,355 / 시 4,396 / 구 36,632)

- 추진일정

‣ ʼ19. 5.	: 건립계획 수립

‣ ʼ19. 5.	: 타당성용역 준공

‣ ʼ19. 12.	: 부지매입 완료

‣ ʼ20. 4.	: 중앙투자심사 완료

‣ ʼ20. 12.	: 공공건축 심의 완료

‣ ʼ21. 3.	: 설계공모

‣ ʼ21. 7.	: 기본 및 실시설계 용역

○ 지원금액 : 1,878백만원(국비 1,574, 시비 304)

○ 연차별 추진계획

(단위 : 백만원)
구분	소 계	’17년	’18년	’19년	’20년	’21년	’22년 이후
합계	43,383	0	0	14,233	1,476	10,838	16,836
국비	2,355	-	-	-	-	1,574	781
시비	4,396	-	-	-	1,476	304	2,616
구비	36,632	-	-	14,233	-	8,960	13,439

❾	구로 신도림차고지 이전부지 체육시설(4센터)

○ 사업개요

- 위    치 : 구로구 신도림동 301(신도림유수지, 前청소차 차고지)

- 사업기간 : 2019. 9. ~ 2022. 12.

- 사업규모 : 연면적 3,067㎡(지상2), 대지면적(사용예정면적 4,747㎡)

- 시설내용 : 다목적체육관, 어린이 생존수영장 등

- 총사업비 : 12,210천원(국 3,000 / 시 2,910 / 구 6,300)

- 추진일정

‣ 2021. 3. 6.	: 실시설계용역 완수(예정)

※ 완수기한 연기예정:市 관련부서 협의 지연, 경관심의 등 절차 미이수

‣ 2021. 7. 15.	: 도시관리계획 중복 결정(변경)용역 완수(예정)

‣ 2021. 9.	: 착공(예정)

‣ 2022. 12.	: 준공(예정)

○ 지원금액 : 2,037백만원(전액 시비)

○ 연차별 추진계획

(단위 : 백만원)
구분	소 계	’17년	’18년	’19년	’20년	’21년	’22년 이후
합계	12,210	0	200	1,600	1,200	4,037	5,173
국비	3,000	-	200	1,600	1,200	-	-
시비	2,910	-	-	-	-	2,037	873
구비	6,300	-	-	-	-	2,000	4,300