도시철도 종합안전대책 추진실적

(2021년 1/4분기)

개 요

1

2003.2.18 발생한 대구지하철 사고를 계기로 서울교통공사의 전반적인 안전실태를 분야별로 재점검하여 종합안전대책을 수립․시행함으로써 재난대응시스템을 구축하고 지하철 안전운행에 만전을 기하고자 함

관 련 근 거

2

도시철도 종합안전대책 수립(사장방침 제692호, `03.10.7)

건설교통부 주관 합동점검반 점검실시

개선과제에 대한 개선명령에 의거 세부추진계획 수립(개선과제 27건)

소방안전대책 수립(사장방침 제399호, `03.6.25)

대구지하철 화재사고 발생이후 양공사(서울메트로, 도시철도공사)에서 『종합안전대책 추진단』구성

서울시 주관 외부 소방안전 전문가 및 대학교수로 점검반을 편성 소방안전 합동점검을 실시하여 점검결과 개선과제 도출 및 계획수립(개선과제 85건)

기본 목표 및 추진 방향

3

기본 목표

시설 ․ 설비의 점검 및 보강을 통한 사전예방 안전도 향상

교육훈련의 내실화로 안전의식 강화 및 위기관리능력 제고

추진방향

양공사 통합으로 1~4호선, 5~8호선별로 시행 중인 사업을 통합추진

- 터널내 연결송수관 설비 설치사업 통합추진

소방설비 및 전동차량 등 시설개선 보완으로 사고예방 및 확산 방지

안전에 대한 직원 정신교육 및 방재훈련의 지속적 시행으로 안전의식 강화 및

위기관리 능력제고

추 진 현 황 (2021. 3. 31. 기준)

4

총괄현황

구분	개선과제	완 료	미 완료
합계	200건	187건	13건
1~4호선	112건	100건	추진중 10건	유보 2건
5~8호선	88건	87건	추진 중 1건	-

- 개선과제 총 200건(국토교통부 52건, 서울시 146건, 감사원 2건)중 완료 187건

- 미완료 사업 13건(국토교통부 5건, 서울시 6건, 사업유보(서울시) 2건)

추진중 사업내역 (11건)

○ 국토교통부 개선대책(5건)

연번	관리 번호	과 제 명	소요예산(백만원)		주관 부서	비 고
			계	`19 이후
계		5건	342,283	300,808
【시설개선】 3건			85,953	54,247
1	1-1	제연설비 개선	10,518	5,629	기계처	▸100개역 중 잔여 3개역 ▸충정로역 공사 완료(~‘20.04.20) ▸잠실새내역 역사환경개선공사 병행 - ‘19.12.20~’21.05.25
2	1-2	터널내 연결송수관 설비 (1~4호선)	75,435	48,618	기계처	▸1~4호선, 5~8호선 공동 추진 ▸263.17km → 285.77km 증가 - 단선구간 포함으로 증가 ▸소요예산 증액 - 55,831백만원→ 75,435백만원 ▸기설치: 177.74km 설치 완료 ▸‘20년도 27km 설치 완료
3	1-2	터널내 연결송수관 설비 (5~8호선)
【차량개선】 1건			7,430	7,430
4	2-7	객실내 CCTV 설치 (종합화상관련)	7,430	7,430	차량운영처	서울시 연계 사업 ▸1단계 완료 ▸2단계 진행중 - 사업물량 2,644칸 중 - ‘18~’20년 432칸 설치 ・20년 132칸 설치 완료(하남선 32칸 반영) ・21년 3월 14칸 설치

연번	관리 번호	과 제 명	소요예산(백만원)		주관 부서	비 고
			계	`19 이후
【제도개선】 1건			284,200	270,700
5	3-8	관제소 통합운영 ※ 13-3과 병행	284,200	270,700	신호처 건축처	서울시 연계 사업 ▸1단계 완료 ▸2단계 추진 중 ▸설계용역 준공(‘20.12.4) ▸사업변경 요청(‘20.12.24) ▸서울시 변경계획 통보(‘21.2.19)

○ 서울시 소방안전대책(6건)

연번	관리 번호	과 제 명	소요예산(백만원)		주관 부서	비 고
			계	′19이후
계		6건	59,346	42,000
【제도개선】 1건			-	-
1	13-3	종합사령실 재해상황 파악능력배양(사령실통합관련) ※3-8과 병행	-	-	신호처	▸1단계 완료 ▸2단계 추진 중 ▸설계용역 준공(‘20.12.4) ▸사업변경 요청(‘20.12.24) ▸변경계획 통보(‘21.2.19)
【시설개선】5건			59,346	42,000
2	23-4	바닥 피난구 유도등 설치	4,667	-	기계처	▸100개역 중 잔여 1개역 - ‘21년 이후 환경개선공사와 병행 추진
3	43-3	기계설비 자동감시 시스템 구축	48,750	42,000	기계처	▸‘20년06월 1호선 시스템 개량사업 예산조정으로 1년 순연(코로나19 관련) ▸‘21년 10개역 진행 ▸‘22년 26개역 추진 ▸‘23년 50개역 추진 ▸‘24년 33개역 추진
4	43-5	수직관통부 Water Curtain설치	5,929	-	기계처	▸100개역 중 잔여 2개역 ※ 냉방공사와 병행 추진
5	52-1	변전소 출입구 개선	-	-	전기처	▸1개소 시행예정 - 실시설계용역 준공(‘19.05.19) - 도로법시행령에 의거 3년간 도로굴착 통제로 사업진행 불가 ▸‘21년 재추진예정
6	53-2	전원공급배선 보호기능 확보	-	-	전기처	▸120개역 중 잔여 79역 - 역사 환경개선공사 병행 14개역 추진 중 - 역사 리모델링(전기분야) 실시설계 완료(’20.11월) 및 발주대기 ~ 서울역(1), 종각, 종로3가(1), 제기동, 청량리

향후 추진예정(사업유보) 사업내역 (2건)

○ 서울시 소방안전대책(2건)

연번	관리 번호	과 제 명	소요예산(백만원)		주관 부서
			계	추 후
【시설개선】 2건			151,700	151,700
1	43-7	1호선 본선 환기개량	200	200	토목처
2	43-8	2호선 본선 강제환기구 설치	151,500	151,500	기계처