(은평자연환경역사박물관 건립) 2013년도 하반기 사업추진실적

(2013년도 12월말 현재)

□ 사업명 : 은평자연환경역사박물관 건립

※ 서울시청 문화관광디자인본부 역사문화재과(김근형, 02-2133-2617, carroful@seoul.go.kr)

서울시 은평구청 문화체육관광과(표정혜, 02-351-6534, jhye1215@ep.go.kr)

□ 사업개요

구 분	최초교부 신청시 사업계획서상 내용 (A)	최종 사업계획 변경 승인 내용 (B)	‘13년 12월말(현재) 내용 (C)	사업지연 사유/ 미착공 사유
소재지	서울시 은평구 진관동 산 100-36 일원	서울시 은평구 진관동 135-5 일원	좌동
사업규모	부 지 : 4,541㎡ 연면적 : 2,200㎡ (지하1층, 지상2층)	부 지 : 6,530㎡ 연면적 : 2,818.42㎡ (지하1층, 지상2층)	좌동
총사업비 (국고/지방비)	8,969백만원 (국고 3,500 / 지방비 5,469)	12,330백만원 (국고 3,500 / 지방비 8,830)	좌동
착공연월 ~ 준공연월 (사업기간)	2005. 2월 ~ 2011. 12월 <6년>	2005. 2월 ~ 2014. 8월 <9년>	좌동
사업내용	○ 지하1층 수장고, 기계전기실, 창고 등 ○ 지상1층 카페테리아, 기획전시실, 다목적교육실 등 ○ 지상2층 상설전시실, 체험실, 사무실, 도서자료실 ○ 야외전시 뉴타운 발굴유물 (기와가마, 석물)	○ 지하1층 공방, 수장고, 기계전기실 ○ 지하1층 전시실, 안내실, 어린이서재 등 ○ 지하2층 전시실, 사무실, 자원봉사실 등 ○ 야외전시 뉴타운 발굴유물 (기와가마, 석물) 전통한식정자	좌동
관련 문서번호 (연월일)	문화체육관광부 문화여가정책과-810 (2009. 7. 7)	문화체육관광부 박물관정책과-1075 (2013. 10. 11)

□ 사업비 집행내역 및 향후 예산액

* 예산현액=예산액+전년도이월액, 이월액=예산현액-집행액

집행률 = 집행액/예산현액. 지방비는 국고보조금을 제외한 교부세, 지방비, 기금 등 합계액

(단위 : 백만원)

연도별	예산액(A)	전년도이월액 (B)	예산현액 (A+B)	집행액(C) * 실 집행액	집행잔액 [(A+B)-C]	집행률 [C/(A+B)]
2009년 이전	485	0	485	123	362	25%
국 고	0	0	0	0	0	0
지방비	485	0	485	123	362	25%
(도 비)	0	0	0	0	0	0
(시군비)	485	0	485	123	362	25%
2010년	3,446	362	3,808	335	3,473	8%
국 고	1,500	0	1,500	0	1,500	0
지방비	1,946	362	2,308	335	1,973	14%
(도 비)	1,500	0	1,500	0	1,500	0
(시군비)	446	362	808	335	473	41%
2011년	2,006	3,473	5,479	213	5,266	4%
국 고	1,000	1,500	2,500	0	2,500	0
지방비	1,006	1,973	2,979	213	2,766	7%
(도 비)	1,000	1,500	2,500	0	2,500	0
(시군비)	6	473	479	213	266	44%
2012년	2,500	5,266	7,766	3,354	4,412	43%
국 고	500	2,500	3,000	1,544	1,456	51%
지방비	2,000	2,766	4,766	1,810	2,956	38%
(도 비)	500	2,500	3,000	1,544	1,456	51%
(시군비)	1,500	266	1,766	266	1,500	15%
2013년	2,305	4,412	6,717	3,199	3,518	48%
국 고	0	1,456	1,456	959	497	66%
지방비	2,305	2,956	5,261	2,240	3,021	42%
(도 비)	0	1,456	1,456	959	497	66%
(시군비)	2,305	1,500	3,805	1,281	2,524	34%
2014년 이후	1,588	1,553	3,141	3,141	0	100%
국 고	500	286	786	786	0	100%
지방비	1,088	1,267	2,355	2,355	0	100%
(도 비)	500	286	786	786	0	100%
(시군비)	588	981	1,569	1,569	0	100%
합 계	12,330	-
국 고	3,500	-
지방비	8,830	-
(도 비)	3,500	-
(시군비)	5,330	-

※ ‘13년 집행 잔액(3,518백만원) 중 1,965백만원(국비 211, 시비 211, 구비 1,543)은 ’14년 2월까지 집행 예정

□ 보조금 집행 세부내역(용지매입비 제외)               (단위 : 백만원)

구 분		설계비	감리비	건축공사	전시공사	용역비 등	계
총사업비	국 고	0	0	959	0	0	959
	시․도비	0	0	959	0	0	959
	시․군․구비	0	197	1,074	0	10	1,281
	기타	0	0	0	0	0	0
	계	0	197	2,992	0	10	3,199

□ 국고 집행잔액 향후 조치계획

ㅇ 공사 준공일 및 관급자재 납기일 미도래 등으로 인하여 국비 집행 잔액 발생

ㅇ 집행 잔액(497백만원) 중 211백만원은 ‘14. 2월까지 관급자재 구입비로 집행 예정이며,

286백만원은 2014년도로 이월 예정임

□ 사업추진현황

ㅇ 착공일 : 건축 ‘12. 9. 25, 전시 ’13. 9. 12

ㅇ 공정율 : 건측 60.44%, 전시 15.75%(´13. 12. 31. 현재)

- 건축 : 창호 및 내‧외부 석공사

- 전시 : 전시실 벽체 조성 및 패널 문안 수정

ㅇ 준공(예정)일 : ‘14. 6월

ㅇ 개관(예정)일 : ‘14. 6월

□ 향후 추진계획

ㅇ ‘14. 4월 : 건축공사 준공

ㅇ ‘14. 6월 : 전시물 제작ㆍ설치공사 준공 및 박물관 개관

□ 붙임자료 : 건립부지 전경사진, 조감도

작 성 자      직     임기제8급   성 명  표 정 혜   (인)

확 인 자      직  문화관광과장   성 명  하 영 호   (인)

[ 건립부지 전경사진 ]

▲ 부지 전경                               ▲ 전시실 벽체 조성

[ 조감도 ]