	(구)동숭아트센터 리모델링-예술청 조성 추진 경과

□ 최초에는 문화재단 기본재산 운영전략 차원에서 시작되었다가, 예술청 조성과 관련하여 서울시의 문화인프라 구축 및 예술인 지원정책으로 연계 추진 중

	<문화재단> 기본재산 운영 개선
별도추진	-2011년 기본재산 원금 최초 사용(19.6억) -2013년부터 기본재산 보전전략 수립 . 문화정책위원회, 문화본부 등 협의 . 부동산 치환추진 (공간사옥, 예장동 등) -기본재산 활용방안 시장보고, 동숭아트센터 매입 추진 결정 : 2016.4.20. -대표이사 방침 수립 : 2016.4.22.
			<문화본부> 예술청 조성
			-서울예술인플랜 내 “예술청 조성” 명시 : 2016.10.19. (시장방침 제310호) -예술청 건립 타당성 조사용역 : 2017.4월~2018.3월 (서울연극센터 활용) -대학로 예술인지원시설 재편 TF 운영 : 2018.3월~6월 -예술청 조성을 민선7기 시정4개년 문화본부 핵심과제 중 하나로 추진 -시장 보고 “예술인 종합지원시설 ‘예술청’ 조성계획” : 2018.10.25.(문화시설과) ☞보고결과 : 추가 보고 지시
	(가칭)대학로창작플랫폼 조성
	-동숭매입 검토 및 준비 : 2016.4월~2017.1월 . 방침수립, 기본재산관리위, 이사회 의결 . 감정평가, 타당성 용역, MOU체결 : 2016.8월 . 매입 타당성 조사 시 현장 의견수렴 . 이사회, 시의회 보고 : 2016.9월~11월 . 투자타당성 조사의뢰 : 2016.12월(반려) -실제 매입 추진 : 2017.3월~2018.1월 . 이사회 보고(2017.3.30.), MOU 연장 . 시의회 보고, 이사회 승인(2017.12.21.) . 계약 체결 직전 현장 의견 수렴 . 부동산 매매 계약체결 : 2018.1.9. -리모델링 추진 . 기획설계 및 의견수렴 : 2018.1월~6월 . 정밀안전진단, 공연장 컨설팅 용역 병행 -소유권이전 및 등기완료 : 2018.5.28. -공사비로 기본재산 추가사용(123억) 계획 시의회 보고, 이사회 승인 : 2018.6월 -리모델링 추진 기본계획 방침수립 : 2018.7.26. -리모델링 설계 공모 : 2018.8.24.~11.2
연계추진	<문화재단 + 문화본부> (사회적 우정의) 예술청 조성
	-동숭아트센터 내에 예술청 기능구현 방안 논의 : 2018.3월~(문화시설과, 문화예술과, 문화재단) -투자출연기관 경영혁신발표회에서 민선 7기 문화재단 핵심혁신과제로 발표 : 2018.10.10. -2019년 사업 예산 편성 협의 : 2018.10월
	-설계공모 심사 결과 발표 : 2018.11.22.(목) 당선작(작품명:Found Space) (※심사위원단 : 김광수, 우의정, 이소진, 이충기, 임재용, 박장렬, 오진수, 송하엽(예비), 서현(PA)) -당선자와 실시설계 용역 : 2018.12월~2019.8월 -예술청 공론화 기획회의 1~6회(2018.11월~2019.1월) -예술청 공론화 라운드테이블 2회(2018.11월~12월) -예술청 가치와 운영모델 연구, 공간활용방안 공론화 프로젝트를 통해 예술청 개념 정립 및 공간활용방안을 실시설계에 반영(향후)