설계변경 대공원위원회 자문요청서

문서번호		요청부서	조경과 담당 호명옥			요 청 일		2015.8.21
공 사 명	서울대공원 곰사 환경개선공사
공사개요	공사규모	곰사 방사장 및 관람공간 정비 등
	공사기간	2015. 2. 23 ~ 2015. 9. 30
	감 리 사	-
	설 계 사	한울림조경설계사무소 대표 남은희
	시 공 사	㈜선진종합건설 대표 이정현
자문 안건명		곰사 환경개선공사 설계변경					요청금액		88,974천원
자문 요청사유		■ 30,000천원 이상 변경사항 □ 부서(담당별)간 조정∙통합이 필요한 경우
설계변경 유형		□ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) □ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ■ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ■ 민원해결, 보수, 보강 □ 문화재 및 지장물 이설 □ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ■ 제도, 기준 변경 □ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내 용 : 방사장에 대한 적용할 국내법이 미비하여 국제기준(미국수족관협회)에 의거 벽체 높이 및 유리규격 변경, 콘크리트 바닥 철거시 콘크리트 두께 상이 등 현장여건 상이, 사육사 안전시설 및 방사장과 관람객 이용 편의를 위한 일부 실시공물량 변경에 따른 증감반영
원설계자 의견(요약) ○ 내 용 : 특이사항 없음
주요변경내역 및 공종
○ 변경개요 - 조경식재 : 수종 및 수량변경 - 조경시설물 : 안전시설 설치 및 관람시설 보완 - 설비공사 : 인입관 크기 조정 등 ○ 물량 증감내역 ※ 설계변경 물량증감표 별첨				○ 공사비 증감내역 - 당 초 : 977,978천원 - 변 경 : 1,066,772천원 - 증 감 : 증 88,794천원 ○ 설계변경 주요 공종 - 조경시설물, 조경식재, 설비공 등
별첨서류	변경 전후도면 사본 1부 설계내역서 1부 설계자 검토의견 사본 1부 물량증감표 1부				○ 준공기한 : ‘15.9.30