『제로에너지주택 실증단지』 시비 지원 내역

1		사업개요

위  치 : 노원구 하계동 251-9

연면적 : 17,652㎡

건립규모 : 지하2층/지상7층, 제로에너지 임대주택 117세대

사업기간 : 2013.10. ~ 2018.4(모니터링기간 포함)

총사업비 : 250.2백만원(연구개발비 240억원 제외)

국비:31.4억, 시비53.3억, 시특교 22.7억, 임대보증금 116.3억, 폐기물보상금11.6억 기타 14.9억

2		추진현황

노원구 제로에너지하우스 건립, 60% 절감형 자체사업 추진

2012.04.~08.   기본구상/기본계획 수립

2012.10.30.    서울시 투자심사위원회 심사 완료

국토교통부 R&D사업 응모, 100% 절감형 국가사업으로 전환 추진

2013.09.17.    국토부 “제로에너지주택 실증단지 구축”R&D사업 공모 당선

2014.12.19.    사업계획승인(공공주택건설 등에 관한 특별법, 121호)

2015.10.29.    착공

2017.06.23.    사업계획변경승인(국민임대주택→행복주택, 117호))

2017.07.06.    입주자모집공고

2017.07.현재   내부마감 및 외부 공사 진행 중(공정률 90%)

3		향후계획

2017.09월     준공

2017.10월     입주대상자 발표

2017.11월     입주

4		시비 지원 내역

총 지원 금액 : 5,330백만원

기교부액 5,100백만원 + 2017년 교부 예정액 230백만원(4,600만원×5호)

시비보조금 세부 내역

총지원금액	=	2013년 지원액	+	2015년 지원액	+	2016년 지원액	+	2017년 요청액
5,330백만원		365백만원		2,075백만원		2,660백만원		230백만원