(서식 3)

유기성폐자원 바이오가스화사업 관리대장

< 강동구 >

1. 사업개요

□ 시설위치 : 서울특별시 강동구 아리수로 87길 272

□ 사업기간 : 2018년 ~ 2023년

□ 사업유형 : 재정사업

□ 시설규모 : 음폐수 바이오가스화 270톤/일,

□ 총사업비 : 40,500백만원

- 국고 보조   (17.3%) : 7,007백만원

- 지방비 부담 (40.4%) : 16,350백만원

- 원인자부담금(42.3%) : 17,143백만원

2. 사업추진현황 및 계획

□ 사업진도 : 입찰공고 중

□ 그간 추진실적

- ’12. 12. : 『고덕·강일 보금자리주택 지구계획』승인 고시

- ’16. 2. ~ ’17. 3. : 기본계획용역 완료/한국지방행정연구원 타당성조사 완료

- ’17. 3. ~ 8. : 서울시 및 중앙 투자심사 완료

- ’18. 2. 1. : 대형공사 입찰방법 결정(턴키, 설계적합최저가)

- ’18. 5. 30. : 입찰안내서 작성용역 착수

- ’18. 11. : 사업 발주 의뢰(강동구 → 서울시 도시기반시설본부)

- ’18. 12. 14. : 입찰안내서 작성용역 준공

- ’19. 3. 28. : 입찰공고

□ '19년도 월별 추진계획

연 도	분 기	월	추 진 내 역	공정율(%)
’19년	1분기	1월	발주준비
		2월	발주준비
		3월	입찰공고
	2분기	4월	현장설명 및 기본설계
		5월	기본설계
		6월	기본설계
	3분기	7월	기본설계
		8월	기본설계
		9월	기본설계
	4분기	10월	공사계약 및 실시설계
		11월	실시설계
		12월	실시설계

3. 2019년 예산집행 전망

(단위 : 백만원)

구분	‘19년 예산액 (a)	이월액 (b)	예산 현액 (a+b)	월별집행계획
				1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
합계	696	747	1,443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,443	-	-
국고	209	148	357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357	-	-
지방비	487	599	1,086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,086	-	-
원인자 부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 월별집행계획을 기준으로 보조금을 교부할 계획이므로 정확히 작성 요망

4. 추진상 문제점 및 대책

□ 당초 사업 위탁 대상이 한국환경공단에서 서울시 도시기반시설본부로 변경되는 과정에서 사업이 지연되어 2018년 사업비(설계보상비) 명시이월

5. 건의사항

□ 금년 하반기 사업자가 선정되고 2020년 착공이후 사업이 본격적으로 추진될 예정이므로 국고보조금이 원활히 편성될 수 있도록 요청

〔지자체 담당자 및 연락처〕

담당부서	직 위	성 명	전 화	HP	E-mail
강동구 자원순환센터추진과	과 장	이병진	(02)3425-7159	*************	mozart2224@gangdong.go.kr
	팀 장	정재흥	(02)3425-6061	*************	jjh5160@gangdong.go.kr
	담 당	임정규	(02)3425-6062	*************	jglim229@gangdong.go.kr