- 2021년도 송정동 중심가로 -

간판개선사업 추진계획 제안설명

안녕하십니까?

광고물관리팀장 김부수입니다.

위원님들 그간 잘 지내셨는지요?

코로나 백신 접종율이 올라가는 만큼

희망이 보이는 것 같아서 다행스럽습니다.

위원님들께서도 마음만은 늘 활기차게 보내시길 기원합니다.

이번 옥외광고심의위원회는

2021년 송정동 중심가로 간판개선사업의 추진계획에 대한 건입니다.

이번 회의도 지난번에 이어서

네이버 밴드 온라인과 서면 심의 형태로 비대면 위원회를 개최하고자 합니다.

대면 위원회 개최 시

구두로 설명드리는 자료를

서면자료와 함께 올리는 것으로

제안설명을 대체하도록 하겠습니다.

[추진개요]

<추진근거>

간판개선사업은

옥외광고물법과 그 시행령, 그리고 성동구 옥외광고물 조례 제10조(정비시범구역)와 제11조(광고물 등의 정비지원)에 의거하여 추진하고 있습니다.

또한, 올해 3월에는 우리구 간판개선사업을 업그레이드 하고자 타구의 우수사례들을 벤치마킹하여

우리구 사업에 반영방안을 사업계획에 함께 반영했습니다.

<추진방향>

특히 올해 사업은 도시재생과의 송정동 도시재생 경관개선사업(건물 입면개선 등)과 연계하여 사업을 추진할 예정으로 간판개선효과가 극대화 할 것으로 판단됩니다.

간판 디자인은 도시재생과에서 경관개선사업과 함께 일괄 추진한 후 옥외광고심의위원회 심의를 거쳐서 간판 제작·설치에 활용할 예정입니다.

올해에도 전년과 마찬가지로 점포주 건물주 주민대표 등이 참여하는 간판개선주민위원회가 주도적으로 사업을 추진하도록 할 예정이며, 관내 옥외광고사업자가 간판제작·설치에 참여하여 지역경제 활성화에 기여 할 수 있는 방향으로 사업을 추진하고자 합니다.

<세부 사업개요>

간판개선사업은 올해 연말까지 진행 예정이며, 사업대상은 송정동 광나루로11길에 있는 104개 건물, 167개 점포, 235개 간판이 대상입니다.

사업 내용은 불법광고물 정비 및 간판 제작설치입니다. 1업소 1간판 설치를 원칙으로 하되, 2개 도로를 접하는 건물(곡각지점)이나 기존 돌출간판 이용 업체에 대해서는 소형 돌출간판으로 교체 하는 경우 등은 예외를 인정하여 사업 참여도를 높일 계획입니다. 아울러, 옥외광고물 신고나 허가 절차 등에 행정적 지원을 제공할 예정입니다.

<사업절차>

사업절차는 현재 사업지구 지정 및 표시방법 고시를 위한 절차의 일환으로 추진계획에 대한 옥외광고심의를 진행 중이며, 향후 간판개선 주민위원회 구성 등 순차적으로 사업을 진행할 예정입니다.

이번 사업은 도시재생과의 도시재생사업과 연계 추진되어, 간판디자인은 도시재생과에서 일괄 추진하여 전달되면, 본 옥외광고심의위원회에서 디자인 심의 진행 후, 간판 제작설치 절차를 진행하게 되겠습니다.

[세부 추진계획]

<지원대상 및 방법>

지원 대상은 사업지구 지정일(표시방법 고시일) 현재 간판을 설치하고 영업중인 업소를 대상으로 하며, 지원금액은 1개 업소당 230만원을 원칙으로 합니다. 간판 디자인비는 도시재생과에서 일괄실시하므로 해당 금액에서 제외되어 있습니다.

원칙의 예외로, 2개 도로를 접하는 건물(곡각지점)이나 기존 돌출간판 이용 업체에 대해서는 소형 돌출간판으로 교체 하는 경우 등은 예외를 인정하여 추가적인 지원을 하는 것으로 사업 참여도를 높일 계획입니다.

<간판개선위원회 구성>

자율적이고 원활한 사업추진을 위해 점포주, 건물주, 주민, 관련 공무원 등 7명 내외로 구성된 간판개선주민위원회를 구성예정이며 이들 중 위원장, 부위원장, 감사 등을 선출하여 운영할 예정입니다.

간판개선 주민위원회의 역할은 주민의견 수렴, 간판 제작설치업체 선정, 간판디자인 컨셉 및 결정, 보조금 교부 및 사용, 정산 등 간판개선사업 전반에 해당되며, 간판의 사후 유지 관리 등의 역할도 담당합니다.

<추진일정>

본 심의위원회가 통과되면, 정비시범구역 지정 고시 예정이며, 이후 6월 중으로 간판개선주민위원회를 구성하여 성동구청과 업무협약을 체결할 계획입니다.

현재 도시재생과에서 추진중인 간판실시설계가 8월 경 마무리 되면, 디자인에 대한 옥외광고심의위원회 심의를 거쳐서 간판개선주민위원회가 선정한 간판제작설치 사업자를 통해 간판 설치작업을 12월까지 진행 할 계획입니다.

이상으로, 2021년도 송정동 중심가로 간판개선사업 제안에 대한 설명을 모두 마치겠습니다. 해당 내용에 대한 궁금하신 사항은 댓글 등으로 질의해 주시면 안건 상정시 총괄답변 드리도록 하겠습니다.