가락동 도매시장 시설현대화사업 추진상황 보고

(2018년 1분기(3. 30.) 현재)

□ ’18년 1분기(3. 30.) 현재 예산집행 실적

(단위 : 백만원)

구분		예산액 (A)	배정액	집행액 (B)		미집행
					B/A,%	잔액	이월액	불용액
합계		8,692	-	-	-	-	-	-
국비	소계	6,084	-	-	-	-	-	-
	보조	2,608	-	-	-	-	-	-
	융자	3,476	-	-	-	-	-	-
지방비		2,608	-	-	-	-	-	-

□ ’18년 1분기까지 추진상황(누계)

੦ 시설현대화사업 도매권역 2단계(채소2동) 후적지 정비 주요사항

- 청과직판 철거공사 가연성폐기물처리용역 : 공정률 65%

- 청과직판 및 건어제2경매장 철거공사 : 공정률 60%

੦ 시설현대화사업 도매권역 2단계(채소2동) 설계 및 감리

- 중간설계 및 조달청 중간설계적정성 검토 완료

੦ 시설현대화사업 도매권역 2단계(채소2동) 조사용역 등

- 교통영향평가 개선대책 수립용역 : 진도율 60%

- 문화재표본조사용역 : 진도율 50%

- 사후환경영향 조사 : 진도율 50%

□ 추진과정에서 나타난 문제점

੦ 도매권역 채소2동 공사비 증가에 따른 기재부 협의조정 지연

- 불가피한 공사비 증액으로 기재부 협의조정 지연으로 실시설계 등 순연

□ 문제점 해소대책

੦ 총사업비 협의조정 및 실시설계기간 단축 노력