□ 양식 제7호 서식 - (세출·기금·중기 공통) 사업설명서 □ - 사업설명서시스템 입력, 출력

예산서 P. 124

서울과학관 건립(작성예시)

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간	□ 연례반복, ☑ 2015.5 ~ 2022. 12
사업위치	서울특별시 노원구 한글비석로 30길 [지도에서 보기]
총사업비	총 천원/ [국비] [시비] /보조율(기준,실) [%]
사업내용	기존 서울국립과학관 대체하여 이전 신설
사업형태	☑ 직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □ 출연출자 □ 기타
사업시행주체
□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속		투자심사	학술용역	기술심사	민간보조심의	정보화심사	공유재산
□	☑	☑	□	□	□	□	☑
`11.11 조건부(국고보조 확보)					`12.1
경상	투자
□	☑
□ 민간보조사업 형태 및 법령근거
지원형태	법령근거	보조금심의회 의견
사업보조
운영비보조
□ 재정사업 평가 결과
매우 우수	우수	보통	미흡	매우미흡
□	☑	□	□	□
□ 사업 담당자
실․국	부서명	과 장	팀장	주무관
경제진흥본부	경제정책과	홍길동	김철호	이상
(연락처)	(연락처)	(연락처)

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2015년 본예산	2016 본예산 (A)	2017예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
계	(x4,000,000) 5,714,000	(x4,000,000) 5,714,000	(x8,000,000) 11,460,000
시설비	(x3,820,000) 5,534,000	(x3,820,000) 5,534,000	(x6,999,000) 10,459,000
감리비	-	-	(x789,000) 789,000
시설부대비	(x180,000) 180,000	(x180,000) 180,000	(x212,000) 212,000

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2016년 본예산	2017년 예산(안)	증감사유
시설비	간행물 구입 5종x20천원x12월 = 1,200	간행물 구입 8종x20천원x12월 = 1,920	간행물 구입 종류 증가(5종→8종)
감리비
시설 부대비

⃞  연차별 투자계획(투자사업의 경우) [재원별, 과목별, 사업별 선택하여 입력]

(단위 : 백만원)

구 분		계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계		(x32,953) 47,076	(x1,453) 4,953	(x15,541) 19,113	(x8,000) 11,460	(x7,959) 11,550
		(x1,266) 1,266	(x1,266) 1,266	-	-	-
		(x2,108) 2,108	(x168) 168	(x876) 876	(x789) 789	(x275) 275
		(x441) 441	(x19) 19	(x210) 210	(x212) 212	-
		(x29,138) 39,761	(x) 0	(x14,455) 18,027	(x6,999) 10,459	(x7,684) 11,275
		(x0) 3,500	(x0) 3,500	-	-	-

3		사업설명

□  사업목적

○  서울을 대표하는 신규 과학관을 건립하여 서울시민의 과학문화 이해도 제고

○  청소년들의 과학문화 체험기회 제공을 통한 과학적 창의성 도모

□  사업근거

○  법령상 근거

- 과학관의 설립‧운영 및 육성에 관한 법률

○  기타 근거(방침, 지침 등)

-『서울(강북권)과학관 건립사업』업무협약(서울시‧교과부‧기재부, ’11.7.22)

- 서울과학관 건립사업 추진계획(시장방침 제273호, ’13.10.10)

□  사업내용

○  위    치 : 노원구 한글비석로 168번지(하계동 산11번지 일대)

○  규    모 : 연 면 적 : 12,330.81㎡, 지하1층 / 지상3층 (부지면적 : 25,563.6㎡)

○  사업기간 : 2011. 7월 ~ 2018. 2월

○  사업내용 : 상설전시실, 기획전시실, 어린이전시실, 강당, 교육실, 세미나실 등

○  총사업비 : 47,076백만원 (설계비 1,2660 시설비 39,761 감리비 2,108 시설부대비 441 부지비 3,500)

□  2017년도 사업계획(투자사업의 경우)

○  위    치 : 노원구 한글비석로 168번지(하계동 산11번지 일대)

○  사업규모 : 연 면 적 : 12,330.81㎡, 지하1층 / 지상3층 (부지면적 : 25,563.6㎡)

○  사업내용 : 건축공사완료, 전시실시설계 완료 및 전시물 제작․설치 시행

○  소요예산(안) : 11,460백만원(시설비10,459, 감리비 789 시설부대비 212)

□  추진경위

○ ‘12.10.16	서울시 도시공원위원회 심의

○ ‘12.12.13 / 12.22	전시기본설계 / 건축설계 준공(구, 교과부)

※ ‘13.3.28~4.11 : 도시계획시설(공원)사업 실시계획 열람공고

○ ‘13.10.10	설계도서 및 업무 인수(미래창조과학부→서울시)

○ ‘13.10.10	서울과학관 건립사업 추진계획(시장방침 273호)

○ ‘14.10.17	도시계획시설(공원)실시계획 인가․고시

○ ‘15.10.26/31	책임감리용역 및 건축공사 계약

○ ‘16.02.28	착공식 행사개최

※ 2017년 중점추진사항(사업추진의 필요성)

『서울(강북권)과학관 건립사업』업무협약에 따른 연차별 투자계획에 따라 추진하는 사업으로 미래창조과학부 국고보조 가내시 및 `17년도 예상공정률에 따라 추진

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 예산편성⇒ 공사계약 ⇒ 선금지급 ⇒ 공사시행 ⇒ 기성금 등 지급

○  계약체결

- 계약심사 ⇒ 입찰공고 ⇒ 현장설명 ⇒ 사업수행능력평가 및 적격심사 ⇒ 업체선정  ⇒ 계약체결

⃞  2017년도 추진방향 및 추진일정

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		11,460
공사시행	2016.1~2017.2	8,000	건축골조공사 및 내외장 마감공사 완료
전시 실시설계 시행	2017.4~	441	전시 실시설계 실시
전시물제작·설치	2017.5~2018.2	3,019	전시물 제작․설치 시행

3		사업효과

□  최근 3년 추진실적

2014년도	‧ 서울시 도시공원위원회 심의
2015년도	‧ 도시계획시설(공원)사업 실시계획 공람 및 고시 ‧ 사업추진 계획수립, 책임감리 용역계약 및 건축공사계약
2016년도	‧ 지하층 터파기 공사 및 기초파일 공사

□   향후 기대효과

- 과학기술에 대한 국민의 이해제고와 참여기회 확대를 통해 과학기술발전에 대한 공감대 형성과 시민필요를 충족하는 문화적 구심점으로 역할 수행

4		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산 (A)	전년이월 (B)	예산변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2013
2014	(x2,541) 2,541			(x2,541) 2,541	(x-) -	(x2,541) 2,541
2015	(x9,000) 10,858	(x2,541) 2,541		(x11,541) 13,399	(x-) -	(x11,541) 13,399

4		외부기관 주요 평가

□  외부기관(국,시의회, 감사원, 언론 등) 주요 지적(평가)사항 및 조치결과

5		중기재정계획

(이호조 입력데이터 연동)

참 고 자 료

▢ 위치도 및 조감도

위  치  도

조 감 도