	예산서 P.
한강로 일대 방재시설 확충사업(계속사업 양식) <사업명 기재시 주의사항> 당초 사업설명서로 작성요망 단, 신규사업은 별도 신규사업설명서 작성요령에 따라 작성할 것

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간	□연례반복, ☑ 2013. 03 ~ 2025. 12. 해당사업의 전체기간 입력
사업위치	용산구 한강대교 북단 ~ 남영역
총사업비 해당사업의 전체사업비 입력	총 19,300,000천원		[국비]9,650,000천원	[시비]9,650,000천원	(보조율) 50 %	[구비]
사업내용
	○	배수구역 유역분할을 위한 하수관로 정비 해당사업의 전체사업의 주요내용 입력
사업형태	☑직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □출연출자 □민간위탁 □기타
사업시행주체	용산구청

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	민간보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산
□	☑	□	□	□	□	□	□	☑
경상	투자
□	☑

□ 재정사업 평가 결과
매우 우수	우수	보통	미흡	매우미흡	해당없음
□	□	□	□	□	☑

□ 사업 담당자
실․국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	물재생계획과	박홍봉 2133-3780	정한영 2133-3794	박영호 강남지역은 박영호 2133-3792 강북지역은 김성대 2133-3791 2133-3792

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원) 연차별 투자계획에 따라 정확한 사업비를 기재할 것
구 분			2021년 본예산	2022본예산 (A)		2023예산(안) (B)	증감 (B-A)
								(B-A)*100/A
계			(x1,000,000) 3,000,000	(x1,700,000) 3,400,000		(x1,500,000) 3,000,000	(x△200,000) △400,000	(x△11) △11
시설비			(x1,000,000) 3,000,000	(x1,700,000) 3,400,000		(x1,500,000) 3,000,000	(x△200,000) △400,000	(x△11) △11

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2022년 본예산
시설비
	○	하수관로 정비 3,400,000,000원×1식	=	3,400,000천원

과목구분	2023년 예산(안)
시설비
	○	관로부설(D1800,2련) 32,000,000원×66m 주1) 단가는 원단위로, 사업물량 단위(m, ㎡등) 필히 기재 바람 주2) 환경부 2021 하수도분야 보조금편성 및 집행관리 실무요령에 따라 작성된 서울시 공사비 단가적용(참고자료)	=	2,112,000천원 ※ 단위는 천원단위로 기재할 것
	○	관로부설(D2400) 22,000,000원×40m	=	880,000천원
	○	이전비 8,000,000원×1식	=	8,000천원

과목구분	증 감 사 유
시설비	계속사업으로 연차별 집행계획에 따라 ‘23년 예산편성 요구

□ 연차별 투자계획(투자사업의 경우)                       (단위 : 백만원)

연차별 투자계획에 따라 정확한

사업비를 기재할 것

구 분	계	기투자 (~2021)	2022	2023	2023 이후	비고
계	(x9,650) 19,300	(x-) 2,000	(x1,700) 3,400	(x1,500) 3,000	(x6,450) 10,900
시설비	(x9,650) 19,300	(x-) 2,000	(x1,700) 3,400	(x1,500) 3,000	(x6,450) 10,900

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	2010년 침수지역인 한강로 일대와 삼각지 및 신용산 지하차도 주변 방재시설물 확충사업을 시행하여 침수 피해 예방(자연재해위험지구로 지정 관리)

□ 사업근거
○	하수도법 제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)
○	한강로 일대 자연재해위험지구 지정 결정고시(區)[용산구고시 제2011-13호]

□ 사업내용 전체사업에 대하여 기재 - 사업규모, 소요예산 기재시 참고 (필히 전체분으로 기재바람)
○	위 치 : 용산구 한강대교 북단 ~ 남영역 간
○	규 모 : 유역분할 관거 - ▣2.0×2.0~D=2,400mm, L=1.26km(용산역~한강)
○	사업기간 : 2013. 12 ~ 2022. 12.
○	사업내용 : 유역분할을 위한 하수관로 정비
○	총사업비 : 19,300백만원(시설비 19,300)

□ 사업계획(투자사업의 경우) 2021년 예산편성분에 대하여 기재 - 사업규모, 소요예산 기재시 참고 신규사업은 사업내용과 사업계획 동일하게 기재
○	위 치 : 용산구 한강대교 북단 ~ 남영역 간
○	규 모 : D=1,800mm(2련), L=66m, D=2,400mm, L=40m
○	사업내용 : 유역분할을 위한 하수관로 정비
○	소요예산(안) : 3,000백만원(시설비 3,000백만원)

□ 추진경위
○	`10.09.21. : 집중호우 침수피해 발생[한강로 일대 및 신용산역, 신용산지하차도 침수]
○	`11.09.08. : 기본 및 실시설계 용역 착수(市)[`13.02.28. 완료]
○	`13.12.12. : 도시계획사업(방수설비) 결정 및 지형도면 고시[서울시고시 제2013-430호]
○	`14.04.24. : 빗물펌프장 설치 반대 집단민원발생[414명 연명부제출]
○	`14.07.24. : 주민설명회 개최(3차)[한강 중앙교회, 18:00~19:30](펌프장 위치변경)
○	`14.11.05. : 한강로 일대 방재시설 확충사업(관로공사 1차) 계약[11.07. 착공]

□ 중점추진사항(사업추진의 필요성)
○	한강로 일대는 자연재해위험지구로 지정된 곳으로 침수 예방을 위하여 배수구역의 유역분할을 위한 하수관로 정비가 필요함

□ 사업추진절차
○	집행절차
-		예산편성⇒ 공사발주 ⇒ 공사계약 ⇒ 공사시행 ⇒ 준공
○	계약체결
-		입찰공고 ⇒ 현장설명 ⇒ 업체선정 ⇒ 적격심사 ⇒계약체결

□ 2023년도 추진일정
사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		3,000,000
공사시행	2023.01 ~ 12		◯ 공사발주 및 계약
공사시행	2023.01 ~ 06	1,500,000	◯ 관로공사 추진 및 기성금 지급
공사시행	2023.01 ~ 12	1,500,000	◯ 관로공사 추진 및 준공금 지급

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

2019년도
	○	기본 및 실시설계 완료, 한강로 일대 빗물받이 확충
2020년도
	○	빗물펌프장 재설계에 따른 공사계획 변경
2021년도
	○	관로공사 1차(D=2,400mm, L=169m)
	○	관로공사 2차(D=2,400mm, L=200m)

□   향후 기대효과

○	한강로 일대의 침수피해를 예방하여 주민들의 생명과 재산을 보호

5		최근 3년 결산현황 계속사업의 경우에 해당 - 최근 3년 결산자료를 정확하게 기재하여 제출

(단위 : 천원)
연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2019	(x1,000,000) 3,000,000	(x-) 0	(x-) 0	(x1,000,000) 3,000,000	(x-) 104	(x-) 1,999,896	(x1,000,000) 1,000,000
2020	(x1,000,000) 3,000,000	(x-) 0	(x-) 0	(x1,000,000) 3,000,000	(x-) 104	(x-) 1,999,896	(x1,000,000) 1,000,000
2021	(x1,000,000) 3,000,000	(x-) 0	(x-) 0	(x1,000,000) 3,000,000	(x-) 104	(x-) 1,999,896	(x1,000,000) 1,000,000

참 고 자 료

▢ 위치도 및 조감도(현황도)

위  치  도

사업위치, 사업내용, 사업규모 등을

사업설명서와 일치되도록 작성하여 기재

사업위치도 및 현황도(사진) 작성을 동 사업의

필요성 및 시급성 등을 나타내는 매우 중요자료로 작성시 주의해서 작성 요망

※ 사진은 동 사업의 대표사진을 엄선하여 제출

위치도 사이즈 175*85㎜로 맞출 것

그림파일 작성시 문서에 포함하여 제출

그림파일 → 개체속성 → 그림 → ☑문서에 포함

※ 위치별로 각각 작성

- 통일성을 위해 서울시 전산시스템 활용하여 작성 요망(축척 통일)

【통합공간정보서비스 – GIS포털시스템 – 지도서비스 – 서울시지도검색(축척 100m 기준)】

(샘플예시)

- 굴착공사는 붉은색, 보수보강사업은 파란색 선으로 표기, 선굵기:1.5

현 황 도

※ 위치별로 각각 작성

주1) 그림파일 작성시 문서에 포함하여 제출

그림파일 → 개체속성 → 그림 → ☑문서에 포함

▢ 하수관망도

하수관망도

※ 위치별로 각각 작성

주1) 그림파일 작성시 문서에 포함하여 제출

그림파일 → 개체속성 → 그림 → ☑문서에 포함

▢ 안전점검 용역보고서(용역보고서 표지, 시설물 등급 및 개략사업비 부분 첨부)

▢ 시설물 상태등급평가자료, 수리검토서 등

주1) 그림파일 작성시 문서에 포함하여 제출

그림파일 → 개체속성 → 그림 → ☑문서에 포함