	예산서 P.
전농로14길 13-1 주변 외 2개소 사각형거 보수 사업명 기재시 주의사항 주) 사각형거 보수보강 사업명 작성시 주의사항 가. 단면보수 및 방청보수 등의 사업은 ◯◯ “사각형거 보수”로 작성 나. 관거재구축(전단면보강) 사업은 ◯◯ “사각형거보강”로 작성 다. 단면보수+관거재구축 복합사업은 ◯◯ “사각형거 보수보강”로 작성 라. 사업설명서 작성시 하수암거 대신에 “사각형거”로 통일하여 작성 제출 주) 하수관로 비굴착 보수사업은 ◯◯주변 “원형관로 보수”로 표기 주) 원형관로 보강(관거재구축)사업은 ◯◯주변 “원형관로 보강”로 표기 주) 사업설명서는 신주소(도로명 주소)로 표기하고 대표건축물(학교, 지하철역, 아파트 단지 등)주변 으로 사업명 표기 가능함. 예시)◯◯초등학교주변 노후 하수관로 개량 예시)◯◯초등학교주변 노후 사각형거 보수

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간	□연례반복, ☑ 2023. 03. ~ 2023. 11.
사업위치	동대문구 전농로 14길 13-1(전농동 27-23) 주변 외 2개소
총사업비	총 667,000천원		[국비]	[시비]667,000천원	(보조율) 100%	[구비]
사업내용
	○	노후 사각형거 단면보수 주) 사각형거 보수보강 사업명 작성시 주의사항을 참조하여 해당사업을 정확하게 기재
사업형태	☑직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □출연출자 □민간위탁 □기타
사업시행주체	동대문구청

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	민간보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산
☑	□	□	□	□	□	□	□	☑
경상	투자
□	☑

□ 재정사업 평가 결과
매우 우수	우수	보통	미흡	매우미흡	해당없음
□	□	□	□	□	☑

□ 사업 담당자
실․국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	물재생계획과	박홍봉 2133-3780	정한영 2133-3794	박영호 2133-3792

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2021년 본예산	2022본예산 (A)		2023예산(안) (B)	증감 (B-A)
								(B-A)*100/A
계			-	-		667,000	667,000	-
시설비			-	-		667,000	667,000	-

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2022년 본예산
시설비
	○	해당사항 없음	=

과목구분	2023년 예산(안) 주1) 단가는 원단위로, 사업물량 단위(m, ㎡등) 필히 기재 바람(‘22년 상반기 재난기금단가 참조) 주2) 이설비는 공사비의 20%이내 산정할 것 단, 불필요시 삭제 주3) 폐기물 처리비 등은 별도로 산정하여 표기 주4) 단면보수, 철근노출단면보수, 관거재구축(보강), 원형관로 보수, 원형관로 보강 중 택일하여 기재할 것
시설비
	○	단면보수 321,200원*1,505㎡	=	483,406천원
	○	철근노출단면복구 360,000원*187㎡	=	67,320천원
	○	이전비(작업구 설치, 폐기물 처리 등) 116,274천원	=	116,274천원

과목구분	증 감 사 유
시설비	시설물 노후화에 따른 사각형거 보수물량 증가

□ 연차별 투자계획(투자사업의 경우)                       (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2021)	2022	2023	2023 이후	비고
계	667	-	-	667	-
시설비	667	-	-	667	-

3		사 업 설 명

□ 사업목적 사업설명서 작성시 하수암거 대신에 “사각형거”로 통일하여 작성 제출
○	관내 20년 이상 노후된 하수암거에 대한 정밀점검을 실시하여 대상시설물의 물리적·기능적 결함의 신속·적절한 조치 및 보수·보강 등의 방법을 제시하여 시설물의 효용증진과 공공의 안전 확보

□ 사업근거
○	하수도법 제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)
○	20년 이상 노후사각형거의 안전 사각지대 해소를 위한 일제 안전점검 및 DB구축 시행계획[서울시 물재생계획과-5609(2012.05.08)]

□ 사업내용
○	사업위치 : 전농로14길 13-1(전농동 27-23) 주변 외 2개소
○	사업규모 : ▢1.0m×1.0m~▢1.2m×3.0m L=331m 주) 보수보강 대상 사각형거의 재원 및 연장으로 표기할 것
○	사업기간 : 2023. 03 ~ 2023. 12.
○	사업내용 : 노후 사각형거 보수 주3) 사각형거 보수보강 사업명 작성시 주의사항 가. 단면보수 및 방청보수 등의 사업은 ◯◯ “사각형거 보수”로 작성 나. 관거재구축(전단면보강) 사업은 ◯◯ “사각형거보강”로 작성 다. 단면보수+관거재구축 복합사업은 ◯◯ “사각형거 보수보강”로 작성 라. 사업설명서 작성시 하수암거 대신에 “사각형거”로 통일하여 작성 제출 주4) 하수관로 비굴착 보수사업은 ◯◯주변 “원형관로 보수”로 표기 주5) 원형관로 보강(관거재구축)사업은 ◯◯주변 “원형관로 보강”로 표기
○	총사업비 : 667백만원(시설비 667)

□ 사업계획(투자사업의 경우)
○	사업위치 : 전농로14길 13-1(전농동 27-23) 주변 외 2개소
○	사업규모 : 단면보수 1505㎡, 방청보수 187㎡ 주) 보수보강 물량 표기 단면보수, 방청보수, 보강(관거재구축)
○	사업내용 : 노후 사각형거 보수
○	소요예산(안) : 1,050백만원(시설비 1,050백만원)

□ 추진경위
○	`21.5.14. : 2021년 동대문 사각형거 안전점검 용역(1·2권역) 시행
○	`21.5.17. : 2021년 동대문 사각형거 안전점검 용역(1·2권역) 착수
○	`21.8.14. : 용역준공 예정

□ 중점추진사항(사업추진의 필요성)
○	20년 이상된 노후 하수암거에 대한 정밀점검 결과 안전등급 D등급 판정
○	주요부재에 철근노출, 마감불량, 재료분리 등 결함이 다수 발생하여 시설물의 공용기간 증대 및 안전사고 예방을 위해 사각형거 정비가 시급함.

□ 사업추진절차
○	집행절차
-		예산편성⇒ 공사발주 ⇒ 공사계약 ⇒ 공사시행 ⇒ 준공
○	계약체결
-		입찰공고 ⇒ 현장설명 ⇒ 업체선정 ⇒ 적격심사 ⇒계약체결

□ 2023년도 추진일정 (단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		667,000
공사발주	2023. 01. ~ 02.		설계서 작성, 일상감사 의뢰 공사발주 및 입찰
공사시행	2023. 02. ~ 06.	167,000	공사시행 및 기성금 지급
공사시행	2023. 06. ~ 11.	500,000	공사시행 및 준공금 지급

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

2020년도
	○	해당사항 없음
2021년도
	○	해당사항 없음
2022년도
	○	해당사항 없음

□   향후 기대효과

○	사각형거 손상부를 적기에 보수하여 내구성 및 안전성을 확보하고, 향후 발생할 수 있는 안전사고를 사전에 예방하여 주민들의 생명과 재산 보호

5		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)
연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2019
2020
2021

참 고 자 료

▢ 위치도 및 조감도(현황도)

위 치 도
사각형거 보수보강 사업위치, 사업내용, 사업규모 등을 사업설명서와 일치되도록 작성하여 기재 구간별로 작성할 것 사업위치도 및 현황도(사진) 작성을 동 사업의 필요성 및 시급성 등을 나타내는 매우 중요자료로 작성시 주의해서 작성 요망 ※ 사진은 동 사업의 대표사진을 엄선하여 제출 위치도 사이즈 175*85㎜로 맞출 것 그림파일 작성시 문서에 포함하여 제출 그림파일 → 개체속성 → 그림 → ☑문서에 포함 위치 : 중화동 52-1~묵동 195-5(1-10구간) 규모 : ▣1.5×1.5m~2.0×1.5m×2련, L=468m 내용 : 노후 사각형거 보수보강 A=1,347㎡ 사각형거 보수보강 위치 : 중화동 127-2~중화동 50-3(1-12구간) 규모 : ▣1.5×1.5m×1련, L=224m 내용 : 노후 사각형거 보수보강 A=1,344㎡
현 황 사 진 사진은 동 사업을 대표할 수 있는 사진으로 엄선하여 제출하고 사이즈 80*50㎜ 그림파일 작성시 문서에 포함하여 제출 그림파일 → 개체속성 → 그림 → ☑문서에 포함 구간 및 사각형거 손상상태 표기
1-10구간 슬래브 철근노출 및 열화/박리	1-10구간 벽체 재료분리 및 열화/박리
1-10구간 벽체 균열 및 파손	1-10구간 슬래브 철근노출 및 열화/박리

▢ 하수관망도

하수관망도(15구간)

사이즈 165*100㎜로 맞출 것

그림파일 작성시 문서에 포함하여 제출

그림파일 → 개체속성 → 그림 → ☑문서에 포함

하수관망도(16구간)

▢ 안전점검 용역보고서

표  지

15구간 □1.5×1.5, L=98m 전농동 27-23 일대

16구간 □1.5×1.5, L=96m 장안동 113-8 일대

18구간 □1.2×3.0~□1.2×2.0, L=137m 답십리동 53-33 일대